강원특별자치도 고시 제2024 - 294호

강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업 투자선도지구 실시계획(변경) 승인 고시

투자선도지구 사업으로 추진 중인‘강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업 투자선도지구’에 대하여「지역 개발 및 지원에 관한 법률」제23조 규정에 따라 실시계획을 변경 승인하고, 같은 법 제23조제3항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조제6항 규정에 따라 다음과 같이 변경 승인 고시합니다.

2024년  7월  5일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 사업명칭 (변경) : (당초) 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업
→ (변경) 강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성사업

2. 사업개요 (변경)

가. 목   적 : 소양강댐 심층수를 이용하는 수열에너지와 4차 산업혁명의 핵심인 데이터센터가 어우러진 클러스터 조성으로 정부의 물산업 육성정책 부응 및 지역 균형발전 도모

나. 위    치 : 강원특별자치도 춘천시 동면 지내리, 장학리 일원

다. 면    적 : (당초) 815,964㎡ → (변경) 815,687㎡

라. 사업기간 : 2020년 ~ 2027년

마. 사 업 비 : (당초) 360,697백만원 → (변경) 387,197백만원

3. 사업시행자 (변경)

가. 명    칭 : 춘천시, 한국수자원공사 공동시행

나. 주    소 : 춘천시 [강원도 춘천시 시청길 11(옥천동)]

한국수자원공사 [대전광역시 대덕구 신탄진로 200]

다. 성    명 : (당초) 춘천시장 육동한, 한국수자원공사장 직무대행 정경윤
→ (변경) 춘천시장 육동한, 한국수자원공사장 윤석대

4. 사업시행방식 (변경없음) : 취득, 수용 또는 사용하는 방식

5. 재원조달계획 및 연도별 투자계획 (변경)

가. 연차별 자금투입계획

(당초)

구분	합계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
금액(억원)	3,607	2	29	447	649	774	696	625	385

(변경)

구분	합계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
금액(억원)	3,872	6	31	447	1,057	703	539	485	604

나. 재원조달계획

○ 클러스터 조성 : 한국수자원공사 자체 자금 조달

○ 수열공급 설비 : 국고 및 지방비로 자금 조달

6. 수용 또는 사용할 토지 등 명세 (변경) : 〈붙임1〉

7. 인․ 허가 등의 의제 처리사항 및 당해 법령에서 정하는 고시내용 (변경)

가.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 도시관리계획 결정(변경) 및 동법 제50조
지구단위계획 결정(변경) :〈붙임2〉

8. 실시계획 승인조건 및 관계도서(사업시행지 위치도, 계획평면도, 개략설계도서 등)는 강원특별자치도 균형발전과 (☎033-249-3879) 및 춘천시 디지털산업과(☎033-245-5626)에 비치하여 일반인에게 보임.

◦ 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

부              칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[붙임1] 수용되거나 사용할 토지의 세목조서

일련 번호	구분	소재지 (춘천시 동면)	지번	지목	면적(㎡)					토지소유자		관계인		권리의 종류 및 내용	비고
					공부면적(㎡)		편입면적(㎡)		증감	성명 또는 명칭	주소	성명 또는 명칭	주소
					기정	변경	기정	변경
합 계					1,195,009	815,747	815,964	815,687	-277
1	기정	지내리	2-5	도	12,884		11,297			(국)국토교통부
	변경	지내리	2-50	도		11,259		11,259	-37	(국)국토교통부
	변경	지내리	2-51	도		1		1		(국)국토교통부
2	기정	지내리	2-6	임	421		96			(국)국토교통부
	변경	지내리	2-52	임		81		81	-15	(국)국토교통부
3	기정	지내리	2-7	전	1,435		1,435			권**	경기도 구리시 장자호수길 **, ***동 ***호	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
										엄**	경기도 용인시 기흥구 신정로**번길 **-*
	변경	지내리	2-7	전		1,435		1,435		권**	경기도 구리시 장자호수길 **, ***동 ***호	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
										한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
4	기정	지내리	2-11	대	585	585	585	585		양**	서울특별시 강서구 월정로**길 **, ***동 ***호	한************	서울특별시 광진구 중곡동 **-*	근저당권
5	기정	지내리	2-12	전	1,587	1,587	1,587	1,587		김**	강원특별자치도 춘천시 백령로**번길 **	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권/지상권
6	기정	지내리	2-16	도	53	53	53	53		양**	서울특별시 강서구 월정로**길 **, ***동 ***호	한************	서울특별시 광진구 영화사로 **(중곡동)	근저당권
7	기정	지내리	2-17	잡	98	98	98	98		양**	서울특별시 강서구 월정로**길 **, ***동 ***호	한************	서울특별시 광진구 영화사로 **(중곡동)	근저당권
8	기정	지내리	2-18	대	900		900			강**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*	근저당권
	변경	지내리	2-18	대		900		900		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
9	기정	지내리	2-19	전	728	728	728	728		권**	인천광역시 연수구 인턴타워대로 ***-**, ***동****호(송도동,송도아트윈푸르지오)	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
10	기정	지내리	2-20	대	834	834	834	834		양**	서울특별시 강서구 월정로**길 **, ***동 ***호	한************	서울특별시 광진구 영화사로 **(중곡동)	근저당권
11	기정	지내리	2-21	대	659		659			쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
	변경	지내리	2-21	대		659		659		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
12	기정	지내리	2-22	대	380	380	380	380		쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
13	기정	지내리	2-23	전	330	330	330	330		쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
14	기정	지내리	2-24	도	44	44	44	44		쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
15	기정	지내리	2-25	대	502		502			한*************	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***
	변경	지내리	2-25	대		502		502		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
16	기정	지내리	2-27	전	333		333			쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
	변경	지내리	2-27	전		333		333		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
17	기정	지내리	2-28	대	596	596	596	596		오**	강원특별자치도 춘천시 후평동 ***-*	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
18	기정	지내리	2-29	전	395	395	395	395		오**	강원특별자치도 춘천시 후평동 ***-*	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
19	기정	지내리	2-35	전	610	610	610	610		양**	서울특별시 강서구 월정로**길 **, ***동 ***호	한************	서울특별시 광진구 영화사로 **(중곡동)	근저당권
20	기정	지내리	2-36	전	429		429			권**	경기도 구리시 장자호수길 **, ***동 ***호	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
										엄**	경기도 용인시 기흥구 신정로**번길 **-*	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
	변경	지내리	2-36	전		429		429		권**	경기도 구리시 장자호수길 **, ***동 ***호	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
										한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
21	기정	지내리	2-37	전	198	198	198	198		쉬**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
22	기정	지내리	2-38	전	8	8	8	8		춘천시
23	기정	지내리	2-39	전	50	50	50	50		쉬**	경기도 성남시 분당구 정자일로 ***, 비동 ****호
24	기정	지내리	5	도	24	24	24	24		(국)기획재정부
25	기정	지내리	5-1	도	178		177			(국)기획재정부
	변경	지내리	5-2	도		177		177		(국)기획재정부
26	기정	지내리	6-1	답	1,125	1,125	1,125	1,125		(국)기획재정부
27	기정	지내리	6-2	전	1,146		1,146			이**	강원특별자치도 춘천시 동내면 점말길 **-*	신*******	강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 **	근저당권
	변경	지내리	6-2	전		1,146		1,146		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
28	기정	지내리	6-4	답	222		218			(국)기획재정부
	변경	지내리	6-5	답		215		215	-3	(국)기획재정부
29	기정	지내리	9-3	제	1,954		63			(국)국토교통부
	변경	지내리	9-4	제		63		63		(국)국토교통부
30	기정	지내리	14-3	잡	815	815	815	815		(국)기획재정부
31	기정	지내리	14-4	답	64		64			동***********	춘천시 동면 지내리 *
	변경	지내리	14-4	답		64		64		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
32	기정	지내리	15-1	답	155	155	155	155		(국)기획재정부
33	기정	지내리	16	잡	245	245	245	245		(국)기획재정부
34	기정	지내리	17-1	전	4,998		4,998			정**	춘천시 남산면 강촌리 ***-*	춘*********	춘천시 마장길 **(사농동)	근저당권/지상권
										정**	서울 강서구 가양동 **** 한강아파트 ***-****			근저당권/지상권
										강**	익산시 영등동 *** 동신아파트 ***-***			근저당권/지상권
										정**	서울시 동작구 대방동 *** 대림아파트 ***-****			근저당권/지상권
	변경	지내리	17-1	전		4,998		4,998		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
35	기정	지내리	17-2	답	2,159	2,159	2,159	2,159		(국)기획재정부
36	기정	지내리	18-1	전	6,012		6,012			정**	춘천시 남산면 강촌리 ***-*	춘*********	춘천시 마장길 **(사농동)	근저당권/지상권
										정**	서울 강서구 가양동 **** 한강아파트 ***-****			근저당권/지상권
										강**	익산시 영등동 *** 동신아파트 ***-***			근저당권/지상권
										정**	서울시 동작구 대방동 *** 대림아파트 ***-****			근저당권/지상권
	변경	지내리	18-1	전		6,012		6,012		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
37	기정	지내리	18-2	전	3,306		3,306			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 금옥*길 **
	변경	지내리	18-2	전		3,306		3,306		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
38	기정	지내리	18-3	답	951	951	951	951		(국)기획재정부
39	기정	지내리	18-5	전	133		133			이**	강원특별자치도 춘천시 동내면 점말길 **-*	신*******	강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 **	근저당권
	변경	지내리	18-5	전		133		133		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
40	기정	지내리	19	전	3,955		3,955			정**	춘천시 남산면 강촌리 ***-*	춘*********	춘천시 마장길 **(사농동)	근저당권/지상권
										정**	서울 강서구 가양동 **** 한강아파트 ***-****
										강**	익산시 영등동 *** 동신아파트 ***-***
										정**	서울시 동작구 대방동 *** 대림아파트 ***-****
	변경	지내리	19	전		3,955		3,955		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
41	기정	지내리	19-1	전	1,388		1,388			정**	춘천시 남산면 강촌리 ***-*	춘*********	춘천시 마장길 **(사농동)	근저당권/지상권
										정**	서울 강서구 가양동 **** 한강아파트 ***-****
										강**	익산시 영등동 *** 동신아파트 ***-***
										정**	서울시 동작구 대방동 *** 대림아파트 ***-****
	변경	지내리	19-1	전		1,388		1,388		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
42	기정	지내리	20-1	전	9,339		9,339			정**	강원특별자치도 춘천시 안마산로 ***, ***동****호(퇴계동,이편한세상한숲시티)	국**********		근저당권
	변경	지내리	20-1	전		9,339		9,339		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
43	기정	지내리	20-2	전	920		920			정**	강원특별자치도 춘천시 영서로 ****, ***동****호(퇴계동,퇴계이안아파트)	국**********		근저당권
	변경	지내리	20-2	전		920		920		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
44	기정	지내리	20-3	전	3,962		3,962			정**	강원특별자치도 춘천시 영서로 ****, ***동 ****호(퇴계동, 퇴계이안아파트)	국**********		근저당권
	변경	지내리	20-3	전		3,962		3,962		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
45	기정	지내리	21-1	전	7,390		3,031			정**	강원특별자치도 춘천시 안마산로 ***, ***동 ****호(퇴계동, 이편한세상한숲시티)	국**********		근저당권
	변경	지내리	21-5	전		3,023		3,023	-8	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
46	기정	지내리	22	전	6,069		6,069			정**	강원특별자치도 춘천시 안마산로 ***, ***동 ****호(퇴계동, 이편한세상한숲시티)	국**********		근저당권
	변경	지내리	22	전		6,069		6,069		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
47	기정	지내리	23	전	1,501		1,501			정**	서울 성북구 길음동 ***-* 가-**
										정**	서울 강서구 가양동 **** 한강아파트 ***-****
										강**	익산시 영등동 *** 동신아파트 ***-***
										정**	서울시 동작구 대방동 *** 대림아파트 ***-****
	변경	지내리	23	전		1,501		1,501		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
48	기정	지내리	25	전	508		508			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 ***
										김**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내양지길 **-**
	변경	지내리	25	전		508		508		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
49	기정	지내리	26-1	전	552		552			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 ***
										김**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내양지길 **-**
	변경	지내리	26-1	전		552		552		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
50	기정	지내리	26-2	도	443		443			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 ***
										김**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내양지길 **-**
	변경	지내리	26-2	도		443		443		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
51	기정	지내리	425-3	제	172	172	172	172		(국)국토교통부
52	기정	지내리	426-1	제	66	66	66	66		(국)국토교통부
53	기정	지내리	437-1	전	953		953			김**	경기도 김포시 김포한강*로 ***, ***동 ***호	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	437-1	전		953		953		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
54	기정	지내리	437-2	도	497		497			김**	춘천시 동면 지내리 불상번지
	변경	지내리	437-2	도		497		497		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
55	기정	지내리	437-3	전	106		106			김**	경기도 김포시 김포한강*로 ***, ***동 ***호	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	437-3	전		106		106		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
56	기정	지내리	440-1	제	1,675		556			(국)국토교통부
	변경	지내리	440-8	제		556		556		(국)국토교통부
57	기정	지내리	440-2	답	355		331			춘천시
	변경	지내리	440-9	답		331		331		춘천시
58	기정	지내리	440-5	답	4		4			고**	강원특별자치도 춘천시 우석로**번길 **-*
	변경	지내리	440-5	답		4		4		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
59	기정	지내리	441-2	천	3,841		101			(국)국토교통부
	변경	지내리	441-21	천		102		102	1	(국)국토교통부
60	기정	지내리	441-7	답	103		7			(국)기획재정부
	변경	지내리	441-25	답		7		7		(국)기획재정부
61	기정	지내리	441-9	천	283		65			(국)기획재정부
	변경	지내리	441-22	천		67		67	2	(국)기획재정부
62	기정	지내리	441-14	천	655		2			(국)기획재정부
	변경	지내리	441-26	천		2		2		(국)기획재정부
63	기정	지내리	441-15	답	34		32			(국)기획재정부
	변경	지내리	441-27	답		32		32		(국)기획재정부
64	기정	지내리	441-16	천	1,527		346			(국)국토교통부
	변경	지내리	441-23	천		195		195	1	(국)국토교통부
	변경	지내리	441-24	천		152		152		(국)국토교통부
65	기정	지내리	441-20	천	77		6			(국)기획재정부
	변경	지내리	441-28	천		6		6		(국)기획재정부
66	기정	지내리	446-4	답	512		427			(국)국토교통부
	변경	지내리	446-28	답		427		427		(국)국토교통부
67	기정	지내리	446-6	제	22	22	22	22		(국)기획재정부
68	기정	지내리	446-26	제	170		32			(국)기획재정부
	변경	지내리	446-29	제		32		32		(국)기획재정부
69	기정	지내리	447-1	잡	264		233			(국)국토교통부
	변경	지내리	447-13	잡		233		233		(국)국토교통부
70	기정	지내리	447-5	잡	251		227			(국)국토교통부
	변경	지내리	447-14	잡		227		227		(국)국토교통부
71	기정	지내리	447-6	잡	120		107			(국)국토교통부
	변경	지내리	447-15	잡		107		107		(국)국토교통부
72	기정	지내리	449-7	답	5	5	5	5		(국)국토교통부
73	기정	지내리	449-8	제	544		495			(국)기획재정부
	변경	지내리	449-19	제		495		495		(국)기획재정부
74	기정	지내리	449-9	제	427		224			(국)기획재정부
	변경	지내리	449-21	제		224		224		(국)기획재정부
75	기정	지내리	449-11	답	12		11			(국)기획재정부
	변경	지내리	449-20	답		11		11		(국)기획재정부
76	기정	지내리	449-14	답	7	7	7	7		(국)국토교통부
77	기정	지내리	449-15	답	12	12	12	12		(국)국토교통부
78	기정	지내리	449-16	답	79		79			(국)국토교통부
	변경	지내리	449-16	답		79		79		(국)환경부
79	기정	지내리	449-17	제	106		32			(국)기획재정부
	변경	지내리	449-22	제		32		32		(국)기획재정부
80	기정	지내리	450-1	제	1,385	1,385	1,385	1,385		(국)국토교통부
81	기정	지내리	450-2	천	1,098	1,098	1,098	1,098		(국)국토교통부
82	기정	지내리	451-4	천	1,785	1,785	1,785	1,785		(국)기획재정부
83	기정	지내리	451-5	제	123	123	123	123		(국)기획재정부
84	기정	지내리	451-6	천	60	60	60	60		(국)기획재정부
85	기정	지내리	451-16	천	791	791	791	791		(국)기획재정부
86	기정	지내리	451-17	제	257	257	257	257		(국)기획재정부
87	기정	지내리	451-18	답	647	647	647	647		(국)기획재정부
88	기정	지내리	451-19	제	1,225	1,225	1,225	1,225		(국)기획재정부
89	기정	지내리	457-1	목	966		51			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	457-15	목		51		51		이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
90	기정	지내리	457-14	전	77		17			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	457-16	전		17		17		윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
91	기정	지내리	659-2	전	725		665			지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	659-7	전		665		665		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
92	기정	지내리	659-5	도	621		429			(국)국토교통부
	변경	지내리	659-6	도		433		433	4	(국)국토교통부
93	기정	지내리	674-5	대	650		115			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	674-20	대		114		114	-1	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
94	기정	지내리	674-12	전	539		4			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	674-22	전		4		4		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
95	기정	지내리	674-15	대	575		575			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	674-15	대		575		575		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
96	기정	지내리	674-16	전	253		253			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	674-16	전		253		253		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
97	기정	지내리	674-19	임	68		50			박**	강원특별자치도 춘천시 승지골길**번길 **, ****동 ****호
	변경	지내리	674-21	임		50		50		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
98	기정	지내리	676-1	대	255		255			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-1	대		255		255		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
99	기정	지내리	676-8	전	620		620			조**	강원특별자치도 춘천시 후석로***번길 **	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	676-8	대		620		620		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
100	기정	지내리	676-9	도	21		15			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-18	도		14		14	-1	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
101	기정	지내리	676-10	전	908		249			윤**	서울특별시 종로구 지봉로 **. ***동 ****호
	변경	지내리	676-19	전		249		249		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
102	기정	지내리	676-12	대	91		91			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-12	대		91		91		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
103	기정	지내리	676-13	대	15		15			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-13	대		15		15		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
104	기정	지내리	676-14	대	125		125			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-14	대		125		125		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
105	기정	지내리	676-15	전	3		3			윤**	서울특별시 종로구 창신동 **-*** 창신이수아파트 ***-****
	변경	지내리	676-15	전		3		3		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
106	기정	지내리	676-16	전	306		306			조**	강원특별자치도 춘천시 후석로***번길 **	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	676-16	전		306		306		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
107	기정	지내리	676-17	전	99		99			조**	강원특별자치도 춘천시 후석로***번길 **	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	676-17	도		99		99		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
108	기정	지내리	680-1	답	443		273			(국)기획재정부
	변경	지내리	680-5	답		269		269	-4	(국)기획재정부
109	기정	지내리	680-2	대	524		140			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	680-6	대		140		140		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
110	기정	지내리	680-4	도	61		2			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	680-7	도		2		2		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
111	기정	지내리	681-1	전	994		994			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	681-1	전		994		994		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
112	기정	지내리	681-2	답	1,740		913			(국)기획재정부
	변경	지내리	681-43	답		906		906	-7	(국)기획재정부
113	기정	지내리	681-12	답	1,479		1,462			(국)국토교통부
	변경	지내리	681-49	답		1,462		1,462		(국)국토교통부
114	기정	지내리	681-16	답	174	174	174	174		(국)기획재정부
115	기정	지내리	681-27	도	118	118	118	118		(국)국토교통부
116	기정	지내리	681-28	제	314		120			(국)기획재정부
	변경	지내리	681-44	제		121		121	1	(국)기획재정부
117	기정	지내리	681-30	답	1,545		335			(국)국토교통부
	변경	지내리	681-50	답		335		335		(국)국토교통부
118	기정	지내리	681-31	답	15	15	15	15		(국)국토교통부
119	기정	지내리	681-32	답	9		9			(국)국토교통부
	변경	지내리	681-32	답		9		9		(국)환경부
120	기정	지내리	681-34	제	3,730		3,409			(국)기획재정부
	변경	지내리	681-48	제		3,434		3,434	25	(국)기획재정부
121	기정	지내리	681-35	제	1,247		168			(국)기획재정부
	변경	지내리	681-51	제		168		168		(국)기획재정부
122	기정	지내리	681-41	대	68		68			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	681-41	대		68		68		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
123	기정	지내리	681-42	전	1,646		1,646			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	681-42	전		1,646		1,646		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
124	기정	지내리	691-2	전	290		290			유**	강원특별자치도 춘천시 영서로****번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	691-2	전		290		290		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
125	기정	지내리	691-5	대	603		603			오**	경기도 남양주시 수동면 비룡로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
	변경	지내리	691-5	대		603		603		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
126	기정	지내리	691-7	임	13		13			오**	경기도 남양주시 수동면 비룡로 ***	주*******	서울특별시 중구 세종대로*길 **	근저당권
	변경	지내리	691-7	임		13		13		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
127	기정	지내리	691-8	전	441		441			윤**	춘성군 동면 지내리 ***
	변경	지내리	691-8	전		441		441		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
128	기정	지내리	691-9	도	18	18	18	18		(국)기획재정부
129	기정	지내리	691-10	대	177		177			오**	경기도 남양주시 수동면 비룡로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권
	변경	지내리	691-10	대		177		177		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
130	기정	지내리	692-1	묘	1,432		423			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	692-3	묘		423		423		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
131	기정	지내리	696	전	358		358			우**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***, ****동 ***호(장학lh해온채)
	변경	지내리	696	전		358		358		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
132	기정	지내리	698	도	233		76			(국)국토교통부
	변경	지내리	698-11	도		30		30	1	(국)국토교통부
	변경	지내리	698-12	도		47		47		(국)국토교통부
133	기정	지내리	698-1	도	683	683	683	683		(국)기획재정부
134	기정	지내리	698-6	대	282	282	282	282		(국)기획재정부
135	기정	지내리	698-7	도	407	407	407	407		(국)국토교통부
136	기정	지내리	698-8	도	189	189	189	189		(국)기획재정부
137	기정	지내리	698-9	도	161	161	161	161		(국)국토교통부
138	기정	지내리	708-1	천	57,880		7,404			(국)국토교통부
	변경	지내리	708-67	천		7,320		7,320	-84	(국)국토교통부
139	기정	지내리	708-21	제	1,830	1,830	1,830	1,830		(국)국토교통부
140	기정	지내리	708-52	제	1,362		90			(국)국토교통부
	변경	지내리	708-68	제		89		89	-1	(국)국토교통부
141	기정	지내리	708-53	제	1,258		165			(국)국토교통부
	변경	지내리	708-69	제		186		186	21	(국)국토교통부
142	기정	지내리	742	도	1,221		143			(국)국토교통부
	변경	지내리	742-18	도		163		163	20	(국)국토교통부
143	기정	지내리	742-1	도	168		68			(국)기획재정부
	변경	지내리	742-19	도		67		67	-1	(국)기획재정부
144	기정	지내리	742-4	도	24	24	24	24		(국)기획재정부
145	기정	지내리	746-1	제	249	249	249	249		(국)국토교통부
146	기정	지내리	746-2	도	486		424			(국)국토교통부
	변경	지내리	746-3	도		426		426	2	(국)국토교통부
147	기정	지내리	747-1	제	511		51			(국)국토교통부
	변경	지내리	747-5	제		51		51		(국)국토교통부
148	기정	지내리	747-2	구	43	43	43	43		(국)국토교통부
149	기정	지내리	750	답	1,428		1,428			김**	춘천시 퇴계동 ***-* 그린타운아파트 ***-****
										함**	춘천시 퇴계동 *** 한주아파트 ***-****
	변경	지내리	750	답		1,428		1,428		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
150	기정	지내리	751	답	1,990		1,990			김**	춘천시 퇴계동 ***-* 그린타운아파트 ***-****
										함**	춘천시 퇴계동 *** 한주아파트 ***-****
	변경	지내리	751	답		1,990		1,990		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
151	기정	지내리	751-1	답	889		889			김**	춘천시 퇴계동 ***-* 그린타운아파트 ***-****
										함**	춘천시 퇴계동 *** 한주아파트 ***-****
	변경	지내리	751-1	답		889		889		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
152	기정	지내리	751-2	도	78	78	78	78		춘천시
153	기정	지내리	751-3	도	11	11	11	11		춘천시
154	기정	지내리	752	전	2,013		2,013			김**	강원특별자치도 춘천시 사우로 **-*	춘*******	춘천시 소양로*가 ***-*	근저당권
	변경	지내리	752	전		2,013		2,013		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
155	기정	지내리	752-1	답	1,044		1,044			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	752-1	답		1,044		1,044		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
156	기정	지내리	753	전	1,008		1,008			김**	강원특별자치도 춘천시 사우로 **-*
	변경	지내리	753	전		1,008		1,008		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
157	기정	지내리	754	전	1,961		1,961			김**	강원특별자치도 춘천시 사우로 **-*	춘*******	춘천시 소양로*가 ***-*	근저당권
	변경	지내리	754	전		1,961		1,961		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
158	기정	지내리	755	전	2,734	2,734	2,734	2,734		윤**	춘천시 동면 지내리 ***
159	기정	지내리	755-1	전	660		660			윤**	춘천시 동면 지내리 ***	국*******	강원특별자치도 원주시 삼보로 **(반곡동, 국민건강보험공단)	압류
	변경	지내리	755-1	전		660		660		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
160	기정	지내리	756	답	1,400		1,400			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	756	답		1,400		1,400		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
161	기정	지내리	756-1	답	844		844			유**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ***호
	변경	지내리	756-1	답		844		844		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
162	기정	지내리	757	답	3,046		3,046			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	757	답		3,046		3,046		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
163	기정	지내리	758	과	2,886		2,886			안**	강원특별자치도 춘천시 신북읍 배후령길 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	758	과		2,886		2,886		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
164	기정	지내리	759	과	1,065		1,065			안**	강원특별자치도 춘천시 신북읍 배후령길 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	759	과		1,065		1,065		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
165	기정	지내리	760	답	1,674		1,674			계**	춘천시 동면 지내리 ***	동*******	춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	760	답		1,674		1,674		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
166	기정	지내리	761	답	2,496		2,496			유**	춘천시 봉의동 **-*	동*******	춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	761	답		2,496		2,496		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
167	기정	지내리	762	과	2,780		2,780			안**	강원특별자치도 춘천시 신북읍 배후령길 ***
	변경	지내리	762	과		2,780		2,780		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
168	기정	지내리	763	답	5,100		5,100			박**	서울특별시 광진구 용마산로**길 **, *동 ***호	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
										김**	인천 남구 용현동 ***-**
	변경	지내리	763	답		5,100		5,100		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
169	기정	지내리	764	전	1,132		1,132			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	764	전		1,132		1,132		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
170	기정	지내리	764-1	답	668	668	668	668		(국)기획재정부
171	기정	지내리	764-2	답	1,332	1,332	1,332	1,332		(국)기획재정부
172	기정	지내리	765	전	2,932		2,932			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	765	전		2,932		2,932		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
173	기정	지내리	766	답	3,033		3,033			정**	강원특별자치도 춘천시 서면 금산리 ***	서********	강원특별자치도 춘천시 서면 금산리 ***-*	근저당권
										박**	인천광역시 남동구 만수동 ***-** 동남아파트 비-***
										박**	전남 무안군 청계면 도림리 ***-**
	변경	지내리	766	답		3,033		3,033		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
174	기정	지내리	767	답	2,927		2,927			정**	강원특별자치도 춘천시 서면 금산리 ***	서********	강원특별자치도 춘천시 서면 금산리 ***-*	근저당권
										박**	인천광역시 남동구 만수동 ***-** 동남아파트 비-***
										박**	전남 무안군 청계면 도림리 ***-**
	변경	지내리	767	답		2,927		2,927		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
175	기정	지내리	768	답	2,539		2,539			지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	768	답		2,539		2,539		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
176	기정	지내리	769	답	538	538	538	538		(국)농림축산식품부
177	기정	지내리	770	답	2,659		2,659			지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	770	답		2,659		2,659		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
178	기정	지내리	771	답	1,812		1,812			지**	춘천시 효자동 ***-**
	변경	지내리	771	답		1,812		1,812		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
179	기정	지내리	772	도	74	74	74	74		(국)농림축산식품부
180	기정	지내리	772-1	도	6	6	6	6		(국)농림축산식품부
181	기정	지내리	773	구	13,625		13,150			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	773-3	구		13,143		13,143	-7	(국)농림축산식품부
182	기정	지내리	774	도	2,880	2,880	2,880	2,880		(국)농림축산식품부
183	기정	지내리	775	도	602		314			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	775-1	도		314		314		(국)농림축산식품부
184	기정	지내리	776	답	1,534		1,534			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	776	답		1,534		1,534		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
185	기정	지내리	777	답	2,984		2,984			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	777	답		2,984		2,984		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
186	기정	지내리	778	답	3,027		3,027			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	778	답		3,027		3,027		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
187	기정	지내리	779	전	2,846		2,846			황**	춘천시 봉의동 **-*	동*******	춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	779	전		2,846		2,846		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
188	기정	지내리	780	전	2,957		2,957			이**	강원특별자치도 춘천시 삭주로***번길 **	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	780	전		2,957		2,957		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
189	기정	지내리	781	답	660		660			이**	경기도 과천시 별양로 **, ***동 ****호
										송**	경기도 과천시 별양로 **, ***동 ****호
	변경	지내리	781	답		660		660		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
190	기정	지내리	781-1	답	2,272		2,272			이**	경기도 과천시 별양로 **, ***동 ****호
										송**	경기도 과천시 별양로 **, ***동 ****호
	변경	지내리	781-1	답		2,272		2,272		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
191	기정	지내리	782	답	3,067		3,067			박**	춘천시 후평동 ***-**	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
										송**	강원특별자치도 춘천시 부평길 *
	변경	지내리	782	답		3,067		3,067		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
192	기정	지내리	783	답	3,132		3,132			박**	춘천시 후평동 ***-**	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
										송**	강원특별자치도 춘천시 부평길 *
	변경	지내리	783	답		3,132		3,132		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
193	기정	지내리	784	답	1,016		1,016			박**	춘천시 후평동 ***-**	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
										송**	강원특별자치도 춘천시 부평길 *
	변경	지내리	784	답		1,016		1,016		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
194	기정	지내리	784-1	답	1,852		1,852			박**	춘천시 후평동 ***-**	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
										송**	강원특별자치도 춘천시 부평길 *
	변경	지내리	784-1	답		1,852		1,852		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
195	기정	지내리	784-2	답	1,918		1,918			박**	춘천시 후평동 ***-**	춘*********	강원특별자치도 춘천시 마장길 **	근저당권/지상권
										송**	강원특별자치도 춘천시 부평길 *
	변경	지내리	784-2	답		1,918		1,918		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
196	기정	지내리	785	답	2,320		2,320			지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	785	답		2,320		2,320		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
197	기정	지내리	786	답	2,896		2,896			유**	서울특별시 송파구 위례광장로 ***, ****동 ***호
	변경	지내리	786	답		2,896		2,896		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
198	기정	지내리	787	답	3,036		3,036			유**	강원특별자치도 원주시 토지길 **-**
	변경	지내리	787	답		3,036		3,036		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
199	기정	지내리	788	답	2,922		2,922			유**	강원특별자치도 원주시 토지길 **-**
	변경	지내리	788	답		2,922		2,922		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
200	기정	지내리	789	답	2,702		2,702			유**	강원특별자치도 춘천시 영서로****번길 **, ***동 ****호
										유**	서울특별시 송파구 위례광장로 ***, ****동 ***호
	변경	지내리	789	답		2,702		2,702		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
201	기정	지내리	790	전	2,918		2,918			윤**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	790	전		2,918		2,918		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
202	기정	지내리	791	전	3,006		3,006			윤**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	791	전		3,006		3,006		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
203	기정	지내리	792	답	2,888		2,888			윤**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	792	답		2,888		2,888		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
204	기정	지내리	793	답	2,852		2,852			박**	춘천시 소양로*가 ***-*
	변경	지내리	793	답		2,852		2,852		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
205	기정	지내리	794	답	1,650		1,650			박**	춘천시 소양로*가 ***-*
	변경	지내리	794	답		1,650		1,650		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
206	기정	지내리	795	답	1,626		1,626			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	795	답		1,626		1,626		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
207	기정	지내리	795-1	답	1,434		1,434			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	795-1	답		1,434		1,434		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
208	기정	지내리	796	답	2,675		2,675			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	이**	강원특별자치도 춘천시 방송길 **,***동 ****호(온의동, 온의 롯데캐슬스카이클래스)	근저당권
	변경	지내리	796	답		2,675		2,675		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
209	기정	지내리	797	답	2,013	2,013	2,013	2,013		(국)기획재정부
210	기정	지내리	798	답	4,796		4,796			전**	춘천시 효자동 ***-**
	변경	지내리	798	답		4,796		4,796		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
211	기정	지내리	799	답	2,966		2,966			윤**	춘성군 동면 지내리 ***
	변경	지내리	799	답		2,966		2,966		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
212	기정	지내리	800	답	3,047		3,047			윤**	춘성군 동면 지내리 ***
	변경	지내리	800	답		3,047		3,047		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
213	기정	지내리	801	답	2,948		2,948			윤**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	801	답		2,948		2,948		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
214	기정	지내리	802	답	3,095		3,095			윤**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	802	답		3,095		3,095		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
215	기정	지내리	803	답	2,772		2,772			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	803	답		2,772		2,772		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
216	기정	지내리	804	답	3,078		3,078			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	804	답		3,078		3,078		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
217	기정	지내리	805	답	3,072		3,072			유**	강원특별자치도 춘천시 후석로***번길 **, ***동 ***호
	변경	지내리	805	답		3,072		3,072		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
218	기정	지내리	806	답	3,083		3,083			지**	춘천시 효자동 ***-**
	변경	지내리	806	답		3,083		3,083		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
219	기정	지내리	807	도	8,453	8,453	8,453	8,453		(국)농림축산식품부
220	기정	지내리	807-1	도	498		377			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	807-10	도		372		372	-5	(국)농림축산식품부
221	기정	지내리	807-2	도	796	796	796	796		(국)농림축산식품부
222	기정	지내리	807-4	도	7,639		3,797			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	807-12	도		111		111	51	(국)농림축산식품부
	변경	지내리	807-13	도		1,373		1,373		(국)농림축산식품부
	변경	지내리	807-14	도		1,646		1,646		(국)농림축산식품부
	변경	지내리	807-15	도		718		718		(국)농림축산식품부
223	기정	지내리	807-5	도	1,258	1,258	1,258	1,258		(국)농림축산식품부
224	기정	지내리	807-6	도	29	29	29	29		(국)농림축산식품부
225	기정	지내리	807-7	도	39	39	39	39		(국)농림축산식품부
226	기정	지내리	807-8	도	267	267	267	267		(국)농림축산식품부
227	기정	지내리	807-9	도	160	160	160	160		(국)농림축산식품부
228	기정	지내리	808	구	1,239		1,238			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-16	구		1,218		1,218	-20	(국)농림축산식품부
229	기정	지내리	808-1	구	1,298	1,298	1,298	1,298		(국)농림축산식품부
230	기정	지내리	808-2	구	1,192	1,192	1,192	1,192		(국)농림축산식품부
231	기정	지내리	808-3	구	6,441		6,425			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-17	구		6,425		6,425		(국)농림축산식품부
232	기정	지내리	808-4	구	399	399	399	399		(국)농림축산식품부
233	기정	지내리	808-5	구	389		259			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-18	구		265		265	6	(국)농림축산식품부
234	기정	지내리	808-6	구	3,029	3,029	3,029	3,029		(국)농림축산식품부
235	기정	지내리	808-7	구	39	39	39	39		(국)기획재정부
236	기정	지내리	808-8	구	1,906		1,390			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-19	구		1,386		1,386	-4	(국)농림축산식품부
237	기정	지내리	808-9	구	352	352	352	352		(국)농림축산식품부
238	기정	지내리	808-10	구	170	170	170	170		(국)농림축산식품부
239	기정	지내리	808-11	구	122	122	122	122		(국)농림축산식품부
240	기정	지내리	808-12	구	161	161	161	161		(국)농림축산식품부
241	기정	지내리	808-13	구	512	512	512	512		(국)농림축산식품부
242	기정	지내리	808-14	구	4,071		816			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-21	구		274		274	-44	(국)농림축산식품부
	변경	지내리	808-22	구		498		498		(국)농림축산식품부
243	기정	지내리	808-15	구	635	635	635	635		(국)농림축산식품부
244	기정	지내리	809	답	849		849			지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	809	답		849		849		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
245	기정	지내리	809-1	도	95	95	95	95		(국)국토교통부
246	기정	지내리	810	답	2,827		2,827			지**	춘천시 효자동 ***-**
	변경	지내리	810	답		2,827		2,827		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
247	기정	지내리	810-1	도	229	229	229	229		(국)국토교통부
248	기정	지내리	811	답	2,918		2,918			안**	경기도 시흥시 배곧*로 ***-**, ****동 ****호(정왕동, 호반베르디움센트로하임)	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	811	답		2,918		2,918		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
249	기정	지내리	812	답	2,892		2,892			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	812	답		2,892		2,892		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
250	기정	지내리	813	답	2,746		2,746			이**	춘천시 동면 지내리 ***-*	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	813	답		2,746		2,746		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
251	기정	지내리	814	구	1,509	1,509	1,509	1,509		(국)농림축산식품부
252	기정	지내리	814-1	구	240	240	240	240		(국)농림축산식품부
253	기정	지내리	814-2	구	1,350		569			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	814-5	구		569		569		(국)농림축산식품부
254	기정	지내리	814-3	구	271	271	271	271		(국)농림축산식품부
255	기정	지내리	815	답	1,990		1,990			이**	춘천시 동면 지내리 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	815	답		1,990		1,990		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
256	기정	지내리	816	답	961		961			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	816	답		961		961		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
257	기정	지내리	817	답	2,986		2,986			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	817	답		2,986		2,986		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
258	기정	지내리	818	답	990		990			계**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **		****
	변경	지내리	818	답		990		990		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
259	기정	지내리	818-1	목	2,032		2,032			계**	춘성군 동면 지내리 ***
	변경	지내리	818-1	목		2,032		2,032		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
260	기정	지내리	819	답	3,003	3,003	3,003	3,003		(국)기획재정부
261	기정	지내리	820	답	2,816	2,816	2,816	2,816		(국)기획재정부
262	기정	지내리	821	답	2,925		2,925			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	이**	강원특별자치도 춘천시 방송길 **, ***동 ****호(온의동, 온의 롯데캐슬스카이클래스)	근저당권
	변경	지내리	821	답		2,925		2,925		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
263	기정	지내리	822	답	2,988	2,988	2,988	2,988		(국)기획재정부
264	기정	지내리	823	답	2,902		2,902			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	823	답		2,902		2,902		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
265	기정	지내리	824	답	2,960	2,960	2,960	2,960		조**	경기도 안양시 동안구 흥안대로***번길 **, ***동 ***호
266	기정	지내리	825	답	3,005		3,005			춘천시
	변경	지내리	825	답		3,005		3,005		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
267	기정	지내리	826	답	2,947	2,947	2,947	2,947		(국)기획재정부
268	기정	지내리	827	답	2,799	2,799	2,799	2,799		(국)기획재정부
269	기정	지내리	828	답	3,075	3,075	3,075	3,075		(국)기획재정부
270	기정	지내리	828-1	답	25	25	25	25		(국)국토교통부
271	기정	지내리	829	답	1,714		1,714			윤**	춘천시 온의동 ***-*
	변경	지내리	829	답		1,714		1,714		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
272	기정	지내리	829-1	도	258	258	258	258		(국)국토교통부
273	기정	지내리	830	답	768		768			송**	춘천시 우두동 ***
	변경	지내리	830	답		768		768		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
274	기정	지내리	830-1	도	190	190	190	190		(국)국토교통부
275	기정	지내리	831	답	2,091	2,091	2,091	2,091		송**	춘천시 우두동 ***
276	기정	지내리	831-1	도	904	904	904	904		(국)국토교통부
277	기정	지내리	832	답	1,193	1,193	1,193	1,193		정**	춘천시 우두동 ***
278	기정	지내리	832-1	도	881	881	881	881		(국)국토교통부
279	기정	지내리	833	답	497		497			송**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***-*
	변경	지내리	833	답		497		497		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
280	기정	지내리	833-1	도	511	511	511	511		(국)국토교통부
281	기정	지내리	834	답	873		873			우**	강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 **, ***동 ***호
	변경	지내리	834	답		873		873		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
282	기정	지내리	834-1	도	1,584	1,584	1,584	1,584		(국)국토교통부
283	기정	지내리	834-2	답	165		143			(국)기획재정부
	변경	지내리	834-3	답		137		137	-6	(국)기획재정부
284	기정	지내리	835	답	258	258	258	258		(국)기획재정부
285	기정	지내리	835-1	도	770		672			(국)국토교통부
	변경	지내리	835-2	도		637		637	-35	(국)국토교통부
286	기정	지내리	836	답	3,090	3,090	3,090	3,090		(국)기획재정부
287	기정	지내리	837	답	2,618		2,618			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	837	답		2,618		2,618		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
288	기정	지내리	838	답	3,024		3,024			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	838	답		3,024		3,024		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
289	기정	지내리	839	답	2,996	2,996	2,996	2,996		(국)기획재정부
290	기정	지내리	840	답	2,962		2,962			계**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	840	답		2,962		2,962		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
291	기정	지내리	841	답	1,622	1,622	1,622	1,622		(국)기획재정부
292	기정	지내리	842	답	1,662	1,662	1,662	1,662		(국)기획재정부
293	기정	지내리	843	답	2,527		2,527			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
	변경	지내리	843	답		2,527		2,527		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
294	기정	지내리	843-1	답	461	461	461	461		(국)기획재정부
295	기정	지내리	844	답	3,014		3,014			(국)기획재정부
	변경	지내리	844	답		3,014		3,014		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
296	기정	지내리	845	답	3,020	3,020	3,020	3,020		(국)기획재정부
297	기정	지내리	846	답	1,386	1,386	1,386	1,386		(국)기획재정부
298	기정	지내리	846-1	답	239	239	239	239		(국)국토교통부
299	기정	지내리	847	답	2,271	2,271	2,271	2,271		(국)기획재정부
300	기정	지내리	847-1	답	670	670	670	670		(국)국토교통부
301	기정	지내리	848	답	2,089	2,089	2,089	2,089		(국)기획재정부
302	기정	지내리	848-1	답	1,013	1,013	1,013	1,013		(국)국토교통부
303	기정	지내리	849	답	1,632	1,632	1,632	1,632		(국)기획재정부
304	기정	지내리	849-1	답	1,289	1,289	1,289	1,289		(국)국토교통부
305	기정	지내리	850	답	2,250	2,250	2,250	2,250		(국)기획재정부
306	기정	지내리	850-1	답	667	667	667	667		(국)국토교통부
307	기정	지내리	851	답	1,957	1,957	1,957	1,957		(국)기획재정부
308	기정	지내리	851-1	답	993	993	993	993		(국)국토교통부
309	기정	지내리	852	답	1,608	1,608	1,608	1,608		(국)기획재정부
310	기정	지내리	852-1	답	1,395	1,395	1,395	1,395		(국)국토교통부
311	기정	지내리	853	답	1,047	1,047	1,047	1,047		(국)기획재정부
312	기정	지내리	853-1	답	1,725	1,725	1,725	1,725		(국)국토교통부
313	기정	지내리	853-2	답	226	226	226	226		(국)국토교통부
314	기정	지내리	853-3	답	10	10	10	10		(국)국토교통부
315	기정	지내리	854	답	72	72	72	72		(국)기획재정부
316	기정	지내리	854-1	답	749	749	749	749		(국)국토교통부
317	기정	지내리	854-2	답	491	491	491	491		(국)국토교통부
318	기정	지내리	854-3	답	42	42	42	42		(국)국토교통부
319	기정	지내리	854-4	답	256	256	256	256		(국)국토교통부
320	기정	지내리	855	도	296	296	296	296		(국)농림축산식품부
321	기정	지내리	855-1	도	164	164	164	164		(국)농림축산식품부
322	기정	지내리	855-2	도	917	917	917	917		(국)농림축산식품부
323	기정	지내리	855-3	도	14	14	14	14		(국)기획재정부
324	기정	지내리	855-4	도	553		528			(국)기획재정부
	변경	지내리	855-8	도		539		539	11	(국)기획재정부
325	기정	지내리	855-5	도	68	68	68	68		(국)농림축산식품부
326	기정	지내리	855-6	도	184	184	184	184		(국)농림축산식품부
327	기정	지내리	855-7	도	158	158	158	158		(국)농림축산식품부
328	기정	지내리	856	대	656		656			홍**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
										김**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	856	대		656		656		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
329	기정	지내리	856-1	도	151		151			홍**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
										김**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	856-1	도		151		151		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
330	기정	지내리	856-2	양	742		742			홍**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
										김**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	856-2	양		742		742		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
331	기정	지내리	856-3	도	9		9			홍**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
										김**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	856-3	도		9		9		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
332	기정	지내리	856-4	대	4		4			홍**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
										김**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	856-4	대		4		4		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
333	기정	지내리	857	답	2,222	2,222	2,222	2,222		(국)기획재정부
334	기정	지내리	857-1	답	700	700	700	700		(국)기획재정부
335	기정	지내리	858	답	513	513	513	513		(국)국토교통부
336	기정	지내리	858-1	답	388		388			계**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	858-1	답		388		388		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
337	기정	지내리	858-2	답	1,523	1,523	1,523	1,523		(국)국토교통부
338	기정	지내리	858-3	답	586		586			계**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	858-3	답		586		586		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
339	기정	지내리	859	답	2,373	2,373	2,373	2,373		(국)기획재정부
340	기정	지내리	859-1	답	545	545	545	545		(국)국토교통부
341	기정	지내리	860	답	2,958		2,958			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***
	변경	지내리	860	답		2,958		2,958		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
342	기정	지내리	861	답	1,171		1,171			안**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	춘*******	강원특별자치도 춘천시 소양로 ***
	변경	지내리	861	답		1,171		1,171		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
343	기정	지내리	861-1	답	519	519	519	519		(국)국토교통부
344	기정	지내리	862	답	1,007	1,007	1,007	1,007		(국)기획재정부
345	기정	지내리	862-1	도	14	14	14	14		(국)기획재정부
346	기정	지내리	862-2	답	219	219	219	219		(국)국토교통부
347	기정	지내리	863	답	326	326	326	326		(국)기획재정부
348	기정	지내리	863-1	도	1,656		1,315			(국)국토교통부
	변경	지내리	863-2	도		1,252		1,252	-63	(국)국토교통부
349	기정	지내리	864	답	105	105	105	105		(국)기획재정부
350	기정	지내리	864-1	도	2,647		2,011			(국)국토교통부
	변경	지내리	864-3	도		1,928		1,928	-83	(국)국토교통부
351	기정	지내리	865-1	답	630		609			강원특별자치도
	변경	지내리	865-3	답		628		628	19	강원특별자치도
352	기정	지내리	865-2	도	1,377		1,015			(국)국토교통부
	변경	지내리	865-4	도		982		982	-33	(국)국토교통부
353	기정	지내리	870	답	1,510		15			신**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	870-1	답		15		15		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
354	기정	지내리	871	답	1,250		866			유**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	871-1	답		866		866		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
355	기정	지내리	872	답	741		741			지**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	872	답		741		741		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
356	기정	지내리	872-1	도	267	267	267	267		(국)국토교통부
357	기정	지내리	873	답	1,214		1,214			최**	춘천시 석사동 ***-* 그랜드아파트 ***-****
	변경	지내리	873	답		1,214		1,214		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
358	기정	지내리	873-1	도	627	627	627	627		(국)국토교통부
359	기정	지내리	874	답	1,717		1,717			최**	춘천시 석사동 ***-* 그랜드아파트 ***-****
	변경	지내리	874	답		1,717		1,717		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
360	기정	지내리	874-1	도	1,279	1,279	1,279	1,279		(국)국토교통부
361	기정	지내리	875	답	1,291		1,291			여**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***
	변경	지내리	875	답		1,291		1,291		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
362	기정	지내리	875-1	도	1,039	1,039	1,039	1,039		(국)국토교통부
363	기정	지내리	876-1	답	578	578	578	578		(국)국토교통부
364	기정	지내리	877	답	893		893			윤**	강원특별자치도 춘천시 춘주로 ***, ***동 ****호	춘********	춘천시 안마산로 ***, *층 ***호(퇴계동, 퇴계타운상가)	근저당권/지상권
	변경	지내리	877	답		893		893		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
365	기정	지내리	877-1	답	2,119	2,119	2,119	2,119		(국)국토교통부
366	기정	지내리	878	답	363	363	363	363		(국)기획재정부
367	기정	지내리	878-1	도	2,268	2,268	2,268	2,268		(국)국토교통부
368	기정	지내리	878-2	답	444		444			윤**	강원특별자치도 춘천시 춘주로 ***, ***동 ****호	춘********	춘천시 안마산로 ***, *층 ***호(퇴계동, 퇴계타운상가)	근저당권/지상권
	변경	지내리	878-2	답		444		444		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
369	기정	지내리	879	답	652	652	652	652		(국)기획재정부
370	기정	지내리	879-1	답	2,286	2,286	2,286	2,286		(국)국토교통부
371	기정	지내리	879-2	답	36		36			윤**	강원특별자치도 춘천시 춘주로 ***, ***동 ****호	춘********	춘천시 안마산로 ***, *층 ***호(퇴계동, 퇴계타운상가)	근저당권/지상권
	변경	지내리	879-2	답		36		36		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
372	기정	지내리	880	답	978	978	978	978		(국)기획재정부
373	기정	지내리	880-1	답	1,828	1,828	1,828	1,828		(국)국토교통부
374	기정	지내리	881	답	1,314	1,314	1,314	1,314		(국)기획재정부
375	기정	지내리	881-1	답	1,672	1,672	1,672	1,672		(국)국토교통부
376	기정	지내리	882	답	2,581	2,581	2,581	2,581		(국)기획재정부
377	기정	지내리	882-1	답	259	259	259	259		(국)국토교통부
378	기정	지내리	883	답	2,977	2,977	2,977	2,977		(국)기획재정부
379	기정	지내리	883-1	답	2	2	2	2		(국)국토교통부
380	기정	지내리	884	답	2,962		2,962			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	884	답		2,962		2,962		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
381	기정	지내리	885	답	3,020		3,020			남**	강원특별자치도 춘천시 벌말길 **-*	김**	강원특별자치도 횡성군 공근면 창봉길 **	소유권이전청구권가등기(지분1/4)
												김**	서울특별시 성북구 삼양로*길 **-*	소유권이전청구권가등기(지분1/4)
												김**	강원특별자치도 춘천시 벌말길 **-*	소유권이전청구권가등기(지분1/4)
												김**	대전광역시 서구 관저동로**번길 **, ****동 ***호	소유권이전청구권가등기(지분1/4)
	변경	지내리	885	답		3,020		3,020		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
382	기정	지내리	886	답	2,003		2,003			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***	동*********	춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권
	변경	지내리	886	답		2,003		2,003		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
383	기정	지내리	886-1	답	1,008		1,008			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	886-1	답		1,008		1,008		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
384	기정	지내리	887	대	660		660			여**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***
	변경	지내리	887	대		660		660		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
385	기정	지내리	887-1	답	2,373		2,373			여**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***-*
	변경	지내리	887-1	답		2,373		2,373		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
386	기정	지내리	888	답	2,934		2,934			안**	강원특별자치도 춘천시 후석로***번길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	888	답		2,934		2,934		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
387	기정	지내리	889-1	답	234		230			춘천시
	변경	지내리	889-2	답		232		232	2	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
388	기정	지내리	891	답	1,434		11			윤**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	891-1	답		11		11		윤**	춘천시 동면 지내리 ***
389	기정	지내리	892	답	1,004		695			윤**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	892-2	답		685		685	-10	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
390	기정	지내리	892-1	답	1,986		634			윤**	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	892-3	답		634		634		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
391	기정	지내리	893	답	1,939		1,857			신**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	지내리	893-1	답		1,856		1,856	-1	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
392	기정	지내리	894	답	1,068		1,068			신**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **
	변경	지내리	894	답		1,068		1,068		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
393	기정	지내리	895	답	2,967		2,967			춘천시
	변경	지내리	895	답		2,967		2,967		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
394	기정	지내리	896	답	2,962		2,962			춘천시
	변경	지내리	896	답		2,962		2,962		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
395	기정	지내리	897	답	2,971		2,971			여**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 **-*
	변경	지내리	897	답		2,971		2,971		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
396	기정	지내리	898	답	3,006		3,006			여**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	898	답		3,006		3,006		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
397	기정	지내리	899	답	2,914	2,914	2,914	2,914		(국)기획재정부
398	기정	지내리	900	전	2,205		2,205			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
												동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	900	전		2,205		2,205		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
399	기정	지내리	901	전	2,484		2,484			윤**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내솔밭길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
												동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	901	전		2,484		2,484		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
400	기정	지내리	902	답	2,726		2,078			양**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***
	변경	지내리	902-1	답		2,066		2,066	-12	윤**	강원특별자치도 춘천시 후석로 ***, ***동 ***호(후평동, 춘천더?아파트)
401	기정	지내리	906	장	1,160	1,160	1,160	1,160		주***************	강원특별자치도 춘천시 동면 만천양지길 **	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
												티********	강원특별자치도 양구군 양구읍 택지질 **-**, *층	소유권이전청구권가등기
402	기정	지내리	906-1	답	1,219	1,219	1,219	1,219		(국)국토교통부
403	기정	지내리	907	답	3,396	3,396	3,396	3,396		(국)기획재정부
404	기정	지내리	907-1	도	90	90	90	90		(국)기획재정부
405	기정	지내리	907-2	답	271	271	271	271		(국)국토교통부
406	기정	지내리	907-3	도	80	80	80	80		(국)국토교통부
407	기정	지내리	907-4	답	57	57	57	57		(국)기획재정부
408	기정	지내리	908	답	1,510	1,510	1,510	1,510		(국)기획재정부
409	기정	지내리	908-1	답	2,915		2,915			춘천시
	변경	지내리	908-1	답		2,915		2,915		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
410	기정	지내리	909	답	5,400		5,400			호*******	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호	근저당권
												여************	경기도 안양시 만안구 안양천서로 ***, ***동 ***호(안양동, 진흥아파트)	가압류
	변경	지내리	909	답		5,400		5,400		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
411	기정	지내리	911	답	1,322		1,322			김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	911	답		1,322		1,322		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
412	기정	지내리	912	대	1,730		1,730			김**	강원특별자치도 춘천시 마장*길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
										김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	912	대		1,730		1,730		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
413	기정	지내리	912-1	답	320		320			김**	강원특별자치도 춘천시 마장*길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
										김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	912-1	답		320		320		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
414	기정	지내리	913	답	2,926		2,926			전**	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-**
	변경	지내리	913	답		2,926		2,926		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
415	기정	지내리	914	답	2,916		2,916			강*************	강원특별자치도 춘천시 삭주로***번길 **-**	춘**********	강원특별자치도 춘천시 후평동 ***-**	근저당권
												김**	서울특별시 강동구 양재대로 ***길 **-**, ***호(길동)	근저당권
	변경	지내리	914	답		2,916		2,916		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
416	기정	지내리	915	답	3,454		3,454			강*************	강원특별자치도 춘천시 삭주로***번길 **-**	춘**********	강원특별자치도 춘천시 후평동 ***-**	근저당권
												김**	서울특별시 강동구 양재대로 ***길 **-**, ***호(길동)	근저당권
	변경	지내리	915	답		3,454		3,454		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
417	기정	지내리	916	도	1,067	1,067	1,067	1,067		(국)농림축산식품부
418	기정	지내리	917	답	1,070		1,070			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 **
	변경	지내리	917	답		1,070		1,070		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
419	기정	지내리	917-1	답	800		800			이**	울산광역시 남구 월평로 ***, ***동 ****호
	변경	지내리	917-1	답		800		800		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
420	기정	지내리	918	답	2,834	2,834	2,834	2,834		(국)기획재정부
421	기정	지내리	919	답	955		955			이**	강원특별자치도 춘천시 온의동 ***-*	농********	서울특별시 중구 충청로*가 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	919	답		955		955		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
422	기정	지내리	919-1	답	550	550	550	550		(국)기획재정부
423	기정	지내리	920	답	1,174		1,174			신**	강원특별자치도 춘천시 안마산로 ***, ***동 ****호	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
										안**	강원특별자치도 춘천시 안마산로 ***, ***동 ****호
	변경	지내리	920	답		1,174		1,174		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
424	기정	지내리	921	답	917		917			정**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**
	변경	지내리	921	답		917		917		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
425	기정	지내리	921-1	답	1,885		1,885			정**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**
	변경	지내리	921-1	답		1,885		1,885		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
426	기정	지내리	922	답	2,995		2,995			김**	경기도 김포시 김포한강*로 ***, ***동 ***호	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	922	답		2,995		2,995		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
427	기정	지내리	923	답	2,814		2,814			정**	춘천시 후평동 *** 대우아파트 **-***	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권
	변경	지내리	923	답		2,814		2,814		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
428	기정	지내리	924	답	1,334		1,334			김**	경기도 김포시 김포한강*로 ***, ***동 ***호	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	924	답		1,334		1,334		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
429	기정	지내리	925	답	2,125		2,125			이**	춘천시 신북읍 천전리 ***
	변경	지내리	925	답		2,125		2,125		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
430	기정	지내리	926	답	868		868			이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내양지길 **-*
	변경	지내리	926	답		868		868		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
431	기정	지내리	927	답	2,048		2,048			이**	춘천시 동면 지내리 ***
										이**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 **
	변경	지내리	927	답		2,048		2,048		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
432	기정	지내리	928	답	1,940		1,940			홍**	강원특별자치도 춘천시 신북읍 상천*길 **, ***동 ***호(해강아파트)	춘********	강원특별자치도 춘천시 공지로 ***	근저당권/지상권
										송**	경기도 의정부시 오목로 ***, ***동 ***호(낙양동,부용마을*단지)	주******	서울특별시 서초구 신반포로 ***(잠원동)	근저당권
										송**	강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산강변로*길 *, *동 ***호 (삼호아파트)	주*******	서울특별시 서초구 신반포로 ***(잠원동)	임의경매개시
										송**	강원특별자치도 원주시 개운로 **, ***호(개운동,길우엘린아파트)
										송**	경기도 안산시 상록구 정재로*길 * (부곡동)
										송**	충청북도 진천군 덕산읍 대하로 ***, ***동 ****호 (우미린스테이)
										송**	강원특별자치도 춘천시 세실로 ***, ***동 ****호(후평동,초록지붕*차아파트)
	변경	지내리	928	답		1,940		1,940		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
433	기정	지내리	929-1	답	595		595			김**	강원특별자치도 춘천시 마장*길 **	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
										김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호
	변경	지내리	929-1	답		595		595		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
434	기정	지내리	930	도	833	833	833	833		(국)농림축산식품부
435	기정	지내리	931	답	3,122		3,122			김**	강원특별자치도 춘천시 마장길 **, ***동 ****호	농*******	서울특별시 중구 통일로 ***	근저당권
	변경	지내리	931	답		3,122		3,122		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
436	기정	지내리	932	답	2,892		2,892			안**	춘천시 동면 지내리 **
	변경	지내리	932	답		2,892		2,892		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
437	기정	지내리	933	답	1,934		1,934			윤**	대전시 유성구 신봉동 산** 군인아파트 ***동 ***호
	변경	지내리	933	답		1,934		1,934		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
438	기정	지내리	934	답	1,022		1,022			이**	강원특별자치도 춘천시 온의동 *** 온의마젤란**아파트 ***-***
	변경	지내리	934	답		1,022		1,022		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
439	기정	지내리	934-1	답	530	530	530	530		(국)기획재정부
440	기정	지내리	935	구	26,855		18,529			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	935-10	구		1,351		1,351	-79	(국)농림축산식품부
	변경	지내리	935-11	구		1,175		1,175		(국)농림축산식품부
	변경	지내리	935-12	구		15,924		15,924		(국)농림축산식품부
441	기정	지내리	935-4	구	2,114	2,114	2,114	2,114		(국)농림축산식품부
442	기정	지내리	936	답	1,390		1,390			이**	춘천시 신북읍 천전리 ***-*	신*******	강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문리 ***-*
	변경	지내리	936	답		1,390		1,390		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
443	기정	지내리	936-1	답	719		719			김**	서울 마포구 연남동 ***-**, *층
	변경	지내리	936-1	답		719		719		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
444	기정	지내리	936-2	도	91	91	91	91		춘천시
445	기정	지내리	936-3	도	281	281	281	281		(국)기획재정부
446	기정	지내리	936-4	답	29	29	29	29		춘천시
447	기정	지내리	937	답	2,268	2,268	2,268	2,268		박**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	북*******	강원특별자치도 춘천시 충열로 ***	근저당권/지상권
448	기정	지내리	937-1	도	86	86	86	86		춘천시
449	기정	지내리	937-2	답	29	29	29	29		춘천시
450	기정	지내리	938	답	2,806		2,806			곽**	강원특별자치도 춘천시 근화길**번길 **, ***동 ***호	춘*******	강원특별자치도 춘천시 소양로 ***	근저당권
										조**	강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 ***-**
	변경	지내리	938	답		2,806		2,806		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
451	기정	지내리	938-1	도	84	84	84	84		춘천시
452	기정	지내리	938-2	답	53	53	53	53		춘천시
453	기정	지내리	939	답	1,398		1,398			반**	강원특별자치도 춘천시 동면 가락재로 ***
										이**	서울특별시 마포구 독막로 ***, ***동 ****호
										윤**	서울특별시 마포구 독막로 ***, ***동 ****호
										윤**	서울특별시 마포구 독막로 ***, ***동 ****호
										윤**	강원특별자치도 춘천시 망대길 **
										윤**	경기도 화성시 동탄반석로 ***, ***동 ****호
	변경	지내리	939	답		1,398		1,398		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
454	기정	지내리	939-1	도	42	42	42	42		춘천시
455	기정	지내리	939-2	답	15	15	15	15		춘천시
456	기정	지내리	940	답	1,454		1,454			진*****	춘천시 동면 지내리 ***
	변경	지내리	940	답		1,454		1,454		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
457	기정	지내리	940-1	도	46	46	46	46		춘천시
458	기정	지내리	940-2	답	9		9			진*****	춘성군 동면 지내리 ***
	변경	지내리	940-2	답		9		9		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
459	기정	지내리	941	답	2,810		2,810			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	호*******	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	근저당권
	변경	지내리	941	답		2,810		2,810		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
460	기정	지내리	941-1	도	93	93	93	93		춘천시
461	기정	지내리	941-2	답	3	3	3	3		춘천시
462	기정	지내리	942	답	2,861		2,861			홍**	춘천시 후평동 **-* 주공아파트 ***동 ***호
	변경	지내리	942	답		2,861		2,861		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
463	기정	지내리	942-1	도	105	105	105	105		춘천시
464	기정	지내리	942-2	답	34	34	34	34		춘천시
465	기정	지내리	943	도	2,033		1,867			(국)농림축산식품부
	변경	지내리	943-2	도		1,861		1,861	-6	(국)농림축산식품부
466	기정	지내리	943-1	도	165	165	165	165		(국)농림축산식품부
467	기정	지내리	944	장	3,091	3,091	3,091	3,091		주***************	강원특별자치도 춘천시 동면 만천양지길 **	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
												티********	강원특별자치도 양구군 양구읍 택지길 **-**, *층	소유권이전청구권가등기
468	기정	지내리	944-1	답	33	33	33	33		(국)국토교통부
469	기정	지내리	944-2	답	42	42	42	42		춘천시
470	기정	지내리	945	답	2,909		2,909			염**	고양시 일산서구 일산동 **** 후곡마을 ****-***	주*******	서울 중구 회현동*가 ***	근저당권/지상권
	변경	지내리	945	답		2,909		2,909		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
471	기정	지내리	945-1	답	59	59	59	59		춘천시
472	기정	지내리	946	답	2,698		2,698			염**	충청남도 천안시 동남구 서부대로 ***-**, ***동 ****호	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	946	답		2,698		2,698		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
473	기정	지내리	946-1	답	58	58	58	58		춘천시
474	기정	지내리	946-2	답	144		144			염**	충청남도 천안시 동남구 서부대로 ***-**, ***동 ****호	춘*********	강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 **	근저당권/지상권
	변경	지내리	946-2	답		144		144		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
475	기정	지내리	947	답	2,707		2,707			김**	춘천시 후평동 **-* 주공아파트 상가-*
	변경	지내리	947	답		2,707		2,707		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
476	기정	지내리	947-1	답	60	60	60	60		춘천시
477	기정	지내리	947-2	답	153	153	153	153		춘천시
478	기정	지내리	948	답	2,803		2,795			김**	춘천시 동면 지내리 **
	변경	지내리	948-3	답		2,795		2,795		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
479	기정	지내리	948-1	답	63	63	63	63		춘천시
480	기정	지내리	948-2	답	160	160	160	160		춘천시
481	기정	지내리	949	답	2,700		144			염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	한******	전라남도 나주시 그린로 **	근저당권
	변경	지내리	949-5	답		144		144		염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	한******	전라남도 나주시 그린로 **	근저당권
	제척	지내리	949-5	답		-144		-144	-144	염**	강원특별자치도 춘천시 동면 지내길 ***	한******	전라남도 나주시 그린로 **	근저당권
482	기정	지내리	949-1	답	62		19			춘천시
	변경	지내리	949-3	답		17		17	-2	춘천시
483	기정	지내리	949-2	답	148		23			춘천시
	변경	지내리	949-4	답		23		23		춘천시
484	기정	지내리	950-1	도	8		7			춘천시
	변경	지내리	950-5	도		2		2	-5	춘천시
485	기정	지내리	950-2	답	55	55	1	1		춘천시
486	기정	지내리	951-1	도	21		14			춘천시
	변경	지내리	951-5	도		3		3	-11	춘천시
487	기정	지내리	952-1	도	23		13			춘천시
	변경	지내리	952-4	도		7		7	-6	춘천시
488	기정	지내리	953-1	도	13		7			춘천시
	변경	지내리	953-4	도		5		5	-2	춘천시
489	기정	지내리	산1	임	29,259		233			박**	울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 *-* 굴화주공강변그린빌*단지 ***-****
	변경	지내리	산1-6	임		233		233		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
490	기정	지내리	산1-1	임	1,662		1,530			박**	울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 *-* 굴화주공강변그린빌*단지 ***-****
	변경	지내리	산1-7	임		1,511		1,511	-19	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
491	기정	지내리	산1-5	임	357		32			(국)국토교통부
	변경	지내리	산1-8	도		32		32		(국)국토교통부
492	기정	지내리	산2	임	7,604		385			창**********	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*
	변경	지내리	산2-3	임		385		385		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
493	기정	지내리	산2-1	임	996		996			창**********	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*
	변경	지내리	산2-1	임		996		996		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
494	기정	지내리	산3-1	임	27,201		1,958			정**	경기도 하남시 대청로 ***, ***동 ****호	춘**		압류
										정**	경기도 고양시 덕양구 도래울로 **, ***동 ****호
										정**	서울특별시 서초구 서초중앙로*길 **, ***동 ****호
										정**	서울특별시 동작구 여의대방로**길 **, ***동****호
										정**	강원특별자치도 춘천시 공지로***번길 **
										정**	부산광역시 해운대구 센텀*로 **, 센텀스퀘어 ****호
										정**	강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 ***
										박**	부산광역시 해운대구 마린시티*로 **, 주*동 ***호
										정**	부산광역시 해운대구 마린시티*로 **, 주*동 ****호
										정**	서울특별시 마포구 토정로**길 **, ***동 ****호
										정**	미국 버지이나주 앨링턴시 올드 도미니언드라이브 ****번지 제***호
	변경	지내리	산3-5	임		1,958		1,958		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
										정**	부산광역시 해운대구 센텀*로 **, 센텀스퀘어 ****호
										정**	미국 버지이나주 앨링턴시 올드 도미니언드라이브 ****번지 제***호
495	기정	지내리	산3-3	임	190		190			정**	경기도 하남시 대청로 ***, ***동 ****호
										정**	경기도 고양시 덕양구 도래울로 **, ***동 ****호
										정**	서울특별시 서초구 서초중앙로*길 **, ***동 ****호
										정**	서울특별시 동작구 여의대방로**길 **, ***동****호
										정**	강원특별자치도 춘천시 공지로***번길 **
										정**	부산광역시 해운대구 센텀*로 **, 센텀스퀘어 ****호
										정**	강원특별자치도 춘천시 남산면 북한강변길 ***
										박**	부산광역시 해운대구 마린시티*로 **, 주*동 ***호
										정**	부산광역시 해운대구 마린시티*로 **, 주*동 ****호
										정**	서울특별시 마포구 토정로**길 **, ***동 ****호
										정**	미국 버지이나주 앨링턴시 올드 도미니언드라이브 ****번지 제***호
	변경	지내리	산3-3	임		190		190		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
										정**	부산광역시 해운대구 센텀*로 **, 센텀스퀘어 ****호
										정**	미국 버지이나주 앨링턴시 올드 도미니언드라이브 ****번지 제***호
496	기정	지내리	산4-4	임	8,331		3,734			이**	춘천시 동면 지내리 **	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	지상권
	변경	지내리	산4-5	임		3,734		3,734		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
497	기정	지내리	산5-1	임	68,134		42,246			춘천시
	변경	지내리	산5-5	임		41,379		41,379	-42	춘천시
	변경	지내리	산5-6	임		825		825		춘천시
498	기정	지내리	산5-2	도	793		714			춘천시
	변경	지내리	산5-7	도		682		682	-32	춘천시
499	기정	지내리	산6	임	32,470		31,314			춘천시
	변경	지내리	산6-3	임		31,906		31,906	592	춘천시
500	기정	지내리	산6-1	임	3	3	3	3		(국)국토교통부
501	기정	지내리	산7	임	14,408		14,408			이**	춘천시 신북면 천전리 ***
	변경	지내리	산7	임		14,408		14,408		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
502	기정	지내리	산8	임	1,455		1,455			이**	강원특별자치도 춘천시 소양로*가 * 현대아파트 ***-***
	변경	지내리	산8	임		1,455		1,455		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
503	기정	지내리	산9	임	21,141		16,251			성************	춘천시 우두동 ***-*	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	구분지상권
	변경	지내리	산9-3	임		16,251		16,251		성************	춘천시 우두동 ***-*	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	구분지상권
504	기정	지내리	산9-1	임	3	3	3	3		(국)국토교통부
505	기정	지내리	산10	임	16,066		3,973			창**********	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	지상권
	변경	지내리	산10-2	임		3,973		3,973		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
506	기정	지내리	산10-1	임	3	3	3	3		(국)국토교통부
507	기정	지내리	산11	임	6,744		774			승**	춘천시 퇴계동 *** *층	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	지상권
										승**	강릉시 교동 *** 교동이편한세상아파트 ***-****
										승**	부천시 원미구 상동 *** 벚꽃마을 ****-***
										승**	파주시 탄현면 법흥리 **** 유승앙브와즈*단지 ***-***
										승**	춘천시 우두동 ****-**
										승**	서울 마포구 신수동 **-**-***
	변경	지내리	산11-1	임		774		774		승**	춘천시 퇴계동 *** *층	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	지상권
										승**	강릉시 교동 *** 교동이편한세상아파트 ***-****
										승**	부천시 원미구 상동 *** 벚꽃마을 ****-***
										승**	파주시 탄현면 법흥리 **** 유승앙브와즈*단지 ***-***
										승**	춘천시 우두동 ****-**
										승**	서울 마포구 신수동 **-**-***
508	기정	지내리	산12	임	12,198		5,517			춘천시
	변경	지내리	산12-1	임		5,569		5,569	52	춘천시
509	기정	지내리	산71-2	도	2,777		36			(국)국토교통부
	변경	지내리	산71-4	도		43		43	7	(국)국토교통부
510	기정	지내리	산72	임	51,758		5,015			지**	춘천시 효자동 ***-**	한*****	서울 강남구 삼성동 ***	지상권
	변경	지내리	산72-10	임		4,984		4,984		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
	변경	지내리	산72-11	임		31		31		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
511	기정	지내리	산72-8	임	3,329		170			(국)국토교통부
	변경	지내리	산72-9	임		169		169	-1	(국)국토교통부
512	기정	지내리	산73	임	13,330		3,126			거*********	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	변경	지내리	산73-4	임		3,126		3,126		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
513	기정	장학리	396-3	도	759		593			(국)기획재정부
	변경	장학리	396-10	도		589		589	-4	(국)기획재정부
514	기정	장학리	397-3	도	435	435	435	435		(국)기획재정부
515	기정	장학리	397-5	도	237	237	237	237		(국)기획재정부
516	기정	장학리	398-2	도	197	197	197	197		(국)기획재정부
517	기정	장학리	399-3	도	1,261	1,261	1,261	1,261		(국)기획재정부
518	기정	장학리	399-5	도	455	455	455	455		(국)기획재정부
519	기정	장학리	402-1	답	212		72			이**	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*
	변경	장학리	402-6	답		71		71	-1	한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
520	기정	장학리	402-2	도	844		198			(국)기획재정부
	변경	장학리	402-7	도		202		202	4	(국)기획재정부
521	기정	장학리	402-3	답	400		222			윤**	강원특별자치도 춘천시 효자동 ***-*
	변경	장학리	402-8	답		1		1		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
	변경	장학리	402-9	답		221		221		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
522	기정	장학리	403-1	답	1,236		13			유**	서울특별시 송파구 충민로 ***번지***동 ***호(장지동, 송파파인타운*단지)
	변경	장학리	403-5	답		13		13		유**	서울특별시 송파구 충민로 ***번지***동 ***호(장지동, 송파파인타운*단지)
523	기정	장학리	403-3	대	740		40			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	변경	장학리	403-6	대		40		40		유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	제척	장학리	403-6	대		-40		-40	-40	유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
524	기정	장학리	403-4	도	121		23			유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	변경	장학리	403-7	도		23		23		유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	제척	장학리	403-7	도		-23		-23	-23	유**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
525	기정	장학리	898	구	3,997		19			(국)국토교통부
	변경	장학리	898-4	구		19		19		(국)국토교통부
526	기정	장학리	899	도	965		47			(국)국토교통부
	변경	장학리	899-2	도		47		47		(국)국토교통부
527	기정	장학리	900	구	4,060		57			(국)국토교통부
	변경	장학리	900-1	구		57		57		(국)국토교통부
528	기정	장학리	898-1	도	105	105	105	105		(국)농림축산식품부
529	기정	장학리	962	답	671		653			지**	서울 은평구 수색동 국방대학원아파트 카동 ***호
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	장학리	962-2	답		653		653		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
									지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
530	기정	장학리	962-1	제	330		160			(국)국토교통부
	변경	장학리	962-3	제		160		160		(국)국토교통부
531	기정	장학리	963	답	1,383		1,383			지**	서울 은평구 수색동 국방대학원아파트 카동 ***호
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	장학리	963	답		1,383		1,383		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
532	기정	장학리	964	답	2,486		2,312			문**	강원특별자치도 춘천시 충열로 **, ***동 ***호
	변경	장학리	964-2	답		2,312		2,312		문**	강원특별자치도 춘천시 충열로 **, ***동 ***호
533	기정	장학리	964-1	제	366		13			(국)국토교통부
	변경	장학리	964-3	제		13		13		(국)국토교통부
534	기정	장학리	965	답	786		786			문**	강원특별자치도 춘천시 충열로 **, ***동 ***호
	변경	장학리	965	답		786		786		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
535	기정	장학리	966	답	1,986		1,986			지**	서울 은평구 수색동 국방대학원아파트 카동 ***호
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	장학리	966	답		1,986		1,986		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
536	기정	장학리	967	답	2,441		2,441			지**	서울 은평구 수색동 국방대학원아파트 카동 ***호
										지**	춘천시 동면 지내리 ***
										지**	춘천시 효자동 ***-**
										지**	춘천시 동면 지내리 ***-*
	변경	장학리	967	답		2,441		2,441		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
537	기정	장학리	968	답	764		764			이**	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*
	변경	장학리	968	답		764		764		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
538	기정	장학리	969	답	2,636		2,636			이**	강원특별자치도 춘천시 충열로***번길 *	동*******	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리 ***-*	근저당권/지상권
	변경	장학리	969	답		2,636		2,636		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
539	기정	장학리	970	답	1,654		1,640			이**	강원특별자치도 춘천시 우두동 ***-*
	변경	장학리	970-1	답		1,640		1,640		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
540	기정	장학리	971	대	660		660			박**	강원특별자치도 춘천시 방송길 **, ***동****호	춘*******	강원특별자치도 춘천시 소양로 ***	근저당권/지상권
	변경	장학리	971	대		660		660		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
541	기정	장학리	971-1	답	1,058		1,058			박**	강원특별자치도 춘천시 방송길 **, ***동****호	춘*******	강원특별자치도 춘천시 소양로 ***	근저당권/지상권
	변경	장학리	971-1	답		1,058		1,058		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
542	기정	장학리	972	답	1,015		1,015			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 양정길 **
	변경	장학리	972	답		1,015		1,015		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
543	기정	장학리	973	답	2,468		2,468			김**	강원특별자치도 춘천시 동면 양정길 **
	변경	장학리	973	답		2,468		2,468		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
544	기정	장학리	974	대	513		437			전**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**	춘******	강원특별자치도 춘천시 춘천로 ***-*	근저당권
	변경	장학리	974-4	대		437		437		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
545	기정	장학리	974-1	답	827		758			전**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**	춘******	강원특별자치도 춘천시 춘천로 ***-*	근저당권/지상권
	변경	장학리	974-5	답		758		758		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
546	기정	장학리	974-2	답	2,542		2,475			전**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**	춘******	강원특별자치도 춘천시 춘천로 ***-*	근저당권/지상권
	변경	장학리	974-6	답		2,475		2,475		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
547	기정	장학리	974-3	도	433		433			전**	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***-**	춘******	강원특별자치도 춘천시 춘천로 ***-*	근저당권/지상권
	변경	장학리	974-3	도		433		433		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
548	기정	장학리	976	전	2,593		2,253			백**	서울 영등포구 당산동*가 ** 현대아파트 ***-***
	변경	장학리	976-2	전		2,253		2,253		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
549	기정	장학리	977	도	1,141	1,141	1,141	1,141		(국)농림축산식품부
550	기정	장학리	977-1	제	23		18			(국)농림축산식품부
	변경	장학리	977-2	제		18		18		(국)농림축산식품부
551	기정	장학리	978	구	3,680		3,662			(국)농림축산식품부
	변경	장학리	978-3	구		3,663		3,663	1	(국)농림축산식품부
552	기정	장학리	978-2	제	8	8	2	2		(국)농림축산식품부
553	기정	장학리	979	도	346		320			(국)농림축산식품부
	변경	장학리	979-2	도		337		337	17	(국)농림축산식품부
554	기정	장학리	980	도	1,301		1,156			(국)농림축산식품부
	변경	장학리	980-1	도		1,158		1,158	2	(국)농림축산식품부
555	기정	장학리	산1-1	임	58,590		1,204			(국)국토교통부
										이**	부산광역시 남구 분포로 ***, ***동 ***호 (용호동, 엘지메트로시티)
										이**	강원특별자치도 춘천시 우두상리*길 *
										이**	경기도 하남시 대청로 **, ***동 ***호(신장동, 백조현대아파트)
										이**	경기도 하남시 신장로**번길 *-*, 지하층 ***호(신장동)
	변경	장학리	산1-5	임		1,204		1,204		한국수자원공사	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동)
										(국)환경부
556	기정	장학리	산3	임	15,433		217			거*********	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	변경	장학리	산3-4	임		217		217		거*********	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권
	제척	장학리	산3-4	임		-217		-217	-217	거*********	강원특별자치도 춘천시 동면 소양강로 ***	동********	강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 **	근저당권

[붙임2]「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조의 도시관리계획(변경) 및 동법 제50조의 지구단위계획 결정

Ⅰ. 용도지역 결정(변경) 조서

1. 용도지역 결정(변경) 조서

1) 용도지역 총괄조서(춘천시)

구분			면적(㎡)				구성비 (%)	비고
			기정	변경		변경 후
합 계			1,116,412,834.2		-	1,116,412,834.2	100.00
도시지역	계		335,306,769.7		-	335,306,769.7	30.04
	주거 지역	소계	21,628,619.0	증)	17	21,628,636.0	1.93
		제1종전용주거지역	137,995.0		-	137,995.0	0.01
		제1종일반주거지역	5,657,934.3	증)	17	5,657,951.3	0.51
		제2종일반주거지역	13,297,332.8		-	13,297,332.8	1.19
		제3종일반주거지역	1,369,799.9		-	1,369,799.9	0.12
		준주거지역	1,165,557.0		-	1,165,557.0	0.10
	상업 지역	소계	1,682,031.8		-	1,682,031.8	0.15
		일반상업지역	1,682,031.8		-	1,682,031.8	0.15
	공업 지역	소계	3,720,117.8	증)	239	3,720,356.8	0.34
		일반공업지역	2,654,563.8		-	2,654,563.8	0.24
		준공업지역	1,065,554.0	증)	239	1,065,793.0	0.10
	녹지 지역	소계	307,090,409.1	감)	256	307,090,153.1	27.51
		보전녹지지역	214,273,715.0	감)	594	214,273,121.0	19.19
		생산녹지지역	17,584,758.4	증)	859	17,585,617.4	1.58
		자연녹지지역	75,231,935.7	감)	521	75,231,414.7	6.74
	용도지역 미지정		1,185,592.0		-	1,185,592.0	0.11
비도시지역	계		781,106,064.5		-	781,106,064.5	69.96
	관리 지역	소계	140,811,126.3		-	140,811,126.3	12.61
		계획관리지역	82,239,751.3		-	82,239,751.3	7.37
		생산관리지역	14,569,196.0		-	14,569,196.0	1.30
		보전관리지역	44,002,179.0		-	44,002,179.0	3.94
	농림지역		462,429,653.2		-	462,429,653.2	41.42
	자연환경보전지역		177,865,285.0		-	177,865,285.0	15.93
주1) 미지정은 해면에 한한다 주2) 기정 : 춘천시 고시 제2024-319호(2024.06.07.) 춘천 도시관리계획(용도지역·지구, 시설: 공공청사, 도로) 결정(변경)에 따른 지형도면 승인 고시

2) 용도지역 결정(변경) 조서

구 분				면적(㎡)				구성비(%)	비 고
				기정	변경		변경 후
	투자선도지구 외			-	증)	277	-	-	∙경계분할측량 감)147㎡ ∙민원 토지 제척 증)424㎡
	도시지역	녹지 지역	보전녹지지역	-	감)	594	-	-
			생산녹지지역	-	증)	859	-	-
			자연녹지지역	-	증)	12	-	-

구 분				면적(㎡)				구성비(%)	비 고
				기정	변경		변경 후
	투자선도지구 내			815,964	감)	277	815,687	100
	도시 지역	주거 지역	소계	225,646	증)	17	225,663	27.7	∙경계분할측량 증)147㎡ ∙민원 토지 제척 감)424㎡
			제1종일반주거지역	41,937	증)	17	41,954	5.2
			제2종일반주거지역	89,604		-	89,604	11
			준주거지역	94,105		-	94,105	11.5
		공업 지역	소계	460,979	증)	239	461,218	56.5
			준공업지역	460,979	증)	239	461,218	56.5
		녹지 지역	소계	129,339	감)	533	128,806	15.8
			보전녹지지역	0		-	0	0
			생산녹지지역	1,810		-	1,810	0.2
			자연녹지지역	127,529	감)	533	126,996	15.6

3) 용도지역 결정(변경) 사유서

위치	용도지역		면적(㎡)	용적률	결정(변경) 사유
	기정	변경
춘천시 동면 지내리· 장학리 일원	-	제1종일반 주거지역	17	지구단위계획에 의함	∙경계분할측량 결과 반영에 따른 면적 증가(17㎡)
	-	준공업지역	239	지구단위계획에 의함	∙경계분할측량 결과 반영에 따른 면적 증가(383㎡) ∙민원토지 제척에 따른 면적 감소(144㎡)
	-	자연녹지지역	-533	지구단위계획에 의함	∙경계분할측량 결과 반영에 따른 면적 감소(253㎡) ∙민원토지 제척에 따른 면적 감소(280㎡)

Ⅱ. 지구단위계획 결정(변경)조서

1. 지구단위계획구역 결정(변경)조서

1) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)	비고
기정	1	강원도 수열에너지 융복합 클러스터 지구단위계획구역	강원도 춘천시 동면 지내리 일원	815,964
변경	1	강원 수열에너지 융복합 클러스터 지구단위계획구역	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리, 장학리 일원	815,687

2) 지구단위계획구역 결정(변경)사유서

구분	도면표시 번호	위치	면적(㎡)	결정(변경)사유
기정	1	강원도 춘천시 동면 지내리 일원	815,964	-
변경	1	강원특별자치도 춘천시 동면 지내리, 장학리 일원	815,687	∙ 강원특별자치도 승격에 따른 행정구역명 변경 ∙ 경계 분할 측량 및 민원 토지 제척에 따른 면적 변경

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 교통시설 (변경)

1) 도로

① 도로계획(총괄)

류별		합계			1류			2류			3류			비고
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	43	9,424	183,381	6	2,022	41,847	19	2,654	36,038	18	4,748	105,496
	변경	43	9,424	183,379	6	2,022	41,847	19	2,654	36,038	18	4,748	105,494
대로	기정	2	3,171	97,800	1	556	19,276	-	-	-	1	2,615	78,524
	변경	2	3,171	97,803	1	556	19,276	-	-	-	1	2,615	78,527
중로	기정	21	3,975	63,250	2	484	10,465	8	1,600	27,445	11	1,891	25,321
	정정	21	3,975	63,231	2	484	10,465	8	1,600	27,445	11	1,891	25,321	면적 합계 오류 정정
	변경	21	3,975	63,226	2	484	10,465	8	1,600	27,445	11	1,891	25,316
소로	기정	20	2,278	22,350	3	982	12,106	11	1,054	8,593	6	242	1,651

② 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	4	35	주간선	18,455 (556)	팔미리 5호광장	천전리 중1-61	일반 도로	-	강고제99-166호 (1999.10.2.)	( ) 구역내 소로1-282(426㎡) 대로3-23(1,566㎡) 소로3-790(189㎡) 중복결정
기정	대로	3	23	28	보조간선	2,615	장학리 402-7	중로2-140	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)	하천6(2,516㎡) 대로1-4(1,566㎡) 중복결정
변경	대로	3	23	28	보조간선	2,615	장학리 402-7	중로2-140	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	1	119	22	집산도로	337	대로3-23	소로1-282	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	1	120	20	집산도로	147	대로3-23	경관녹지13	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	140	17.5	보조간선	86	지내리 2-52	대로3-23	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	141	17	집산도로	781	대로3-23	중로1-120	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	142	17	집산도로	190	대로3-23	중로2-141	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	61	15	보조간선	2,144 (131)	감정리 대3-13	대로3-23	일반 도로	-	춘고제2000-30호 (2000.5.24.)	( ) 구역내
기정	중로	2	143	17	집산도로	118	대로3-23	지내리 811	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	144	17	집산도로	86	대로3-23	지내리 786	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	145	17	집산도로	75	대로3-23	소로1-281	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	2	146	16	집산도로	39	대로3-23	소로2-767	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	102	14	집산도로	18	대로3-23	지내리 773-1	일반 도로		강고제2023-178호 (2023.05.26.)
변경	중로	3	102	14	집산도로	18	대로3-23	지내리 773-1	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	103	13	집산도로	150	대로3-23	변전소7	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	104	13	국지도로	269	중로1-119	소로1-282	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	105	13	국지도로	128	중로1-119	중로3-108	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	106	13	국지도로	107	중로3-107	중로3-105	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	107	13	국지도로	733	중로1-119	중로2-145	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	108	13	국지도로	189	중로3-107	소로1-282	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	109	13	국지도로	30	중로2-145	중로3-110	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	110	13	국지도로	195	중로3-112	중로2-146	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	111	13	국지도로	61	중로3-110	소로1-283	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	중로	3	112	13	특수도로	11	중로3-110	경관녹지2	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	1	270	11	보조간선	1,164	장학리 광장23호	대로3-23	일반 도로	-	춘고제2000-30호 (2000.5.24.)
기정	소로	1	280	11	보조간선	578	소로1-282	소로1-281	일반 도로	-	춘고제2000-30호 (2000.5.24.)	구역 외
기정	소로	1	281	11.25	국지도로	40	중로2-145	소로1-280	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	1	282	11	국지도로	926	중로1-120	소로1-280	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)	하천6(1,257㎡) 대로1-4(426㎡) 중복결정
기정	소로	1	283	10	특수도로	16	중로3-111	경관녹지2	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	763	8	국지도로	121	중로3-107	중로3-107	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	764	8	국지도로	124	중로3-110	중로3-111	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	765	8	국지도로	45	중로3-110	소로2-764	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	766	8	국지도로	232	중로3-111	중로2-146	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	767	8	국지도로	36	중로2-146	소로2-766	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	768	8	국지도로	45	소로2-766	소로2-766	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	769	8	특수도로	119	중로3-104	연결녹지1	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	770	8	특수도로	72	중로1-119	연결녹지1	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	771	8	특수도로	123	중로1-119	중로3-108	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	772	8	특수도로	30	중로3-105	소로2-771	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	2	773	8	특수도로	107	중로3-105	중로3-107	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	3	789	4	국지도로	27	대로3-23	지내리 21-1	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	3	790	5	국지도로	98	중로2-143	지내리 865-4	일반 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)	대로1-4(189㎡) 중복결정
기정	소로	3	791	6	특수도로	49	중로1-119	중로3-106	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	3	792	6	특수도로	35	중로3-108	소로2-773	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	3	793	6	특수도로	16	중로3-110	소로2-764	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	소로	3	794	5	특수도로	17	대로3-23	중로3-110	보행자 도로	-	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

③ 도로 결정(변경)사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로3-23	대로3-23	∙ 면적 변경 - 78,524㎡ → 78,527㎡ 증) 3㎡	∙ 경계 분할 측량 편차 면적 (증)147㎡) 및 민원 토지 제척 (감)144㎡)에 따른 면적 변경
중로3-102	중로3-102	∙ 면적 변경 - 383㎡ → 378㎡ 감) 5㎡	∙ 민원 토지 제척에 따른 면적 감소

나. 공간시설 (변경)

1) 공원 (변경없음)

① 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				-	19,619	-
소 계					5,071
기정	116	공원	어린이공원	동면 지내리 763 일원	5,071	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
소 계					9,610
기정	51	공원	소공원	동면 지내리 770 일원	4,839	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	52	공원	소공원	동면 지내리 826 일원	3,297	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	53	공원	소공원	동면 지내리 2-50 일원	1,474	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
소 계					1,260
기정	6	공원	문화공원	동면 지내리 797 일원	1,260	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
소 계					3,678
기정	7	공원	수변공원	동면 지내리 862 일원	3,678	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

2) 녹지 (변경)

구분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				-	94,517	-
소 계					52,031
기정	1	녹지	경관녹지	동면 장학리 산1-5 일원	2,124	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	2	녹지	경관녹지	동면 장학리 974-5 일원	2,494	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	3	녹지	경관녹지	동면 지내리 691-7 일원	2,223	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	4	녹지	경관녹지	동면 지내리 674-20 일원	670	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	5	녹지	경관녹지	동면 지내리 674-21 일원	2,074	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	6	녹지	경관녹지	동면 지내리 680-5 일원	1,978	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	7	녹지	경관녹지	동면 장학리 402-9 일원	364	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	8	녹지	경관녹지	동면 지내리 산73-4 일원	7,264	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
변경		녹지	경관녹지	동면 지내리 산73-4 일원	6,989	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	9	녹지	경관녹지	동면 지내리 산72-10 일원	2,328	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	10	녹지	경관녹지	동면 지내리 807-15 일원	1,752	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	11	녹지	경관녹지	동면 지내리 935-10 일원	1,513	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	12	녹지	경관녹지	동면 지내리 2-50 일원	320	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	13	녹지	경관녹지	동면 지내리 2-50 일원	1,695	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	14	녹지	경관녹지	동면 지내리 2-50 일원	4,258	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	15	녹지	경관녹지	동면 지내리 산11-1 일원	15,851	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	16	녹지	경관녹지	동면 지내리 산3-5 일원	5,398	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
소 계					40,888
기정	1	녹지	완충녹지	동면 장학리 402-6 일원	351	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	2	녹지	완충녹지	동면 지내리 750 일원	1,195	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	3	녹지	완충녹지	동면 지내리 754 일원	1,495	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	4	녹지	완충녹지	동면 지내리 781-1 일원	3,201	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	5	녹지	완충녹지	동면 지내리 802 일원	2,232	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	6	녹지	완충녹지	동면 지내리 878 일원	10,617	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	7	녹지	완충녹지	동면 지내리 782 일원	1,693	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	8	녹지	완충녹지	동면 지내리 803 일원	2,282	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	9	녹지	완충녹지	동면 지내리 810-1 일원	3,194	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	10	녹지	완충녹지	동면 지내리 864-3 일원	3,277	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	11	녹지	완충녹지	동면 지내리 882-1 일원	11,351	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
소 계					1,598
기정	1	녹지	연결녹지	동면 지내리 843 일원	664	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	2	녹지	연결녹지	동면 지내리 824 일원	934	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

① 녹지 결정(변경)조서

② 녹지 결정(변경)사유서

구분	도면표시 번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
변경	8	경관녹지	∙ 위치 : 춘천시 동면 장학리 산73-4 일원 ∙ 면적 : 7,264㎡ → 6,989㎡ (감)275㎡)	∙ 경계부 민원토지 제척에 따른 면적 감소

다. 유통 및 공급시설 (변경없음)

1) 수도공급설비

①  수도공급설비 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	21	수도공급설비	가압장	동면 지내리 946 일원	5,950	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

2) 전기공급설비

①  전기공급설비 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				-	5,782	-
기정	6	전기공급설비	변전소	동면 지내리 810 일원	2,891	강고제2023-178호 (2023.05.26.)	(신설) 지중 송전선로 (1.3㎞)
기정	7	전기공급설비	변전소	동면 지내리 산9-3 일원	2,891	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

라. 공공·문화체육시설 (변경없음)

1) 공공청사

① 공공청사 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	36	공공청사	-	동면 지내리 822 일원	2,736	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

마. 방재시설 (변경없음)

1) 하천

① 하천 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치		연장 (m)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
				기점	종점
기정	31	소양강	국가 하천	동면 월곡리 1-2번지 일원	우두동 766-3번지 일원	11,049	213~627	3,866,382 (1,655)	춘천시고시 제2015-189호 (2015.06.26)
기정	6	지내천	지방 하천	동면 지내리 749번지 일원	동면 감정리 665번지 일원	4,226	35~114	245,942 (21,385)	춘천시고시 제2015-189호 (2015.06.26)	구역 내 면적 중 도로 중복결정 (3,773㎡ )
※ ( )는 구역 내 면적

2) 유수지

① 유수지 결정(변경) 조서

구분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				-	16,153
기정	13	유수지	저류시설	동면 장학리 965 일원	9,215	강고제2023-178호 (2023.05.26.)
기정	14	유수지	저류시설	동면 지내리 944 일원	6,938	강고제2023-178호 (2023.05.26.)

3. 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정조서

가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서

1) 주택건설용지

① 단독주택용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	12,178	-	12,178
R	R1	1,318	1	266
			2	266
			3	264
			4	261
			5	261
	R2	700	1	233
			2	233
			3	234
	R3	1,797	1	232
			2	233
			3	233
			4	233
			5	233
			6	233
			7	200
			8	200
	R4	1,262	1	211
			2	208
			3	209
			4	212
			5	211
			6	211
	R5	1,194	1	238
			2	240
			3	241
			4	240
			5	235
	R6	578	1	193
			2	192
			3	193
	R7	748	1	249
			2	249
			3	250
	R8	1,969	1	247
			2	246
			3	246
			4	246
			5	246
			6	246
			7	246
			8	246
	R9	776	1	259
			2	258
			3	259
	R10	1,060	1	265
			2	265
			3	265
			4	265
	R11	776	1	259
			2	258
			3	259

② 공동주택용지 (60㎡~85㎡이하)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	63,867	-	63,867
A	A1	63,867	-	63,867

③ 근린생활시설용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	2,952	-	2,952
B	B1	1,138	1	1,138
	B2	1,814	1	907
			2	907

2) 상업용지

① 상업시설용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	22,348	-	22,348
C	C1	6,728	1	826
			2	825
			3	825
			4	826
			5	693
			6	1,017
			7	1,017
			8	699
	C2	5,602	1	735
			2	735
			3	1,013
			4	1,029
			5	1,132
			6	958
	C3	2,192	1	1,096
			2	1,096
	C4	4,207	1	1,044
			2	1,043
			3	1,060
			4	1,060
	C5	3,619	1	904
			2	905
			3	905
			4	905

② 업무시설용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	3,286	-	3,286
D	D1	3,286	1	1,058
			2	1,058
			3	1,170

3) 산업시설용지

① 클라우드데이터센터용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	263,634	-	263,634
F	F1	43,298	-	43,298
	F2	33,235	-	33,235
	F3	33,245	-	33,245
	F4	44,467	-	44,467
	F5	15,381	-	15,381
	F6	41,920	-	41,920	특별계획구역(신설)
	F7	52,088	-	52,088

② 빅데이터특화용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	14,195	-	14,195
I	I1	4,014	-	4,014
	I2	10,181	-	10,181

③ 클라우드특화용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	14,329	-	14,329
H	H1	14,329	-	14,329

④ 물기업특화용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	43,142	-	43,142
J	J1	14,376	-	14,577
	J2	16,010	-	15,809
	J3	10,150	-	10,150
	J4	2,606	-	2,606

⑤ 스마트팜용지

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	25,602	-	25,602
G	G1	25,602	-	25,602

3) 도시기반시설용지

① 공공청사

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	2,736	-	2,736
K	K1	2,736	-	2,736

② 변전소

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	5,782	-	5,782
O	O1	2,891	-	2,891
	O2	2,891	-	2,891

③ 수도공급설비

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	5,950	-	5,950
L	L1	5,950	-	5,950

④ 주차장

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			획지번호	면적(㎡)
총계	-	4,934	-	4,934
P	P1	1,042	-	1,042
	P2	1,232	-	1,232
	P3	2,660	-	2,660

나. 건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이․배치․형태․색채․건축선에 관한 도시관리계획
결정조서

1) 주택건설용지

① 단독주택용지

구 분		계 획 내 용
		주거전용		점포겸용
용도	허용용도	∙ 「건축법 시행령」별표1에 의한 다음의 용도 1. 단독주택 중 단독주택, 다가구주택		∙ 「건축법 시행령」별표1에 의한 다음의 용도 1. 단독주택(다중주택, 공관 제외) 2. 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 3. 제2종 근린생활시설(공연장, 종교집회장, 총포판매소, 장의사, 직업훈련소, 골프연습장, 다중생활시설, 제조업소, 단란주점, 안마시술소 제외) 주1) 근린생활시설 설치규모는 연면적의 40%를 초과할 수 없으며 1층 이하(1층 및 지하1층)에 한함 (연면적 산정 시 지하층 연면적 포함)
	불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도		∙ 허용용도 이외의 용도 ∙ 지하층 주거용도
해당블록		R1~R6	R7~R8	R9~R11
건 폐 율		∙ 60%	∙ 60%	∙ 60%
용 적 률		∙ 180%	∙ 180%	∙ 180%
최고층수		∙ 4층 이하	∙ 3층 이하	∙ 4층 이하
1필지당 가구수		∙ 3가구 이하	∙ 3가구 이하	∙ 3가구 이하

② 공동주택용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
A	A1	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 2. 공동주택 중 아파트 ∙「주택법」 제2조 제13호 및 제14호와 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제4장, 제5장에서 정하는 부대시설 및 복리시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 40%
		용적률		∙ 150%
		높이(층수)		∙ 15층 이하

③ 근린생활시설용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
B	B1~B2	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설 - 4. 제2종근린생활시설(차목 중 장의사, 거목 내지 러목 제외) - 11. 노유자시설 - 13. 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 체육관, 운동장 제외)
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%
		용적률		∙ 200%
		높이(층수)		∙ 4층 이하

2) 상업용지

① 상업시설용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
C	C1~C5	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설 - 4. 제2종근린생활시설(나목, 마목, 파목 중 옥외철탑이 설치된 골프연습장, 거목, 더목, 러목 중 안마시술소 제외) - 5. 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 동․식물원 제외) - 7. 판매시설 중 다목의 상점 - 9. 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 부수시설 중 장례식장 제외) - 10. 교육연구시설(학교 제외) - 13. 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) - 14. 업무시설 - 15. 숙박시설 중 생활숙박시설(주거시설과 차폐된 경우에 한함) - 24. 방송통신시설(방송국, 전신전화국 및 통신용 시설에 한함)
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 400%
		높이(층수)		∙ 8층 이하

② 업무시설용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
D	D1	용도	허용	주용도	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 14. 업무시설 ※ 주용도는 건축물 연면적의 50%이상을 확보하여야 함
				부용도	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설 - 4. 제2종근린생활시설(나목, 마목, 파목 중 옥외철탑이 설치된 골프연습장, 거목, 더목, 러목 중 안마시술소 제외) - 5. 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 동․식물원 제외) - 10. 교육연구시설(학교 제외) - 13. 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) - 24. 방송통신시설(방송국, 전신전화국 및 통신용 시설에 한함)
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 400%
		높이(층수)		∙ 8층 이하

3) 산업시설용지

① 클라우드데이터센터용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
				F1~F4, F6, F7		F5
F	F1~F7	용도	허용	주용도	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 24. 방송통신시설(데이터센터 및 이와 비슷한 시설) 및 각 용도의 부대시설
				부용도	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 10. 교육연구시설 중 연구소 - 14. 업무시설 - 각 용도의 부대시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%		∙ 70%
		용적률		∙ 150%		∙ 250%
		높이(층수)		∙ 5층 이하		∙ 5층 이하

② 빅데이터특화용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
I	I1~I2	용도	허용	∙「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설 ∙「소프트웨어 진흥법」 제11조에 의한 소프트웨어 진흥시설 ∙「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13항의 지식산업센터 및 부대시설 ∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설(부수용도) - 5. 문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장 - 10. 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 - 14. 업무시설(오피스텔 제외) - 24. 방송통신시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%
		용적률		∙ 350%
		높이(층수)		∙ 8층 이하

③ 클라우드특화용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
H	H1	용도	허용	∙「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설 ∙「소프트웨어 진흥법」 제11조에 의한 소프트웨어 진흥시설 ∙「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13항의 지식산업센터 및 부대시설 ∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설(부수용도) - 5. 문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장 - 10. 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 - 14. 업무시설(오피스텔 제외) - 24. 방송통신시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%
		용적률		∙ 350%
		높이(층수)		∙ 8층 이하

④ 물기업특화용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
J	J1~J4	용도	허용	∙「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1항의 공장 및 부대시설 ∙「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13항의 지식산업센터 및 생산활동을 지원하기 위한 시설 ∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 10. 교육연구시설 중 연구소 - 14. 업무시설(오피스텔 제외) ※ 공장의 경우 폐수 무배출 업체에 한함
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%
		용적률		∙ 350%
		높이(층수)		∙ 8층 이하

⑤ 스마트팜용지

도면 번호	위치	구분		계획내용
G	G1	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 21. 동물 및 식물 관련시설 중 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실, 이와 비슷한 시설과 부대시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 250%
		높이(층수)		∙ 4층 이하

4) 도시기반시설용지

① 공공청사

도면 번호	위치	구분		계획내용
K	K1	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 14. 업무시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 60%
		용적률		∙ 350%
		높이(층수)		∙ 6층 이하

② 수도공급설비

도면 번호	위치	구분		계획내용
L	L1	용도	허용	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설 중 바목, 아목(급수․배수와 관련된 시설) 및 부속시설 - 5. 문화 및 집회시설 중 라목(전시장, 홍보관, 그 밖에 이와 비슷한 것)
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 200%
		높이(층수)		∙ 3층 이하

③ 변전소

도면 번호	위치	구분		계획내용
O	O1~O2	용도	허용	∙「도시군계획시설의 결정구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조, 제68조, 제2호에 따른 전기공급설비 중 변전시설 ∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 3. 제1종근린생활시설 중 변전소 및 부대시설
			불허	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 200%
		높이(층수)		∙ 3층 이하

④ 주차장

구 분		계 획 내 용
		P1, P2	P3
용도	허용용도	∙ ｢주차장법｣ 제2조의 규정에 의한 노외주차장 (주차전용건축물 및 부속 용도 제외)	∙ ｢주차장법｣ 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도) ∙ ｢주차장법 시행령｣ 제1조의2 제1항(주차전용건축물의 주차면적 비율)에 의한 주차장 외의 용도로 사용되는 부분 중「건축법 시행령」별표1에 의한 다음의 용도 3. 제1종 근린생활시설 4. 제2종 근린생활시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 종교집회장, 장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 다중이용시설 제외) 7. 판매시설(도매시장, 소매시장 제외) 13. 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) 14. 업무시설(오피스텔 제외)
	불허용도	∙ 허용용도 이외의 용도	∙ 허용용도 이외의 용도
건 폐 율		-	∙ 80%
용 적 률		-	∙ 400%
최고층수		-	∙ 6층 이하

다. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서

1) 대지 내 공지에 관한 계획

구분	계획내용
단독주택	∙ 대지내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은「건축법」 제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
공동주택	∙ 대지내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」 제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
근린생활 시설용지	∙ 전면공지 - 전면공지의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 의한다. - “전면공지”이라 함은 건축한계선 등에 의해 대지경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 일반인에게 상시 공개되는 공지를 말한다. 1. “보도 연접형 전면공지”이라 함은 보도와 접한 전면공지로서 조경면적과 별도로 관목 및 초화류 등을 식재함으로써 쾌적한 이미지를 연출하고 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. 2. “차도 연접형 전면공지”이라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. - “전면공지 조성 기준 및 방법”은 다음 각 혹에 따라 조성하여야 한다. 다만, 적용대상은 용지 내 지구단위계획 결정도 상 전면공지 도면표시 지역에 한 한다. 1. 전면공지에는 ‘보행 지장물’을 설치할 수 없다. 2. 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 단차가 없이 조성하여야 한다. 3. 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. ∙ 대지내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
상업·업무 용지	∙ 전면공지 - 전면공지의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 의한다. -“전면공지”이라 함은 건축한계선 등에 의해 대지경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 일반인에게 상시 공개되는 공지를 말한다. 1.“보도 연접형 전면공지”이라 함은 보도와 접한 전면공지로서 조경면적과 별도로 관목 및 초화류 등을 식재함으로써 쾌적한 이미지를 연출하고 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다.

구분	계획내용
상업·업무용지	2. “차도 연접형 전면공지”이라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. 3. “공원연접형 전면공지 : 공원과 접한 전면공지로서 공원기능이 확장되는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. - “전면공지 조성 기준 및 방법”은 다음 각 혹에 따라 조성하여야 한다. 다만, 적용대상은 용지 내 지구단위계획 결정도 상 전면공지 도면표시 지역에 한 한다. 1. 전면공지에는 ‘보행 지장물’을 설치할 수 없다. 2. 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 단차가 없이 조성하여야 한다. 3. 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. ∙ 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
데이터센터	∙ 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
스마트팜	∙ 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
클라우드· 빅데이터특화용지	∙ 전면공지 - 전면공지의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 의한다. - “전면공지”이라 함은 건축한계선 등에 의해 대지경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 일반인에게 상시 공개되는 공지를 말한다. 1. “보도 연접형 전면공지”이라 함은 보도와 접한 전면공지로서 조경면적과 별도로 관목 및 초화류 등을 식재함으로써 쾌적한 이미지를 연출하고 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. 2. “차도 연접형 전면공지”이라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. 3. “공원연접형 전면공지 : 공원과 접한 전면공지로서 공원기능이 확장되는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. - “전면공지 조성 기준 및 방법”은 다음 각 혹에 따라 조성하여야 한다. 다만, 적용대상은 용지 내 지구단위계획 결정도 상 전면공지 도면표시 지역에 한 한다. 1. 전면공지에는 ‘보행 지장물’을 설치할 수 없다.

구분	계획내용
클라우드· 빅데이터특화용지	2. 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 단차가 없이 조성하여야 한다. 3. 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. ∙ 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
물기업 특화용지	∙ 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다
도시기반 시설용지	∙ 전면공지 - 전면공지의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 의한다. -“전면공지”이라 함은 건축한계선 등에 의해 대지경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 일반인에게 상시 공개되는 공지를 말한다. 1. “보도 연접형 전면공지”이라 함은 보도와 접한 전면공지로서 조경면적과 별도로 관목 및 초화류 등을 식재함으로써 쾌적한 이미지를 연출하고 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. 2. “차도 연접형 전면공지”이라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. 3. “공원연접형 전면공지 : 공원과 접한 전면공지로서 공원기능이 확장되는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. - “전면공지 조성 기준 및 방법”은 다음 각 혹에 따라 조성하여야 한다. 다만, 적용대상은 용지 내 지구단위계획 결정도 상 전면공지 도면표시 지역에 한 한다. 1. 전면공지에는 ‘보행 지장물’을 설치할 수 없다. 2. 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 단차가 없이 조성하여야 한다. 3. 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. ∙ 대지내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「건축법」제42조의 규정에 의하여 국토교통부 장관이 고시한 조경기준 및 「춘천시 건축조례」 제26조의 규정에 따른다

2) 교통처리 등에 관한 사항

구분	계획내용
단독주택	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 단독주택용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 단독주택용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다.
공동주택	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 대지 내 차량동선 - 단지 내 도로는 차량 출입구에서 단지 외곽도로와 접할 때 직각 교차를 원칙으로 한다. - 보행로와 교차하는 지점은 ‘보행자 우선구조’로 조성한다. - 단지 계획 시 각각의 주거동으로 연결되는 비상 차량 동선계획을 분명히 하여 화재 등 비상시에 대비할 수 있도록 한다. ∙ 주차장의 설치 - 공동주택용지의 단지 내 주차장 설치는 주택건설기준 등에 관한 규정 및 교통영향평가에 의해 산정된 주차대수 중 강화된 기준 이상을 설치하여야 한다. 다만, 공동주택 이외의 시설은「춘천시주차장조례」에 따라 부설주차장을 설치한다. - 공동주택용지 단지 내 주차장 설치는 다음 각호에서 정하는 시설 기준에 따라 설치하여야 한다. 단, 부대 복리시설은 예외로 한다. 1. 공동주택용지의 단지 내 주차장은 지상의 녹지공간 확보를 위하여 지하 주차장을 활성화한다. 2. 지하 주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로 교통의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치한다. 3. 지하 주차장에서 직접 주동으로 접근이 가능하도록 한다. ∙ 단지 내 자전거주차장 - 공동주택용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.

구분	계획내용
근린생활 시설용지	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 부설주차장의 설치 - 근린생활시설용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 근린생활시설용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. - 효율적인 주차면 확보와 이용자 편의등을 확보할 수 있도록 건축협정을 통하여 연접 부지간 지하 주차장을 통합으로 설치할 수 있으며, 통합주차장 공동 설치시 출구와 입구는 분리하여 설치한다. - 건축시기 차이로 공동주차 출입구 및 통로의 공동조성이 곤란할 경우 우선적으로 개발되는 대지는 개별주차 출입구 및 통로를 연접대지와 공동으로 조성이 가능하도록 계획하여 향후 연접대지 개발 시 통합주차장 출입구로 사용하여야 한다
상업·업무 용지	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 상업·업무용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 상업·업무용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. ∙ 자전거주차장 - 상업·업무용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.
데이터센터	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 데이터센터용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다.

구분	계획내용
데이터센터	∙ 주차장의 형태 및 위치 - 데이터센터용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은 ‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다.
스마트팜	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 스마트팜용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 스마트팜용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. ∙ 자전거주차장 - 스마트팜용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.
클라우드· 빅데이터특화용지	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 클라우드·빅데이터특화용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 클라우드·빅데이터특화용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. ∙ 자전거주차장 - 클라우드·빅데이터특화용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.

구분	계획내용
물기업 특화용지	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 물기업특화용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 물기업특화용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. ∙ 자전거주차장 - 물기업특화용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.
도시기반시설용지	∙ 대지 내 차량출입 - 도로에 접한 대지의 일부 구간 중 교통에 장애가 예상되어 차량출입 불허구간으로 지정된 곳에서는 각 대지로의 차량 출입구를 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(허가권자)의 인정을 받은 경우에는 그러하지 아니한다. - 차량출입에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. - 차량출입구는 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. ∙ 주차장의 설치 - 도시기반시설용지 내 주차장 설치기준은 「주차장법」및「춘천시 주차장 설치 및 관리 조례」에 따라 설치하여야 한다. ∙ 주차장의 형태 및 위치 - 도시기반시설용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 주차대수를 확보하여야 하며, 이때 해당 도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 부설주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접획지 경계부에 위치하도록 권장한다. - 주차장의 포장은‘투수성 포장’을 원칙으로 하며, 건축물의 색상과 조화롭게 계획하여야 한다. ∙ 자전거주차장 - 도시기반시설용지에는 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 시행령에 따라 자전거 주차장을 확보하여야 한다. - 자전거 주차장의 세부 설치기준은 「자전거이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 규정에 따른다.

3) 친환경계획에 관한 사항

구분

계획내용

생태면적률

∙ “생태면적률”이란 전체 개발면적 중 생태적 기능 및 자연순환기능이 있는 토양 면적이 차지하는 비율로서 개발공간의 생태적 기능 지표로 활용됨

< 면적유형별 가중치 >

공간유형			가중치	설 명	사 례
1	자연 지반 녹지	-	1.0	ㆍ자연지반이 손상되지 않은 녹지 ㆍ식물상과 동물상의 발생 잠재력 내재 온전한 토양 및 지하수 함양 기능	ㆍ자연지반에 자생한 녹지 ㆍ자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 조성된 녹지
2	수공간	투수기능	1.0	ㆍ자연지반과 연속성을 가지며 지하수 함양 기능을 가지는 수공간	ㆍ하천, 연못, 호수 등 자연상태의 수공간 및 공유수면 ㆍ지하수 함양 기능을 가지는 인공연못
3		차수 (투수불가)	0.7	ㆍ지하수 함양 기능이 없는 수공간	ㆍ자연지반 또는 인공지반 위에 차수 처리된 수공간
4	인공 지반 녹지	90㎝≦토심	0.7	ㆍ토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지	ㆍ지하주차장 등 지하구조물 상부에 조성된 녹지
5		40㎝≦토심< 90㎝	0.6	ㆍ토심이 40㎝ 이상이고 90㎝ 미만인 인공지반 상부 목지
6		10㎝≦토심< 40㎝	0.5	ㆍ토심이 10㎝ 이상이고 40㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지
7	옥상 녹화	30㎝≦토심	0.7	ㆍ토심이 30㎝ 이상인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	ㆍ혼합형 옥상녹화시스템 ㆍ중량형 옥상녹화시스템
8		20㎝≦토심< 30㎝	0.6	ㆍ토심이 20㎝ 이상이고 30㎝ 미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간
9		10㎝≦토심< 20㎝	0.5	ㆍ토심이 10㎝ 이상이고 20㎝ 미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	ㆍ저관리 경량형 녹화옥상시스템
10	벽면 녹화	등반보조재, 벽면부착형, 자력등반형 등	0.4	ㆍ벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 등반형의 경우 최대 10㎝ 높이까지만 산정	ㆍ벽면이나 옹벽녹화 공간 ㆍ녹화벽면시스템을 적용한 공간
11	투수포장		0.4~ 0.2	ㆍ자연지반과 연속성을 가지며 공기와 물이 투과되는 포장면	ㆍ투수성능 및 적용 공법에 따른 가중치 차등 부여(「환경영향 평가서등의 작성등에 관한 안내서」의 상세기준 준용)
12	저류․침투시설 연계면		0.2	ㆍ지하수 함양을 위한 우수침투시설 또는 저류시설과 연계된 포장면	ㆍ침투, 저류시설과 연계된 옥상면 ㆍ침투, 저류시설과 연계된 도로면
13	저영향개발기법시설 연계면		0.3	ㆍ누수유출고 10㎜ 이상을 처리하는 저영향개발기법 시설과 연게된 포장면	ㆍ「비점오염저감시설의 설치 및 운영․관리 매뉴얼」의 저영향개발기법 시설 중 식생체류지, 나무여과상자, 식물재배화분, 식생수로, 식생여과대, 침투도랑, 침투통, 모래여과시설과 연계된 도로면
			0.2	ㆍ누수유출고 5㎜ 이상을 처리하는 저영향개발기법 시설과 연게된 포장면
14	포장면		0.0	ㆍ공기와 물이 투과되지 않는 포장, 식물생장이 없음	ㆍ인터락킹 블록, 콘크리트 아스팔트 포장 ㆍ불투수 기반에 시공된 투수 포장

구분

계획내용

생태면적률

∙ “생태면적률은 환경영향평가 대상 중 도시, 산업 및 농공단지, 관광단지 등의 개발사업에 우선 적용되는 것으로 “환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정, 2023.01, 환경부 고시”에 준하여 본 사업지구의 계획생태면적률을 제시하였고, 본 사업지구의 계획생태면적률은 “특정지역의 개발”의 최소달성 목표인 20% 이상을 적용토록 한다.

< 생태면적률 적용기준 >

개발사업 유형	권장달성목표	세부내용
1. 도시의 개발	30 이상	구도심개발사업
	40 이상	구도심 외의 개발사업
2. 산업입지 및 산업단지의 조성	20 이상	-
3. 관광단지의 개발	60 이상	-
4. 특정지역의 개발	20~80 이상	개발사업 유형별 기준 적용
5. 체육시설의 설치	80 이상	일반 체육시설(실외)
	50 이상	경륜·경정시설(실내)
6. 폐기물 및 분뇨처리시설의 설치	50 이상	매립시설
	40 이상	소각시설 및 분뇨처리시설

주) 1. 구도심 개발사업은 “도시개발법” 및 “도시 및 주거환경정비법”에 의하여 추진되는 사업으로 도시재정비 등 구 도심에서의 개발사업에 적용

2. 해당 계획 또는 사업의 특성․내용, 지역적 특성, 권장달성목표 등을 종합적으로 고려하여 해당 계획 또는 사업에 적용할 생태면적률 달성목표를 최대 50퍼센트 범위내까지 감소하여 설정할 수 있다.

자료 : 환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정 별표2의2, 2023.01

∙ 생태면적률의 적용기준은 「생태면적률 대상사업, 산정방법 및 면적유형별 가중치(환경부 고시)」을 따른다

∙ 생태면적률의 산출은 제곱미터당 가중치를 바탕으로 다음과 같은 공식에 의한다

생태면적률 =	자연지반녹지 면적 + Σ(인공화 지역 공간유형별 면적×가중치)	× 100(%)
	전체 대상지 면적

단지계획

∙ 주변 여건을 감안하여 자연지형을 최대한 보존하면서 공간 형태가 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

∙ 단지 내의 불필요한 도로 및 시설물을 최소화하여 포장면적은 줄이고, 녹지면적을 최대화한다.

∙ 기존 식재계획 보다 식생밀도를 좀더 높일 수 있도록 하여야 한다.

녹지

∙ 녹지의 확대를 위하여 건축물 녹화, 주차장 녹화, 투수포장, 유수공간 조성, 밀집 및 다층식재 등의 다양한 녹지공간 조성방안을 고려하여 계획한다.

∙ 도로의 열섬화 예방 및 차량에서 발생되는 탄소 흡수를 위하여 도로에 탄소 흡수력이 우수한 수목을 식재하도록 계획한다.

∙ 단지 내의 미기후 향상을 위하여 녹지와 수공간(인공, 자연형)을 조성하고 건물의 벽면 및 지붕녹화 계획을 수립한다.

바람길

∙ 도심 열섬현상 완화를 위하여 지구 내 모든 건축물은 단지 내 녹지와 물, 오픈스페이스의 네트워크를 통해 신선한 공기가 유입될 수 있도록 환경영향평가 및 경관계획에서 제시한 바람길을 고려하여 조성한다.

∙ 바람길 주변의 건축물은 바람길에 평행하도록 배치하고 충분한 간격을 가지도록 계획한다.

∙ 도로의 가로수 수목식재를 통해 여름철 공기 흐름을 유도하며, 열섬현상을 완화하도록 계획한다.

구분	계획내용
일조	∙ 건축물의 배치는 남향배치를 원칙으로 하여 자연채광을 최대화하고 그림자, 일조 및 채광 등을 종합적으로 고려하여 건물의 난방 및 조명부하 등을 줄일 수 있도록 계획한다.
친환경 빗물관리 계획	∙“불투수층”에서 발생되는 표면유출 증가로 인한 도시침수, 수질오염, 지하수 감소 등 왜곡된 물의 순환 고리를 연결하는 방안으로 자연상태와 가깝게 물순환체계를 수립하도록 한다. ∙ 개발전의 수문상태와 가장 근접할 수 있도록 친환경 빗물관리 계획(LID 기법)을 수립한다.

4) 저영향개발(LID)에 관한 사항

구분

계획내용

LID 기술요소

설계기준

∙ “저영향개발 (LID 기법 : Low Impact Development)”이란 개발사업 등으로 인하여 불투수층에서 발생하는 강우 유출수를 최소화하여 자연상태의 물순환 회복에 기여할 수 있는 기법을 말한다

∙ 빗물관리 용량은 「저영향개발기법(LID) 설계 가이드라인(환경부. 2016)」에 따라 산정한다.

∙ 저영향개발(LID) 계획 및 시공을 할 때에는「저영향개발(LID)기법 설계 가이드라인(환경부. 2016)」,「저영향개발(LID)기법 조경ㆍ경관 가이드라인(환경부, 2018)」과「저영향개발(LID)기법 시공 가이드라인(환경부, 2020)」에 따라 기술요소를 적용한다.

< LID 기술요소의 분류 >

구 분	LID 기술요소	기술의 정의
식생형 시설 (비점오염 저감시설)	식생수로 (Bioswale, Vegetated swale)	ㆍ식생으로 덮인 개수로를 통하여 강우유출수를 이송시키는 시설로 식생에 의한 여과, 토양으로 침투 등의 기작으로 강우유출수의 오염물질을 제거하는 시설을 말한다.
	나무여과상자 (Treebox filter)	ㆍ나무 또는 큰 관목이 식재된 박스를 매립하여 식재토양층의 여과 및 나무의 생화학적 반응을 통하여 강우유출수에 포함된 오염물질을 저감시키는 시설을 말한다.
	식생체류지/빗물정원 (Bio retention, Rain garden)	ㆍ식물이 식재된 토양과 모래층 및 자갈층으로 구성되어 강우유출수가 식재토양층 및 지하침투 과정에서 비점오염물질을 저감시키는 시설을 말한다.
	식생여과대 (Vegetated filter strip)	ㆍ식물체를 통한 여과와 토양침투에 의해 비점오염물질을 제거하는 기능을 하며 균일하게 경사진 지면에 조밀한 식생을 갖춘 넓은 풀밭으로 조성되는 것을 말한다.
	식물재배화분 (Planter box)	ㆍ식물이 식재된 토양층과 그 하부를 자갈로 채워 강우유출수를 식재토양층 및 지하로 침투시켜 오염물질을 저감 시키는 시설을 말한다.
	옥상녹화 (Green roof)	ㆍ우수유출수를 옥상에서 차집하여 빗물 유출량 및 유출속도를 줄이고 도심 생태환경 조성 및 주변 환경을 개선하고, 건물의 에너지를 저감하는 것을 말한다.
빗물 이용시설	빗물통 (Rain barrel)	ㆍ단독주택, 근린생활시설 등 소규모 건축물에서 빗물을 모아 이용할 수 있는 시설로서 필요에 따라 다양한 크기로 제작 또는 구입하여 사용할 수 있는 기술을 말한다.

구분

계획내용

LID 기술요소

설계기준

< LID 기술요소의 분류 >

구 분	LID 기술요소	기술의 정의
침투 시설 (비점오염 저감시설)	침투트렌치 (Infiltration trench)	ㆍ일정 간격 침투집수정(전처리시설) 사이에 쇄석으로 둘러쌓인 유공관을 매설하고 침투집수정에서 유공관으로 유입된 빗물이 쇄석층을 통과하여 측면 및 저면으로 침투시키는 기술을 말한다.
	침투도랑 (Infiltration ditch)	ㆍ돌로 채워진 형태의 도랑으로 강우시 유출수를 담아두고 토양으로 침투시키는 도랑을 말한다.
	침투측구 (Infiltration channel)	ㆍ형상은 U형측구와 비슷하며 측면이나 저면부의 유공 또는 다공성으로 주변을 쇄석으로 충진하여 강우유출수를 지층으로 침투시키는 역할을 하는 시설을 말한다.
	침투통 (Infiltration chamber)	ㆍ투수성을 가지는 통 본체와 주변을 쇄석으로 충전하여 집수한 빗물을 측면 및 바닥에서 땅 속으로 침투시키는 시설을 말하며, 침투빗물받이나 침투집수정을 설치할 수 있다.
	투수성포장 (Porous pavement)	ㆍ전면 투수포장과 부분 투수포장으로 구분되며, 전면 투수포장은 마사토, 모래, 자갈 등 자연골재를 물 다짐하여 조성한 자연골재 투수포장이나 투수소재를 이용해 포장면 전체를 투수가 가능하게 조성한 공간을 말한다

빗물관리 목표량 및 대상용지

∙ 강원 수열에너지 융복합클러스터 지구의 빗물관리 목표량은 다음과 같으며, 토지이용계획별로 충족되도록 한다.

∙ 단, 단독주택 및 부지면적 1천㎡미만 시설은 빗물관리 목표량이 충족되도록 권장한다.

∙ 빗물관리 목표량은 다음 시설에 해당하는 용지는 제외한다.

- 유수지(영구저류지) 등 시설 자체가 저류기능을 하거나, 오수중계펌프장 등 무인으로 운영되는 시설

- 주유소(액화 포함), 변전소(전기공급시설 등), 열공급시설, 배수지(가압장 등), 오수중계펌프장 등 공급처리시설

< 토지이용계획별 빗물관리 목표량 >

용지구분		빗물관리 목표량(㎜)
단독주택		9.5
공동주택		15.4
상업·업무		11.6
산업지원시설		18.9
공공청사		18.9
공원·녹지		7.0
도로	대로, 중로	20.1
	소로(단독택지)	11.6

구분	계획내용
LID 기술요소 적용 (단독주택)	∙ 단독주택의 옥상 또는 지붕 빗물은 우수관으로 바로 유입되지 않고 조경으로 유입될 수 있도록 권장한다. ∙ 단독주택의 경우 조경면적은 불투수면적(지붕, 주차장 등)의 최소 5%이상이 되도록 권장한다. ∙ 단독주택 지상부 조경의 높이는 불투수면적보다 낮게 조성하여 빗물이 유입될 수 있도록 조성할 수 있다.
LID 기술요소 적용 (공동주택)	∙ 공동주택은 지상공간을 최대한 활용하여 빗물정원, 침투도랑, 식생수로 등 다양한 LID기술요소를 설치할 수 있도록 한다. ∙ 공동주택의 경우 건축계획에서 생태면적률을 고려한 LID기술요소 적용방안을 수립한다. ∙ 지상공간 중 보도는 투수성포장으로 조성하고, 지하 주차장 상부 등 인공지반에 식생형 시설 설치를 권장한다. ∙ 근린상가 등 저층의 건축물 상부는 빗물저류와 도시 열섬효과를 예방할 수 있도록 옥상녹화를 권장한다. ∙ 빗물이용시설에 관한 규정에 따라 옥상 빗물을 차집 후 저장할 수 있는 시설 설치를 권장하며, 필요시 조경용수, 분수, 실개천 등으로 활용할 수 있다.
LID 기술요소 적용 (상업·업무· 도시지원 시설용지)	∙ 유동인구가 많고 불투수율이 높은 토지이용 특성에 따라 보행자의 안전을 감안하여 침투시설을 적극 도입하고 옥상녹화를 계획한다. ∙ 상업ㆍ업무용지는 전체에서 차지하는 비율은 크지 않으나, 상대적으로 지붕면적이 크기 때문에 지붕우수에 대한 대책을 수립한다. ∙ 옥상녹화를 통해 빗물유출을 저감시킬 수 있으며, 옥상녹화에서 유출되는 빗물은 빗물통을 설치해 저류시킬 수 있으며, 빗물통을 월류하는 빗물은 침투시설, 녹지대 등을 거쳐 우수관으로 배제되도록 한다. ∙ 지표면은 투수성 포장을 원칙으로 하되, 일부 상업지역의 경우 보행환경 및 유지관리 측면에서 투수성 포장이 제한되는 경우가 있으므로 이를 고려한다. ∙ 건폐율이 높아 부지의 대부분을 건축물이 차지하고 있어 지표면에서 유출되는 빗물이 많지 않고 도로와 인접해 있기 때문에 지표면에서 유출되는 빗물은 지표면에서 처리하는 방안을 검토한다.
LID 기술요소 적용 (공공시설 및 산업지원 시설용지)	∙ 도로, 보도의 불투수면에서 발생되는 고농도 오염물질에 대하여 LID기술요소의 분산배치로 비점오염물질을 제어할 수 있도록 식생형 시설과 침투시설을 계획한다. ∙ 건축물 옥상은 빗물 저류와 에너지 절약 등을 위해 옥상녹화를 원칙으로 한다. 다만, 안전을 이유로 옥상개방이 제한적인 경우에는 이를 고려하여 계획한다. ∙ 산업지원시설은 건물옥상에서 발생되는 빗물을 지표면으로 유도하여 저류·침투될 수 있도록 하여 빗물이용을 적극 활용하도록 계획한다. ∙ 산업지원시설은 기후변화에 대응할 수 있도록 탄소저감을 위한 식생형시설을 적극도입하도록 한다.

구분	계획내용
LID 기술요소 적용 (공원 및 녹지)	∙ 공원부문의 LID기술요소 적용은 공원 계획 및 설계에 반영되어야 한다. ∙ LID기술요소 적용시 공원 설계 기준에 적합하여야 하며, 공원 내 계획된 주차장, 건물, 각 조경 시설물을 검토하여 계획한다. ∙ 수목식재와 연계성을 갖도록 하고 수목 생육여건에 부합하도록 한다. ∙ LID기술요소 등의 저영향개발 시설은 동선의 결절부와 같은 사람의 이용이 많은 곳에 조경시설과 연계하여 설치하는 것을 권장한다. ∙ LID기술요소가 적용된 완충녹지의 경우 녹지변을 주변부보다 낮게 조성하여, 녹지공간으로 불투수면 및 인접공간에서 빗물이 유입될 수 있도록 조성한다. ∙ 공원과 외부공간의 경계부에는 빗물 및 토사유출이 저감되도록 조성한다.
LID 기술요소 적용 (도로, 주차장용지)	∙ 보도, 자전거 도로, 주차장 등 하중이 크지 않은 지표면은 투수성 포장을 원칙으로 한다. 투수성 포장을 통과하여 유출되는 빗물은 침투시설, 녹지대 등을 거쳐 우수관으로 배제되도록 할 수 있다. ∙ 도로에서 유출된 빗물은 가급적 주변 녹지대로 유입시켜 빗물의 침투를 유도하되 구배 등으로 인해 곤란할 경우 침투시설로 유입시킨다. ∙ 도로의 폭원에 따른 체계적인 접근이 중요하며 가급적 보도 식수대를 활용하되 곤란할 경우 침투시설을 이용하여 처리한다. ∙ 공공기반시설은 도로면의 불투수층에서 발생되는 고농도 초기 우수는 가급적 발생 근원에서 처리될 수 있도록 한다. ∙ 식수대 활용 가능 구간은 단면 개량을 통한 강우 침투 확대, 여과를 통한 지하수 함양, 수질개선 등을 고려하여 계획한다. ∙ 차도의 측구를 최대한 활용하여 초기 우수처리 및 침투를 유도한다.

5) 수열에너지 공급에 관한 계획

구분

계획내용

적용범위

∙ 본 규정은 수열에너지 공급시설 설치에 적용되는 것으로 지침에서 언급되지 않은 내용은 “강원 수열에너지 융복합클러스터 건설공사”입찰안내서 및「신․재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침」중 “수열에너지설비 시공기준”등에 따른다

수열공급시설의 설치

∙ 수열에너지를 사용하기 위한 수열 주관로(소양강댐-소양정수정 원수관에서 분기)와 통합운영센터는 “강원 수열에너지 융복합 클러스터 사업시행자”(이하 사업시행자)가 설치한다.

∙ 사업시행자는 수분양자가 분양받은 필지 경계선에서 필지내로 5m 까지 수열관로를 설치하고, 필지 내 수열관로는 수분양자가 설치하는 것을 원칙으로 한다.

∙ 사업시행자는 수열공급시설이 원활히 운영될 수 있도록 통합운영센터의 기계 및 전기, 자동제어시설을 설치하며, 수분양자는 필지별로 수열공급이 원활히 이루어질 수 있도록 통합운영센터와 호환되는 자동제어설비를 구축하여야 한다.

∙ 수분양자는 수열공급시설의 원수를 이용하여 수열에너지로 활용할 수 있도록 열교환기, 순환펌프, 자동스트레이너와 기타 수열공급에 필요한 시설 및 연계배관 등을 설치하여야 한다.

∙ 수열시설의 유지관리는 관로 연결점(Tie-In Point)을 기준으로 각 수열시설 설치자가 실시한다. (Tie-in Point는 분양자 필지 내 5m - 설치 주체가 구분되는 지점을 말한다.)

<필지별 연결점 위치(Tie-in Point)>

필지명			연결점 좌표	필지명		연결점 좌표
데이터 센터	F4	DC1	X-269117.8432, Y-592021.3881	G1	스마트팜	X-268395.6827, Y-591764.5875
	F3	DC2	X-269092.3423, Y-592005.3716	I1	빅데이터 특화1	X-268039.4992, Y-591935.5363
	F2	DC3	X-268708.9783, Y-591818.8880	I2	빅데이터 특화2	X-267959.4605, Y-591887.9798
	F6	DC4	X-268842.7736, Y-591777.7752	H1	클라우드특화	X-267977.2834, Y-591692.0598
	F7	DC5	X-268858.8955, Y-591655.0757	J4	물기업특화1	X-267981.9408, Y-591613.2677
	F5	DC6	X-268813.5388, Y-591790.5236	J3	물기업특화2	X-267956.2115, Y-591598.0742
	F1	DC7	X-268256.0327, Y-591710.7682	J2	물기업특화3	X-267734.2229, Y-591598.2363
				J1	물기업특화4	X-267707.7773, Y-591590.7771

구분	계획내용
수열공급시설 설치 및 운영	∙ 수열 원수는 수열에너지 사용 후 소양정수장을 통해 춘천시의 상수로 공급되므로 사고에 의한 원수의 오염을 방지하기 위해 원수와 열교환을 하는 1차 열교환기는 반드시 사업시행자가 공급하는 원수를 사용하여야 한다.(물대물 직접 열교환 및 물을 냉수로 이용하는 냉동기, H/P 적용시) ∙ 브라인을 사용하는 냉동기 또는 H/P 적용시 열교환기 내에서의 오염을 방지하기 위해 전단부에 물대물 열교환을 위한 1차 열교환기를 추가로 설치하여 열교환기 문제로 인한 원수와 섞임 가능성이 절대 없어야 한다. ∙ 열교환기 또는 원수와 접촉 가능성이 있는 장비의 세정에 약품을 사용할 경우 인체에 무해함을 증명할 수 있도록 공신력 있는 단체의 증명서 등을 제시하고 약품사용 전 통합관리센터 운영자에게 통보하여야 한다. ∙ 순환펌프는 필지내로 연결되는 수열배관(공급, 환수)과 시설 내 설치되는 설비(자동스트레이너, 열교환기, 연결배관 등 이와 유사한 시설)의 손실수두를 감안하여 인입압력과 동일하게 손실 보상 후 환수시켜야 한다. ∙ 수분양자는 사업시행자가 수열공급시설 전체를 원활히 운영할 수 있도록 계측 및 자동제어설비를 구축하여야 한다. - 원수의 유량, 온도, 압력, 탁도 등을 확인할 수 있도록 인입 및 환수배관에 센서를 설치하여야 한다. - 원수 순환의 자동밸브 개도상태, 분양자 측 수열설비 상태를 감시할 수 있는 CCTV를 설치하고 통합운영센터에 관련 정보를 보낼 수 있어야 한다. ∙ 통합운영센터는 분양자 측 순환펌프의 운전상태를 감시․확인할 수 있도록 공유되어야 하며, 평시 순환펌프의 운전 및 제어권을 가지고 전체 수열클러스터에 수열을 공급한다.(일부 필지로 인해 전체 수열 클러스터에서의 물 순환의 영향을 최소화하기 위해 운전권 필요) 다만, 비상 상황 발생시는 순환펌프의 운전 권한을 문제가 발생된 해당 필지의 분양자가 가질 수 있다.
데이터센터 세부기준	∙ 수분양자는 냉방에너지로 반드시 수열에너지를 이용하여야 하며, 기계설비로 자동스트레이너(1㎜ 이하), 열교환기, 순환펌프, 연계배관(공급 및 환수관로), 냉방시설 연계 배관 등 수열에너지를 활용하기 위한 시설을 설치하여야 한다. ∙ 수열 원수 사용량은 20MW 기준 여름철(겨울철을 제외한) 약 777㎥/hr, 겨울철(12, 1, 2월) 약 1,092㎥/hr를 사용하여야 하며, 입주 시 통합운영센터 운영자와 협의를 거쳐 사용량을 확정하여야 한다.(용지별 수열공급량 기준 참조) 또한, 매해 연초 통합운영센터와 블록별 사용량 협의를 진행하여야 한다.
스마트팜 및 특화용지 세부기준	∙ 스마트팜 용지, 특화용지(빅데이터 특화, 클라우드 특화, 물기업 특화)용지의 수분양자는 냉/난방에너지로 수열에너지를 이용할 수 있으며, 사용 시 기계설비로 자동스트레이너(1mm 이하), 열교환기, H/P(히트펌프), 순환펌프, 연계배관(공급 및 환수관로), 냉방시설 연계 배관 등 수열에너지를 활용하기 위한 시설을 설치하여야 한다. ∙ 수열 원수 사용량은 입주 시 통합운영센터 운영자와 협의를 거쳐 사용량을 확정하여야 하며, 매해 연초 통합운영센터와 블록별 사용량 협의를 진행하여야 한다.

구분

계획내용

용지별 수열공급량

기준

∙ 필지별 수열공급량 기준은 아래와 같으며, 블록별 수열공급량은 모든 필지에서 수열에너지를 사용한다는 가정하에 산출된 유량이므로 일부 필지에서 수열에너지를 미사용 시 수열 클러스터 전체 필지별 이용량이 급변동되므로 입주 시 통합운영센터와 협의된 사용량은 반드시 지켜져야 한다.

∙ 입주시 수분양자의 특별한 사정으로 수열에너지 이용이 곤란한 경우 통합운영센터 운영자와 협의를 거쳐 수열에너지 적용여부를 결정하여야 한다.

- 최소 값(여름철)

구 분			사용량 (㎥/hr)	구 분		사용량 (㎥/hr)
데이터 센터	F4	DC1(600A)	777	G1	스마트팜(500A)	154
	F3	DC2(800A)	1,555	I1	빅데이터 특화1(400A)	351
	F2	DC3(800A)	1,555	I2	빅데이터 특화2(250A)	138
	F6	DC4(800A)	1,555	H1	클라우드 특화(500A)	494
	F7	DC5(800A)	1,555	J4	물기업 특화1(100A)	21
	F5	DC6(600A)	777	J3	물기업 특화2(200A)	83
	F1	DC7(600A)	777	J2	물기업 특화3(250A)	130
				J1	물기업 특화4(250A)	119

- 최대 값(겨울철)

구 분			사용량 (㎥/hr)	구 분		사용량 (㎥/hr)
데이터 센터	F4	DC1(600A)	1,092	G1	스마트팜(500A)	476
	F3	DC2(800A)	2,185	I1	빅데이터 특화1(400A)	393
	F2	DC3(800A)	2,185	I2	빅데이터 특화2(250A)	155
	F6	DC4(800A)	2,185	H1	클라우드 특화(500A)	554
	F7	DC5(800A)	2,185	J4	물기업 특화1(100A)	24
	F5	DC6(600A)	1,092	J3	물기업 특화2(200A)	93
	F1	DC7(600A)	1,092	J2	물기업 특화3(250A)	145
				J1	물기업 특화4(250A)	134

6) 경관부문에 관한 사항

① 건축경관계획

구분	계획내용
단독주택	∙ 주변 자연경관과 조화를 이루고, 기정 단독주택과 맥락성 있는 단지경관을 형성하도록 디자인한다. - 따뜻한 색감이나 자연재질(자연유사재질) 소재 적용 - 지붕은 편경사를 포함함 경사지붕 도입 권장 ∙ 점포 조성 시, 인접한 점포와 연속성을 갖도록 입면을 계획한다. ∙ 1층 점포 입지 시 차양, 테라스, 조형성 있는 옥외광고물 등을 도입하여 장소성을 형성할 수 있도록 계획한다. ∙ 가스관, 실외기 등 설비시설은 외부에서 가시되지 않도록 설치하거나 입면과 유사한 재질로 차폐한다. ∙ 단독주택 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제4조 단독주택을 따른다
공동주택	∙ 소양강변을 따라 거대한 장벽이 형성되지 않도록 주동의 타입을 계획한다. ∙ 동일한 형태의 주동이 늘어서지 않도록 벽면 돌출이나 발코니 변화 등의 입체적인 형태 도입, 색채 변화(패턴·입면 구성) 등을 통하여 입면구성을 다양화한다. ∙ 과도한 상층부 디자인이나 장식 요소는 지양하고, 간결한 형태로 상층부 디자인을 계획한다. ∙ 상업용지 일대에서 단독주택단지 및 순환대로 방향으로 낮아지는 스카이라인을 형성한다. ∙ 소양강으로의 통경축을 적극적으로 확보하여 개방감 있는 조망경관을 형성한다. ∙ 공동주택 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제5조 공동주택을 따른다
상업․업무시설	∙ 소양강변, 기정 주거지변으로 낮은층을 배치한다. ∙ 5층 이상의 건축물은 기단부를 갖춘 형태로 계획하고, 기단부는 3층 이하로 조성한다. ∙ 기단부 조성 시, 기단상층부는 개방된 옥상정원이나 식재공간을 도입한 테라스 등 휴식ㆍ녹지 공간으로 활용 권장 ∙ 저층부는 개방적 구조의 가로대응형태로 조성하거나 테라스 등과 같은 머물 수 있는 공간 조성을 권장한다. ∙ 보행자도로에 면한 상업용지, 주차건축물은 특화된 보행몰(mall)을 형성할 수 있도록 건축물 입면을 계획하고 교류를 위한 공간으로 외부공간을 조성한다. ∙ 건축물 저층부는 휴먼스케일을 고려하여 입면을 분할한다. ∙ 상업․업무시설 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제6조 상업․업무시설을 따른다
근린생활시설	∙ 연속된 가로경관 형성을 고려한 건축물 계획을 수립하도록 한다. ∙ 인접 건축물과 건축, 건축물의 최고 높이 및 층높이, 마감재료 등을 고려하여 맥락성을 형성하도록 한다. ∙ 건축물 저층부는 휴먼스케일을 고려하여 입면을 형성한다. ∙ 근린생활시설 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제7조 근린생활시설을 따른다

구분	계획내용
클라우드 데이터센터	∙ 주변 자연환경과 이질적인 경관을 형성하지 않도록 건축물 형태와 배치를 계획한다. - 거대한 입면을 형성하지 않도록 동을 분리하여 분산배치하거나 입체적인 분절을 통해 위압감 완화 - 개방감 있는 수변경관 형성을 위하여 소양강 방향으로 통경축을 최대한 확보하도록 건축물 배치 ∙ 첨단산업단지의 이미지를 형성하도록 간결하고 세련된 입면 디자인을 도입하고, 기능상 투명소재의 도입이 가능한 건축물은 유리 등의 투명소재를 사용하여 경쾌한 분위기를 형성하도록 계획한다. ∙ 건축물 상층부 옥상녹화나 입면 녹화 도입을 권장한다. ∙ 도로에 면하여 연구시설이나 사무동과 같은 디자인이 양호한 건축물을 배치한다. ∙ 구릉지 지형을 고려하여 자연에 순응하는 형태로 조형미 있게 계획한다. ∙ 산지를 배경으로 조화를 이루도록 계획하고 다각적인 조망을 검토하여 주・야간 랜드마크적 기능을 강화한다. ∙ 클라우드 데이터센터 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제8조 클라우드 데이터센터를 따른다
클라우드ㆍ빅데이터 특화	∙ 상업ㆍ업무시설 연속성을 고려하여 건축물 입면을 계획한다. ∙ 특화이미지를 형성할 수 있도록 조형미 있는 건축물 형태를 계획한다. ∙ 거대한 입면을 지양하고 입체적으로 분절을 권장한다. ∙ 기단부를 갖춘 형태로 유도하고, 기단부 조성 시 기단상층부는 개방된 옥상정원이나 식재공간을 도입한 테라스 등 휴식ㆍ녹지 공간으로 활용을 권장한다. ∙ 클라우드ㆍ빅데이터 특화 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제9조 클라우드ㆍ빅데이터 특화를 따른다
스마트팜 및 물기업특화	∙ 하천과 농지, 기정 마을에 인접한 여건을 고려하여 주변 자연경관과 조화를 이루고 이질적인 요소를 최소화하도록 건축물 외관을 계획한다. - 지내천, 남측의 농지와 면한 구간은 공지를 충분히 확보하도록 건축물 배치 - 주변 환경과 대비되는 위압적인 건축물이 조성되지 않도록 규모를 계획하거나 분산배치 - 자연환경과 이질적인 소재 및 색채 사용을 지양하고 저명도, 저채도의 자연질감 소재를 적극적으로 도입 ∙ 산지 등 주변 자연경관으로의 전망이 좋은 지점을 중심으로 휴게공간을 조성하여 자연을 즐길 수 있는 공간을 창출한다. ∙ 지내천 및 순환대로에서의 조망을 고려하여 개방감을 확보할 수 있도록 건축물을 배치한다. - 동서방향의 통경축 확보 ∙ 수변에 면한 구간은 가시성이 높으므로 과도한 입면이나 미관저해시설이 가시되지 않도록 계획한다. ∙ 물기업특화용지는 순환대로에서의 조망을 고려하여 건축물 높이를 계획하고 옥상녹화를 도입한다. ∙ 스마트팜 및 물기업특화 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제10조 스마트팜 및 물기업특화를 따른다

구분	계획내용
공공건축물	∙ 공공건축물은 간결한 형태의 조형적인 디자인을 적용하여 계획한다. ∙ 과도한 규모 및 형태의 위압감을 이루는 형태는 지양한다. ∙ 중심가로축에서 조망 시 초점경관을 고려하여 건축물을 계획한다. ∙ 도로에 면한 가각부는 개방감 있는 형태로 계획하며 전면공지 조성을 권장한다. ∙ 외부공간은 공원과 연속되는 형태로 접근성을 고려하여 계획한다. ∙ 무장애디자인, 범죄예방환경설계를 적용하고 보행자의 안전하고 편안한 보행환경을 조성한다. ∙ 공공건축물 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제11조 공공건축물을 따른다
변전소	∙ 건축물과 설비는 최대한 노출되지 않도록 경계부를 따라 수고가 높은 수목을 식재하여 차폐하도록 한다. ∙ 수목은 상록수종을 활용하여 식재하도록 한다. ∙ 건축물이 노출되는 경우 인접 건축물의 외관 디자인, 건축물의 높이, 저층부 높이, 마감재료 등의 요소가 유사성을 갖도록 조성한고 옥상부에는 녹화를 권장한다. ∙ 변전소 건축경관계획에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제12조 변전소를 따른다

② 색채

구분

계획내용

공통지침

∙ 자연석재 및 목재 등 자연친화적인 소재는 색상 범위에서 제외한다.

∙ 건축물 입면에 설치되는 우수홈통, 배관 등은 배경과 동일한 색채로 도색한다.

∙ 지붕 색채는 동일 블록을 통합 적용하는 것을 원칙, 일관성 있는 부감경관을 연출한다.

∙ 무채색으로 보여지는 저반사 유리 사용 단. 컬러유리 적용이 필요한 경우 심의를 득한 후 사용 가능하다.

∙ 재료 자체색을 원칙으로 하며, 도장, 시트 등 시간이 지남에 따라 변색, 변형이 일어나 노후화되기 쉬운 재료를 지양한다.

단독주택

∙ 산지·하천 등 자연경관과 친근하며, 인접한 기존 주택과 연계성 있는 저채도 난색계열로 차분하고 포근한 단독주택 이미지를 연출한다.

구 분	주조색	보조색	지붕색
색상	YR~Y	YR~Y	YR~Y
명도	5이상~8이하	5이상~7이하	4~6이하
채도	3이하	4이하	1.5이하

∙ 단독주택 색채에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제34조 단독주택 색채계획을 따른다

공동주택

∙ 차분하며 자연과 친근한 색채이미지를 연출한다.

∙ 기단부 마감재와 중층부 입면 색채의 명도 차를 3이하로 권장, 부드러운 배색을 연출한다.

∙ 중·고층부는 고명도, 저층부는 중·저명도를 적용하여 안정감 있게 연출한다

구 분	주조색	보조색	강조색	지붕색
색상	YR~Y/N	YR~Y	YR~Y/N	YR~Y
명도	6~8.5이하	4~8이하	3~6이하	4~6이하
채도	2이하	3이하	6이하	1.5이하

∙ 공동주택 색채에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제35조 공동주택 색채계획을 따른다

상업ㆍ업무시설

∙ 맑고 개성 있는 색채로 주변경관과 친근하며 활동적인 색채이미지를 연출한다.

∙ 하천주변에 형성된 상업·업무 시설로 친근한 색채 경관을 연출한다.

구 분	주조색	보조색	강조색	지붕색
색상	YR~Y/N	YR~Y/N	YR~GY	YR~Y
명도	5~8.5이하	4~9이하	2~6이하	4~6이하
채도	2이하	4이하	7.5이하	1.5이하

∙ 상업․업무시설 색채에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제37조 상업․업무 색채계획을 따른다

근린생활시설

∙ 산지·하천 등 자연경관과 친근하며, 인접한 단독주택과 연계성 있도록 중명도의 주조색 및 유사한 재료를 사용하여 연속성 있는 근린생활시설 경관을 연출한다.

구 분	주조색	보조색	강조색	지붕색
색상	YR~Y	YR~Y/N	YR~Y	YR~Y
명도	5~8이하	5~8.5이하	3~6이하	4~6이하
채도	3이하	4이하	6이하	1.5이하

∙ 근린생활시설 색채에 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제36조 근린생활시설 색채계획을 따른다

③ 옥외광고물

구분		계획내용
설치 기준	총 수량	∙ 1업소 1 간판 ∙ 자세한 사항은 용지별 설치 가능 광고물 확인
	총 수량 제외	∙ 소형돌출간판 : 1면의 면적 0.36 ㎡이하, 두께 0.2m 이하 1개 ∙ 연립간판 : 면적이 0.36㎡ 이하 ∙ 건물명 간판 ∙ 공동주택의 명칭 및 동 표시 ∙ 창문 이용 광고물 : 표시면적 1㎡ 이내
	설치불가	∙ 옥상간판, 벽면이용 간판 중 세로형 간판
재질 및 색채	공통	∙ 양질의 자재로 마감, 구조적 ㆍ 시각적으로 안정감을 확보 ∙ 광택 금속재질 및 파나플렉스, 합판, 비닐, 스레트, 5mm 미만의 아크릴, 함석 등 저급재료 사용 금지 ∙ 형광도료 또는 야광도료 (도료를 바른 테이프를 포함) 사용 금지
	바탕색 (판, 게시틀, 구조)	∙ 바탕색은 적색류 또는 흑색류 ½ 이내로 사용 (1면의 면적이 3㎡ 이하, 심의 거친 광고물 제외) ∙ 광고물 바탕색은 건축물 외장색채와 조화를 이루는 재질 및 계통 색 (명도차 2이하) 을 사용하여 이질감을 최소화 ∙ 동일 건물 내 광고물 배경색은 유사한 색상으로 표시하여 일체감 있는 경관 형성 ∙ 불필요한 구조가 노출된 경우 건축물 입면 색상과 유사 색상으로 도색하여 시각적 영향 최소화
	글자색	∙ 업소의 특성, 브랜드 이미지를 위해 필요한 경우 CI, BI, 그래픽, 픽토그램, 서체 등 강조가 필요한 부분에 한하여 제한적으로 포인트 색채를 적용 ∙ 광고판, 게시틀, 건축물 등 배경 색채와 보색대비 금지 ∙ 글자의 강조색은 색상에 구애받지 않으나 다양한 색상을 금하며 가급적 한 가지 색을 권장
형태 및 구조		∙ 가급적 판류형은 지양하고 입체형으로 설치 권장 ∙ 벽면이 모두 유리 재질로 된 건물에는 입체형으로 설치 단, 안전성을 고려하여 건축 설계 또는 심의 시 간판 설치 구조를 반영 ∙ 건축물의 같은 층의 경우 같은 유형의 간판 설치 ∙ 게시틀의 경우 시각적으로 돌출되지 않는 간결한 형태 및 규모로 설치 ∙ 신규 설치되는 건축물의 경우 간판 설치 위치를 고려하여 설계하며 게시틀 설치를 권장
표기내용		∙ 서체 및 심볼은 업종, 상호, 브랜드의 특성을 드러내는 픽토그램, 심벌, 주목성 또는 조형적인 서체를 개발하여 활용 ∙ 표기 내용은 주 표기내용과 보조 표기내용으로 구분하되, 주 표기내용은 (상호명, 브랜드명, 상징물, CI, BI) 2개 이내, 보조 표기내용은(지점명, 전화번호, 영업내용 등) 1개 이내로 표기 ∙ 메뉴, 가격, 실물사진, 과도한 그래픽은 표기를 금지하며, 여백을 확보하여 시인성을 강화
조명		∙ 조명색은 2색 이내로 권장하며, 조명기구는 최대한 노출되지 않는 구조사용 ∙ 판류형 전체 내부조명을 금하며 문자나 도형 등 제한된 요소에 사용 ∙ 네온 또는 점멸방식으로 사용하거나 광원을 노출시켜 사용하는 것을 금지 ∙ 휘도(광원의 밝기)는 눈부심을 최소화하고 고효율 조명등을 사용
요소별 지침		∙ 옥외광고물 계획 대한 사항은 지구단위계획 시행지침 제Ⅳ편 경관 및 공공부문 시행지침 제43조 요소별 지침을 따른다

7) 공공부문에 관한 사항

구분	계획내용
도로시설에 관한 사항	∙ 포장원칙 - 포장 재료는 보행 및 차량의 하중을 감안하여 내구성 있는 재료가 선정되어야 하며, 미끄럼과 눈부심이 방지될 수 있는 재료이어야 한다. - 보도부분의 포장패턴은 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되, 가로수 식재 및 시설물의 배치 등과 연계하여 일체적 가로 분위기를 조성할 수 있어야 한다. ∙ 차도포장 - 차도부분은 아스팔트 또는 콘크리트 포장을 원칙으로 한다. - 보차혼용도로 등 보행자의 안전이 요구되는 지점에는 거친 재질을 이용하여 서행운전을 유도하고 보행특성에 따라 포장재료의 질감을 다르게 한다. - 차량소음이 큰 구간의 차도 소름을 최소하하기 위해 일정구간을 차도 자체 흡음 능력을 지닌 저소음 다공성 포장재(다공성 아스팔트 포장)로 포장하여 소음 저감대책을 수립한다. ∙ 보도포장 - 상기 주요 지점의 포장패턴은 부여의 상징문화 및 로고를 포함하여 부여 친수지구의 이미지를 부각시킬 수 있는 독특한 디자인을 개발하여 사용하도록 한다. - 보도의 포장은 투수성 포장재를 사용한다. - 횡단보도 주변에는 시각장애자용 점자블록과 턱없는 경계석을 설치한다. - 도시의 진입부, 상업지역, 결절부 등의 일정구간은 재질, 색상, 패텬 등에 변화를 주도록 한다.
자전거도로에 관한 사항	∙ 기본원칙 - 자전거 도로의 순환체계가 이루어져야 하며, 대중교통시설과의 환승체계가 구축되어 효율적 이용이 이루어질 수 있도록 한다. - 차량동선과 분리되어야 하며, 지형여건에 따라 보행자 도로와 겸용하여 설치할 수 있으며, 적절한 부대시설을 도입함으로서 자전거 이용의 안전성과 쾌적성이 확보되어야 한다. - 자전거 보관대는 교통영향분석·개선대책에서 제시된 위치, 규모, 배치형태를 준수하여 설치하여야 하며, 자전거 도로변에 이용자의 편의 및 안전을 도모하여 배치하여야 한다. ∙ 일반구간에 관한 사항 - 자전거용 포장은 빗물의 배수가 원활한 투수성 포장재의 사용을 원칙으로 한다. - 투수성 포장재를 사용하지 않는 구간의 자전거도로 포장은 표면배수를 위한 구배를 유지하는 한편, 미끄럼이 방지되도록 하며 자전거도로 주요 진입부에는 이용의 편의를 위해 단차를 배제한다. - 노선의 이용 특성상 야간에 빈번한 이용이 예상되는 구간에 대해서는 안전성과 범죄예방을 위하여 조명시설을 배치하여야 한다. ∙ 교차 접속구간에 관한사항 - 자전거 도로와 차도의 교차부에서는 횡단보도 측면에 자전거 횡단구간을 표시하여야 한다. - 자전거 도로와 차도의 경계부에는 턱이 없는 경계석을 설치하여야 한다.
보행자전용도로에 관한 사항	∙ 기본원칙 - 보행자 뿐만 아니라 자전거 및 휠체어 이용에 불편이 없도록 계단 및 단차가 없도록 하며, 부득이하게 계단을 설치한 경우 경사로를 동시에 설치하여야 한다. - 보행자전용도로의 공간구성, 식재, 시설물 배치는 입지여건 및 이용특성에 따라 기능, 형태, 식재기법 등에 있어 유형별로 특화한다. - 보행자 전용도로와 인접한 시설 중 공원 및 어린이놀이터 등과 같은 오픈스페이스와 같은 다중이용시설과의 연계성 향상을 위한 통로를 적극적으로 확보하도록 한다.

구분	계획내용
보행자전용도로에 관한 사항	∙ 보행자전용도로의 포장 - 포장은 투수성 포장을 기본으로 하되, 공간적 특화가 요구되는 입구부분, 휴게공간, 공공 시설용지 연계부분, 특화가로 등에서는 독자적 포장 재질 및 패턴을 고려하여 설치한다. - 상가시설용지 내 보행자전용도로의 포장재는 전체적으로 일관적 재료, 색책 등을 사용하여 가로경관의 통일성을 부여하도록 한다. - 일반도로 및 단지내 도로와의 교차 접속부의 험프(hump)구간 포장은 일반 아스콘 포장이 아닌 차도용 소형 고압블록 또는 판석 등의 거친 질감의 포장재를 도입한다. ∙ 보행자전용도로의 시설물 - 각 시설 용지별 보행자전용도로는 보행인의 휴게, 편의를 위해 쉘터, 벤치, 보행등 휴지통, 공중전화 등을 설치한다. - 자전거이용의 활성화를 위해 자전거보관대를 설치한다. - 조명등을 충분히 배치하여 야간 이용시 안전성을 부여하고 범죄 발생을 억제할 수 있도록 하여야 한다.
가로시설물에 관한 사항	∙ 옥외시설물에 관한 사항 - 안내체계 1. 정보제공의 효율성과 시설물 배치의 질서성을 높이고 대거점, 중거점, 소거점 등 해당 지점의 배치장소 위계를 분류 각 위계별 안내체계 배치계획을 실시하여 편리한 목적지 도달을 위한 정보제공 네트워크가 이루어지도록 한다. - 가로시설물 1. 가로의 기능 및 이용자 형태분석을 통해 가로공간의 유형을 분류, 각 가로공간 성격에 맞게 가로시설물의 종류와 시설밀도를 조절하여 실제 적용시 가능한 한 안내체계와 통합적으로 설계되도록 하고 복합적인 배치계획이 이루어지도록 한다. - 옥외시설물의 디자인 지침은 춘천시 관련 지침 및 계획을 따르도록 한다. - 다양한 연령과 이용형태에 부응하는 장벽 없는 유니버설디자인의 개변을 도입하여 누구나 접근 및 이용이 가능한 시설물 디자인을 적용하여야 한다. ∙ 가로의 조명 - 가로의 성격에 맞는 야경 연출법을 구상하여 정체성과 도시미관을 고려하여야 한다. - 가로와 연접한 공간의 성격과 어울릴 수 있는 가로조명을 한다. - 가로변에는 일정 간격으로 설치하며, 교차로, 횡단보도 등 도로구조가 변화하는 곳과 교통안전시설이 설치되는 지점 및 사고다발 예상지점에는 밝은 조명을 설치하여야 한다. - 보도의 보행자용 가로등은 상호 교호형식으로 배치하고 조명이 발산하는 색감은 가로특성에 알맞게 유도 조정한다. - 가로의 조명은 차량의 안전한 교통소통과 아울러 보행자가 안전하게 보행할 수 있도록 범죄 및 재해방지를 최우선으로 한다. - 가로등의 조도는 최소 기준 이상 확보하고 도로의 기능 및 폭원 등을 고려하여 차등적으로 계획한다. - 구역 내 이면도로의 가로등은 중간높이의 자연색조 등을 사용하여 가로변 가로등만 설치하되, 조면보강 부분을 보행등으로 보완한다.

구분	계획내용
공원에 관한 사항	∙ 소공원 조성 원칙 - 소공원의 분포와 입지여건을 고려하여 공원성격과 주제를 설정하고 이에 걸 맞는 시설을 차별화시켜 도입하여 공원 선택의 기회를 확충하도록 하여야 한다. - 보행자의 주 도착지점을 기준으로 입구를 설정하되, 접근의 편리성 제공과 이용의 원활화를 위하여 2개 방향 이상의 진입구를 확보한다. - 공원과 녹지 등 오픈스페이스가 연접한 경우에는 울타리를 설치하지 않도록 한다. ∙ 공원 내 도입시설 - 인접 주거단지 및 공공시설부터의 이용이 증진될 수 있도록 집회광장, 소규모 운동시설, 휴게시설 등을 적극 확보하고, 야간 이용의 활성화를 위하여 보행등을 설치하도록 한다. - 진·출입구 중 입지여건이나 이용 빈도가 타 입구보다 중요시되는 곳에 진입광장을 조성하고, 공원내 보행동선이 교차하는 곳 중 가장 위계가 높은 장소에는 중심광장을 확보하여야 한다. - 식재 부분에는 자생 향토수목을 식재하여 장소성과 향토성을 고양토록 하는 한편, 장기적으로는 단풍이나 열매가 좋은 수종으로 갱신이 이루어지도록 유도한다.
녹지에 관한 사항	∙ 녹지 조성원칙 - 녹지의 식재는 가로수, 공원 등 인접시설과 연계하여 계획되어야 하며, 녹지의 폭과 녹지내 인접하게 될 시설 등을 감안하여 구성되어야 한다. - 녹지 중 특히 완충녹지의 수종은 분진, 매연, 소음 등 환경오염에 잘 견딜 수 있는 것으로 선정하여야 한다. - 녹지의 식재는 보도 측으로부터 관목 밀식, 중․소규모 교목 군락 식재, 대교목 랜덤식재 및 상록교목 군락에 의한 배경식재 등의 단계적 식재기법을 고려한다. - 주거지와 간선도로 사이의 완충녹지는 소음, 공해 및 시선의 차단을 도모하도록 한다. - 주요 교차지점에는 둔덕의 조성을 지양하여 차량 및 보행자의 시각적 개방감을 확보하여야한다.

라. 특별계획구역에 관한 도시관리계획 결정조서 (신설)

1) 특별계획구역 지정

구분	구역 번호	위 치	면 적(㎡)	지 정 목 적
신설	특계	동면 지내리 산5-1일원	∙ 94,008㎡ (F6 : 41,920, F7 : 52,088)	∙ 첨단산업의 이미지를 형성하여 랜드마크로 조성될 수 있도록 현상공모를 통해 우수한 설계안 반영

도면번호	위 치	구 분	계획내용
특계	F6, 7	특별계획구역의 개발계획내용	∙ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제52조 및 시행령 제45조에서 규정한 지구단위계획의 내용 ∙ 세부계획 및 기타내용 가. 사업계획의 개요 - 사업기간, 사업규모, 수용용도 등 나. 건축계획의 구상 중 추가사항 - 건축물의 외부 디자인(건축물 시뮬레이션 도면 포함) - 건축물의 접지부 처리구상(구조 및 용도) - 옥외공간계획(옥상이 있는 경우 옥상조경계획 포함) - 지구단위계획에서 정한 유관지침 이행사항 다. 경관계획 중 추가사항 - 주요 조망점에서의 시뮬레이션 도면(원경․근경 포함) 라. 기타 승인권자(또는 허가권자)가 요구하는 자료

2) 특별계획구역 내 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등에 관한 계획

도면번호	위치	구분		계획내용
특계	F6, 7	용도	허용 용도	주용도	∙ ｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 24. 방송통신시설(데이터센터 및 이와 비슷한 시설) 및 부속용도
				부용도	｢건축법 시행령｣ 별표 1에 의한 다음의 용도 - 10. 교육연구시설 중 연구소 - 14. 업무시설 - 각 용도의 부대시설
			불허 용도	∙ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		∙ 70%
		용적률		∙ 150%
		높이(층수)		∙ 5층 이하

< 특별계획구역 위치도 >