강원특별자치도고시 제2024-322호

도계 미인폭포 탐방로 조성사업

지역개발사업구역(변경) 및 실시계획 승인(변경) 고시

지역개발사업으로 추진하는‘도계 미인폭포 탐방로 조성사업’에 대하여 ｢지역 개발 및 지원에 관한 법률｣ 제12조, 제23조에 따른 지역개발사업구역 지정(변경) 및 실시계획을 승인(변경) 사항을 아래와 같이 고시합니다.

2024년 7월  26일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 지역개발사업구역의 명칭․위치 및 면적

◦  명    칭 : 도계 미인폭포 탐방로 조성사업

◦  위    치 : 강원특별자치도 삼척시 도계읍 심포리 산115-2번지 일원

◦  면    적 : 지역개발사업구역 7,500㎡

2. 지역개발사업구역의 지정 목적 및 지역개발사업의 시행기간(변경)

◦  목    적 : 본 사업은 미인폭포와 하이원추추파크를 연계할 수 있는 탐방로를 조성하는 사업으로 천혜의 자연자원인 심포협곡과 미인폭포 탐방을 원활히 하기 위해 접근성 향상 및 하이원추추파크 활성화를 통해 지역경제 활성화를 하고자 함.

◦  시행기간 : (당초) 2018년 ~ 2024년
(변경) 2018년 ~ 2025년

3. 지역개발 사업시행자 및 시행방식(변경없음) : 게재생략

4. 환경보전계획 및 오염방지 계획(변경없음) : 게재생략

5. 인구수용·교통처리 및 토지이용계획(변경없음) : 게재생략

6. 지역개발사업구역의 분할 또는 결합에 관한 계획 : 해당없음

7. 기반시설의 설치계획 : 해당없음

8. 재원조달계획 및 연도별 투자계획(변경)

(단위 : 백만원)

구 분		사업비	비율(%)	연도별 투자계획
				~2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	기정	21,539	100.0	1,438	22	111	1,474	10,539	7,955	-
	변경	21,539	100.0	1,438	22	111	1,474	10,539	6,955	1,000
국 비	기정	2,000	9.3	-	-	-	820	1,026	154	-
	변경	2,000	9.3	-	-	-	820	1,026	154	-
지방비	기정	19,539	90.7	1,438	22	111	654	9,513	7,801	-
	변경	19,539	90.7	1,438	22	111	654	9,513	6,801	1,000

9. 보건의료·교육 및 복지시설 설치계획 : 해당없음

10. 보상계획 및 조성토지 공급에 관한 사항(변경없음) : 게재생략

11. 토지수용 및 사용계획 조서(변경없음) : 게재생략

12. 구역 밖 기반시설 설치에 필요한 비용의 부담계획 : 해당없음

13. 사업성에 관한사항(변경없음) : 게재생략

14. 그 밖에 지역개발사업구역 지정에 필요한 사항 : 해당없음

15. 사업시행지의 위치도(변경없음) : 게재생략

16. 계획평면도 및 개략설계도서(변경없음) : 게재생략

17. 인‧허가 등의 의제 처리사항 및 당해 법령에서 정하는 고시내용 : 해당없음

18. 지형도면 고시도(변경없음) : 게재생략

19. 승인조건 및 관계도서(사업시행지의 위치도, 계획평면도, 개략설계도서 등)는 강원특별자치도 지역소멸대응정책관(☎ 033-249-3879) 및 삼척시 폐광지역사업단(☎ 033-570-4062)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보임

부              칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.