강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업

건축설계용역 (과업지시서)

2024.  10.

목  차

제1장. 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 과업의 범위	2

5. 과업의 내용	2

6. 과업의 기본 수칙	7

제2장. 일반지침

1. 공통사항	10

2. 조사 및 자료수직	10

3. 설계단계	11

4. 시방서 작성 기준	11

5. 관급자재 선정	12

6. 별도 추가 업무	12

제3장. 분야별 설계지침

1. 건축계획 부분	12

2. 기계설비 부분	14

3. 전기·통신설비 부분	14

4. 소방설비 부분	15

제4장. 성과품의 작성 및 납품

1. 일반사항	15

2. 성과품의 작성	16

3. 성과품의 납품	20

제5장. 붙임자료

제1장 총칙

과업의 명칭

「강원도립대학교 종합정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역」

과업의 목적

가. 본 사업은 공공건축물 그린리모델링 시그니처 사업으로 그린리모델링을 통해 노후 공공건축물의 에너지 성능 향상, 실내 공기질 개선 등을 통해 건물 사용자의 열환경 및 공기환경에 대한 만족도를 높이고,  실효적인 에너지 소비량 절감을 통해 탄소중립을 위한 건물부문의 온실가스 감축을 목표로 하고 있다.

나. 「강원도립대학교 중앙정보관」은 개관후 25년이 경과되어 건물의 노후화 뿐아니라 강원도립대학교     학생 및 강릉 시민의 도서관 이용패턴 변화에 발맞추어 도서관 운영 및 공간의 효율성을 증대시키고      공공도서관의 새로운 사회적 기능과 역할, 수요자의 요구에 부합하는 도서관으로 조성하기 위함으로     개방형 자료실, 생활문화공간 조성의 리모델링 설계를 목적으로 한다.

다. 본 사업은 그린리모델링을 통하여 건물에너지 성능향상과 대학도서관 본연의 역할과 사회적기능     향상과 함께 외부 입면변경, 실내인테리어 계획으로 인해 쾌적한 공간 활용을 통한 도서관 운영 및     효율성이 극대화 될 것으로 기대된다.

과업의 개요

구 분		내 용
대지위치		강원특별자치도 강릉시 주문진읍 연주로 270
지역지구		도시지역, 자연녹지지역, 제1종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 특정용도제한지구, 공공청사, 학교
시행 및 주관기관		강원도립대학교
사업 범위	주요용도	교육연구시설 - 도서관
	대지면적	151,689㎡
	건축규모	기준 연면적 2,587.54㎡(±3% 내외)
	건폐율 / 용적률	법정 20% / 100%
규모		지하1층, 지상 3층 / 연면적 2,587.54㎡ 설계대상 : 지상1-3층 / 해당면적 : 1759.54㎡
추정 공사비		약 4,020,000천원
예정 사업기간		2023년 8월 ~ 2025년 12월(29개월간)
예정 설계비		297,334천원 (VAT포함)
과업기간		착수일로부터 120일(공휴일 포함)

※ 사업규모(공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 총공사비 초과 불가, 총공사비 내 설계

※ 발주청과 협의하여 건축규모 조정 가능

※ 제시된 공사비는 건축, 구조, 인테리어, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리비, 토목, 조경 등에 대한 총공사비임. (부가세 포함. 단, 추후 발주처 사정에 따라 공사비가 변경될 수 있음)

과업의 범위

본 과업은 『강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 건축설계용역 (제안공모)』에 적용함.

본 과업은 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 구성되며, 강원도립대학교(이하 “발주기관”이라 한다)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 현황확인, 설계부터 준공 시까지의 건축협의 및 각종 심의·인증 (해당시) 행정절차 이행에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료의 작성 등 계약문서에 의해 요구되는 일체의 사항을 포함

공공건축물 그린리모델링 사업 가이드라인에 따른 필수공사, 병행가능공사, 예산 범위 내에서 사용자 및 발주처와 협의한 기타공사를 수행하는데 적합한 각종 자재, 수량, 용량이 구체화된 설계도서의 작성을 포함

공공의 복합문화공간임을 나타낼 수 있는 입면 계획과 함께 조명 및 가구를 포함한 인테리어, 내·외부 사인계획을 포함

과업의 내용

과업내용

건축물 사전 조사, 주변 현황 분석, 문제점 파악

공공건축물 그린리모델링사업 가이드라인을 준용, 강원도립대학교 종합정보관 그린리모델링을 위한 중간 및 실시설계도서를 작성하며, 분야별 필요 공종은 발주부서와 협의

공공건설공사의 공사 기간 산정기준에 따른 공사 기간 산정 및 공정표 작성

설계안전성 제고를 위한 지자체별 감독원 및 그린리모델링 지역거점 플랫폼 기술자문위원의  설계도서 검토 및 사업관리 협조, 설계안에 대한 공사전후의 에너지성능평가 검토 필수

공사시방서 및 특기시방서, 공사비 산출내역서 및 물량산출서 작성, (공사비 산출내역서 및 물량산출서에는 기존자재 철거 및 폐기물 처리에 대한 명확한 산출 내용을 포함해야 함.)

준공시까지 건축 인허가 처리(인허가를 득하기 위한 제반협의, 승인, 심의 등 포함, 인허가 필증을 득하여 발주처에 원본 제출 등) - 해당시

공공건축물 그린리모델링사업 가이드라인을 준용하여 해당 건축물의 에너지 성능개선을 고려하고 건축물의 에너지요구량을 최소화하여야 하며, 환경 친화적인 건축물이 될 수 있도록 설계

향후 그린리모델링 성과 백서 제작을 위한 자료제출(필요시)

개방형 복합문화공간을 위한 실내 인테리어계획

최종 성과물 관련 보고서 작성 및 제출

설계 성과품에 대한 사후관리(설계오류정정, 세부상세도 추가 등)

기타 발주처가 필요하다고 인정하는 사항(공모지침서 내용 포함)

세부 과업 내용

필수공사 (선택적 적용)

고성능창호(창, 문 성능은 공인된 시험성적서 제출 또는 설계기준 준수, 기밀성 1등급 창호 적용)

내외벽 단열재(준불연재료 적용, 외단열 시공 권장, 친환경자재 활용)

폐열회수형 환기장치(고효율인증제품, 실내공기질 유지기준 강회에 따른 실내 공기질 확보 계획 포함)

고효율 냉난방장치(콘덴싱 보일러, 고효율에너지기자재 인증제품 적용, 1등급 냉난방장치 적용)

고효율 조명(LED 적용, 효율적 배치, 고효율에너지기자재 인증제품 적용)

신재생에너지(KS 인증제품 우선 적용, 시험성적서 제출, 설치에 따른 구조안전확인서 제출)

BEMS 또는 전자식원격검침기 적용

차열도료 도장(쿨루프)

병행가능공사(선택적 적용)

일사조절장치

대기전력차단콘센트(전체 스위치의 30% 이상 설치)

전기순간온수기(급탕용전기온수기)

스마트에어샤워(대기환경기준 이하의 환경일 때)

기타 에너지성능 향상 및 실내공기질 개선을 위한 공사

출입문 등 진출입구 공사시 유니버설디자인(BF) 기준 적용 공사

기타공사

필수공사 및 병행가능공사 시 수반되는 공사

입면 변경 공사

실내 인테리어(조명, 고정형 가구 포함) 공사

내.외부 사인물 공사

우선순위

설계자는 효율적인 그린리모델링을 위하여 예정공사비 내에서 합리적으로  공사내용을   조정하여 에너지절감 효과를 최대화하는 설계안을 제시

도서관 건축물의 에너지 성능개선, 외피 디자인 개선, 실내환경 개선등을 위한 그린리모델링 필수공사 중, 외단열 보강, 창호성능 개선, 고효율 냉난방 장치, 신재생에너지 설치를 우선적으로 검토

구분	주요내용	검토사항
공통	사전조사 및 현장확인 후 계획안 결정	단열재 종류 및 보강방법, 창호 종류 및 각종 설비의 개선방향과 범위 결정 및 협의(액티브 및 패시브 기법의 종합적인 검토)
중간 설계	1. 단열	단열재는 불연, 준불연 단열재 우선 적용 준불연 성적서를 보유하고 있다 하더라도 이는 재료의 표면에 대한 성능을 기반으로 하므로 가급적 글라스울 등과 같이 자재 자체가 불에 타지 않는 불연단열재를 우선 적용
	2. 창호	에너지절약설계기준 이상의 열관류율 적용 (2) 창호 주변 단열재 설치 방식은 패시브하우스에 준하는 상세를 반영하여, 기밀테이프 시공 총일사획득율, 가시광선 투과율에 대한 제안 및 기술자문단의 검토 필요 외벽 중심선 변경 시 인허가 사항 확인 필요 선형열교 발생 방지를 위한 상세계획 제시 필요
	3. 폐열회수 환기장치	소음을 고려한 위치 검토 설치 가능한 환기장치의 검토 전열교환 효율의 검토
	4. 냉난방장치	고효율 냉난방장치, 고효율 보일러 설치 실외기는 지속적인 소음과 진동이 발생하므로 적절한 위치 검토
	5. 태양광 발전설비	태양광패널 옥상 설치 시 지속적인 풍압 등에 의한 변형 발생으로 건축구조물 및 방수층에 손상을 주는 등 구조검토와 관리상의 문제가 발생에 대한 방안 검토 전문가의 자문을 받아 태양광발전설비 계획
	6. 외부 입면	창호 및 출입구 변경을 포함한 입면 변경공사 외단열 적용
	7. 조명(LED) 공사 및 기타 병행가능 공사 (병행가능공사는 예산 검토 후 선택 적용)	조명(LED) 공사 조경공사 일사조절장치 대기전력차단콘센트(전체 스위치의 30% 이상 설치) 전기순간온수기(급탕용전기온수기) 스마트에어샤워(대기환경 기준 이하의 환경일 때) 기타 에너지성능 향상 및 실내공기질 개선을 위한 공사 출입문 등 진출입구 공사 시 유니버설디자인(BF) 기준 적용 공사 환경성선언 제품(EPD) 마감재(벽지, 천장재, 바닥재)
	8. 실내개선공사	고정형 가구공사 실내.외 사인물 공사 내부인테리어 공사(화장실 포함)
실시 설계	중간설계 최종 결정사항에 대한 실시설계 설계도면, 시방서, 내역서, 수량산출서, 예정공정표 등 작성

과업의 목표

그린리모델링 전의 1차 에너지소요량 대비 50% 이상의 성능개선(절감률)을 목표로 하며, 에너지 성능평가(ECO2 등)를 진행하여 위 목표치를 만족하는 평가결과를 제시해야 함.

더불어 건축물에너지효율등급 1++등급 수준 이상으로 설계

제로에너지건축물 5등급 수준 이상으로 설계

과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인이 상호 조정할 수 있으며, 과업수행 상 필요하다고 인정되는 경우에는, 수급인은 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행하여야 함.

과업기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 120일간(공휴일 포함)으로 함. 단, 발주기관의 요구로 추가용역 발생이나 기타 설계자의 귀책사유가 아닌 건축협의, 공공디자인심의, 계약심사 등 관련 인허가, 협의, 각종 인증(해당시) 등과 관련하여 설계 기간의 중지 및 연장이 필요할 시에는 연장할 수 있음

착수계 제출 : 계약 후 7일 이내(감독원에게 제출)

설계용역 완료 후에도 설계용역과 관련한 각종 행정절차 관련 자료 제출 및 공사상 필요한   도면 수정이나 설계변경 등의 자료제출에 응하여야 하며, 설계 미비 및 하자에 대하여는 그   내용이 완료될 때까지 수행함

과업의 기본 수칙

착수 시 제출서류

수급인은 2부(원본 및 사본 각 1부)를 제출하여야 함.

착수계

각 공종별 사업 책임기술자 선임계(재직증명서, 경력증명서, 기술자면허수첩 사본 첨부)

분야별 참여기술자 투입 계획

과업수행계획서

설계용역 수행 조직표(연락처 기재)

설계용역 예정 공정표

각 분야별 용역비 산출내역서

참여기술자 보안각서

하도급 예정 현황 및 분담이행 계획

※ 설계용역 계약 전 공동도급(분담이행) 계획을 발주기관과 협의해야 함.

기타 발주자가 필요하다고 인정하는 서류

과업수행계획서

수급인은 착수일로부터 7일 이내의 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성하여 제출하여야 하며, 발주처는 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 용역 수급자에게 수정을 요구할 수 있음.

각 관련 주체(건축, 전기, 통신, 소방 등) 간의 업무범위와 책임의 한계

『붙임1. 그린리모델링 에너지성능 개선 및 실내공기질 개선 계획서』를 작성하여 제출

책임기술자명단 및 참여기술자 조직표

목표예산을 고려한 설계 운용계획

발주처가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 시공 시 설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기 단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출해야 함.

본 과업 내용 중 설계지침 상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비용을 면밀하게 검토·제출

상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주처의 승인을 득해야 함.

업무협의

조사 및 자료수집 완료 또는 주요 시스템(공법) 결정 시

수시보고 시

중간 및 실시설계 완료 시

성과품 작성 시

각종 심의 및 보고회 시

공정보고 시(필요 시)

완료 시

공정보고(용역수행 대표자명의)

월간보고 : 매월 마지막 주 1회 작성(월요일 18:00까지 제출)

수시보고 : 발주기관 요청 시 수급인은 설계 진행사항 보고

용역보고회 : 발주기관 업무추진 계획에 따라 용역보고회 개최를 요청할 시에는 용역 책임자는 PPT등 관련 자료를 갖고 보고에 성실히 응하여야 함.

일반사항

국토안전관리원 및 그린리모델링 지역거점 플랫폼에서 운용하는 실무회의‧자문회의의 계획의도 반영과 조정 의견준수 및 설계대안 제출을 통해 설계를 진행

“공공건축물 그린리모델링사업 가이드라인”을 준용하여 해당 건축물의 에너지성능개선을 고려하고 건축물의 에너지요구량을 최소화하여야 하며, 환경친화적인 건축물이 될 수 있도록 설계하여야 함.

수급인은 설계진행과 관련 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 함. 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있음.
※ 수급인은「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 건축물에너지평가사 또는 그린리모델링 사업자 자격 보유자, 제로에너지건축 인증 취득 경험자와 컨소시움 구성을 통해 설계업무 수행을 권장함.

본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주자와 협의하여 결정하여야 함.

발주자는 수급인에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계 도서를 제출, 요구하여 수정·보완할 수 있으며, 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없음.

본 과업수행 중 참여 수급인이 품위를 손상시키는 행위를 하였거나 과업수행에 부적당하다고 인정한 때는 즉시 교체를 요청할 수 있음.

본 과업수행 중 과업지시서 내용을 특별한 사유 없이 이행하지 않거나 기타 계약조건을 위배하였을 때에는 계약을 해지할 수 있음.

설계자문 등

수급인은 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대한 설계자문위원회 등 자문에 필요한 자료 준비 및 협조하여야 함.

설계자문위원회의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영

본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요한 경우 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 수급인이 준비하여야 함.

수급인은 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 등 발주기관의 요구가 있을 시 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 함.

하도급의 범위

수급인은 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없음.

하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

각종 조사, 현황확인 등 이와 유사한 작업

기계설비,전기,통신,인테리어 등의 설계업무

기 수행된 구조안전성 검토 및 내진설계 결과에 따른 구조계산 및 검토업무

공사의 수량내역서 작성 및 견적 업무

기타, 발주기관이 특별히 인정하는 업무

수급인은 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 함. 이때 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 짐.

설계에 사용하는 재료

본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 함.

1)이외의 자재 사용 시에는 선정 사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가 등은 발주기관과 협의 후 채택

정부기관에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율인증제품 중 본 과업에 맞는 것을 검토 및 적용하여야 함.

인체에 접촉되는 마감재료는 가능한 친환경인증 제품을 사용

인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 함.

건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 함.

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라 적용 여부를 검토하고 적용 시에는  사용되는 재료를 구분하여 추후 관계 법령에 따라 중소기업청과 협의대상 목록을 작성하여야 함.

타 수급인과의 업무한계

다수의 수급인이 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 수급인 간의 업무한계를 명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출함.

언어

과업수행 상 사용되는 언어는 한글과 아라비아숫자로 한다. 부득이 외산 자재 등 한글 표기가 불합리한 경우 원어를 함께 사용할 수 있음.

특기 사항

본 과업에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 관련 법규, 최근 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 한다. 단, 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선함.

과업수행 중 정책변경, 기술심의, 설계VE 등 불가피한 사유 발생 시 발주자는 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업지시서의 문구 해석상 계약상대자 간 차이가 있을 경우 발주자의 해석을 우선적으로 하고 기타, 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주자가 정하는 바에 따름

본 용역의 준공 이후 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주자에게 귀속됨.

본 용역 기간 중에 시행하는 각종 평가, 심의, 허가, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독원의 의견 및 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 수급인이 부담함.

설계도서의 하자로 인하여 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행상 지장을 초래하여 재설계 또는 손해배상 등이 필요한 경우 계약상대자 부담으로 함.

설계도서가 발주기관의 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용의 과오, 미비, 기술상   오류 등 결함에 대해 계약 상대자의 책임은 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 위와 같음.

수급인은 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나, 설계도서, 내역서, 수량산출서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 함.

계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결함. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁 기간 중이라 할지라도 수급인은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 됨.

설계의 단가산출 및 일위대가 작성은 최신판 국토교통부 제정 표준품셈 및 기획재정부 회계예규 “예정가격기준” 근거로 작성하여야 함.

변경 및 정산

본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 수급인에게 이 사실을 요구할 수 있고, 수급인은 발주기관의 방침에 따라야 하며 필요시, 과업 진행에 대한 업무 정산 및 업무 조정을 할 수 있다.

본 과업의 추진 중에 주변 여건의 변화 등을 고려하여 당해 공사범위의 변경이 필요하다고   발주기관에서 판단하는 경우, 수급인에게 이 사실을 요구할 수 있으며 수급인은 발주기관의   방침에 따라야 함.

발주자의 요구에 의하여 과업범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산할 수 있음. 다만, 과업범위의 현저한 변경이 없이 기본설계 또는 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가함.

설계의 책임 및 손해배상

계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생 되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계 법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

제2장 일반지침

공통사항

인·허가 및 승인: 수급인은 필요한 도서를 작성하여 허가부터 준공까지의 인·허가 행정절차를 완료하여야 함.

보안: 수급인은 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 이를 외부에 공개해선 아니 됨.

조사 및 자료수집

현장답사

수급인은 현장을 답사하여 현장조건을 충분히 조사 분석 및 검토하여야 함.

기존 건축물의 내부 및 설비, 주변 현황을 상세히 파악하여 공사범위, 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여 계획하여야 함.

기타 조사사항 : 본 건축물 리모델링에 따라 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을 조사 검토함.

설계 단계

설계기간은 120일이며 납품도면은 실시설계 도서내용을 제출

분야별 추정공사비 내역서를 필히 제출 (총공사비 판단 목적)

설계도면

설계도면은 중간설계를 바탕으로 시행

설계도서는 충분하고 상세한 도면 및 공사시방서, 구조계산서, 공사비내역서, 발주기관이 승인하는 공사공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함

건축사용역의 범위와 대가기준 관련하여 기본 및 실시설계의 도서내용 및 발주기관의 추가요구 도서를 작성하여 납품

분야별 세부 설계도면 작성은 기술지침을 참고하여 작성

공사시방서

- 공사시방서는「건설공사 표준시방서」를 활용하여 작성하되, 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여야 함.

공사비 산출

수급인은 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고, 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받아야 함. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 수급인은 비용절감을 검토하여야 하고, 예상범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 함.

수급인은 총공사비 산출서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 함.

공공 건설공사의 공사기간 산정기준 제5조(공사기간 산출) 규정에 의거 적정 공사기간을 산출하여 제출하여야 함.

관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술와의 협력)와 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 함.

4. 시방서 작성 기준

시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

건축, 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서, 토목공사 표준시방서, 전기설비공사 표준시방서, 기계설비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

특별시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

※ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

※ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것

5. 관급자재 선정

근거규정

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제86조

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조

조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준

수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 시 수요기관 검토담당자와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

6. 별도 추가업무

건축협의 신청서 작성 등 업무협의 결과 이행하여야 할 절차이행 및 관련 대리업무

투시도 및 색채디자인 기본계획 (내·외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

조감도

기타 발주기관에서 요청하는 사항

제3장 분야별 설계지침

건축계획 부분

단열계획-외단열 시공

기존 건물의 에너지 성능 향상에 가장 필수적인 요소기술

단열 수준은「지역별 건축물 부위의 열관류율 기준」이상으로 계획

단열방식은 가급적 외단열 공법을 적용하고, 단열재는 단열성능과 투습저항이 우수한 자재를  선정하여 설계

외벽단열 개선 계획 시 기존 적벽돌을 누수의 문제로 제거 후 방수와 단열 보강이 선행되어야 하며 이에 따른 입면디자인은 강원도립대학교와 중앙정보관의 정체성을 반영한 창의적이고   주변 경관과 어울리는 재료를 사용하여 계획(과도한 장식 및 형태적 조작 지양)

외단열 시공은 실내 벽체 표면결로 그에 따른 곰팡이 발생을 대부분 해결 가능, 외단열 재료는 불연재료로 화재확산방지구조로 설계

시공은 외벽 및 외벽과 슬라브, 지붕 접합 부위의 열교를 최소화하도록 설계하고, 특히 발코니·파라펫 부분의 열교처리에 주의

지면에 땋는 부위에 단열재를 설치할 경우, 투습저항성능이 우수한 압출법보온판 적용

창호 등의 기밀 및 결로방지

기존 벽체와 창호 연결부의 균열과 하자를 체크하여 기밀하고 열교발생이 되지 않도록 보완책을 마련

외부 창호 교체 시 고성능 고기밀 창호를 설치하고, 창호 및 문의 열관류율은 각 시험성적서를 기준으로 하며, 시험성적서가 없는 경우 건축물 에너지절약설계기준의 ‘창 및 문의 단열성능’ 표를 기준으로 함.

창호 주변은 기밀테이프를 설치하여 기밀성능을 향상시키고, 누수에 의한 피해가 발생하지 않도록 방수테이프 또는 팽창테이프 등에 대한 상세도를 도면에 반영

이음부를 통한 단열성능 저하를 방지하기 위한 단열재 이음부 시방을 제시

환기계획

사용자들의 이용 편의를 위해 수동개폐식 창문을 설치하되 건강하고 청정한 실내 공기질 유지를 위해 환기시스템의 보수, 교체 또는 신규 설치를 고려

폐열회수 또는 전열교환 환기장치 설치 시, 기기 성능(풍량, 전열교환효율, 소음, 팬동력 등) 및 설치 위치를 확인하고 미세먼지 유입을 충분히 막을 수 있는 필터 설치 및 필터 교환기 가능한지 검토

현장 상황에 따라 덕트형 전열교환 환기장치 설치가 어려운 경우에는 벽부형, 천장부착형, 창문형 등의 제품의 설치에 대해서도 검토

공간 및 인테리어 계획

실별로 구분된 각종 자료실을 융합하여 개방형 통합자료실 조성 및 도서관 서비스를 한 곳에서 지원하는 시스템으로 이용자는 관리자의 개입 없이 스스로 도서관을 자유롭게 이용하고, 운영자는 최소 인원으로 최대효과를 창출할 수 있는 통합관리 방안을 설계에 반영(필요시 개방형 복합문화공간에 부합하는 공간제시 가능)

불필요한 공간은 최대한 억제하고 이동 동선을 최소화하며, 상호 보완기능은 인접 배치하여 공간 활용을 극대화

이용자의 편의성을 고려하여 장애물이 없는 유니버셜 디자인으로 누구나 이용이 편리하도록 계획하고 도서관 내 서비스 동선과 이용자 동선을 고려하여 계획

화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선을 계획

색채 및 사인 계획은 유니버설 디자인을 고려하여 비상 시 직관적인 판단이 가능하도록 고려하고 건축 마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 문손잡이 등을 누구나 이용이 편리하도록 계획

마. 구조계획

각실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙 등 건축구조 관련규정에 적합하게 하여야 함.

구조물의 사용성 및 내구성에 대하여 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획을 설계에 반영

재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여 설계에 반영

기존 건축물의 구조안전진단 결과를 반영하고 구조보강을 고려하여 설계에 반영(구조안전진단 보고서 참조할 것)

리모델링으로 증가하는 고정하중, 활하중을 고려하여 설계하고 구조안전과 관련된 증빙자료를 제출하도록 함. 또한 구조보강 작업방법과 공사비 등을 검토하여 합리적인 보수보강 방법을 발주청에 제시

설계시 구조기술사(관계전문기술자)의 협력을 받아야 하며, 구조 관련 서류에 날인을 받야아 함. (구조안전관련 의견서 첨부)

바. 기타계획

그린리모델링 전의 1차 에너지소요량 대비 50% 이상의 성능개선(절감률)을 목표로 하며, ECO2-OD 프로그램을 통한 에너지 성능평가를 진행하여 위 목표치를 만족하는 예상 결과를 제출해야 함. (제출서류 : 형별성능내역서, 외피전개도, 면적산출표, ECO2-OD파일 등)

더불어 건축물에너지효율등급 1++등급 수준 이상으로 설계하고 제로에너지 건축물 인증 5등급 이상이 될 수 있도록 충분한 신재생에너지 설비를 계획하여야 함

동해안의 강한 해풍의 영향으로 주출입구 방풍실 파손이 잦은 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시함과 동시에 정면성과 입구성을 느낄 수 있도록 입면 제시

건축물의 정면(서측)과 우측면(남측)은 일사유입량 저감을 위한 일사조절장치(차양장치) 설치   권장

일사조절장치(차양장치)는 구조체에 일체화하여 설치되어야 하는지 여부에 따라 설치 가능 여부가 결정되므로 사전에 검토 필요

자연채광이 극대화될 수 있도록 계획

기존에 널리 사용되었던 단열도료 보다 우수한 성능의 차열도료를 건축물의 외부 표면(주로    옥상)에 도장하여 실내 냉방부하 저감 권장

옥내 태양광패널 등의 신재생에너지설비 설치에 따른 구조안전성 검토

외단열 시공으로 인해 외벽의 중심선이 변경되어 건축면적에 영향이 있을 경우 건축허가 대상에 해당하므로 이를 감안하여 계획

사용자재는 국산 K·S 규격품을 기준으로 하되 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감을 고려하여 계획

시공성, 경제성을 고려하여 자재를 선정하며, 석면자재 등 인체에 유해한 자재를 사용할 수 없으며 자연 친화적인 자재를 우선하여 계획

사용자재는 환경친화적 제품을 우선적으로 사용하며, 화재예방을 위하여 불연자재 및 준 불연자재를 사용하는 등 소방법, 건축법, 지방조례 등을 감안하여 자재를 계획

기계설비 부분

냉·난방설비 계획

설계 전에 기계설비의 제원을 확인하고, 예산 내에서 효율화할 수 있는 설비가 있는지 확인하여 시설의 에너지 효율을 높일 수 있는 방안 검토

냉난방설비 교체 시 고효율에너지기자재 인증제품 적용

경관과 효율을 고려한 합리적인 실외기 위치 선정

환기설비 계획

환기에 따른 냉난방 에너지소요량 절감과 청정한 실내공기질 유지를 위해 폐열회수형 또는   전열교환형 환기장치(고효율 인증제품)를 설치

환기장치는 전열(현열+잠열)교환효율의 높은 제품으로 계획

냉난방에너지 절감을 위해 외기냉방모드(바이패스모드), 실내 공기를 순환하는 청정모드가 있는 제품을 우선적으로 검토

기타

도서관이라는 시설특성을 감안하여 기계설비 설치 시 저소음 제품을 사용하여 이용자들에게 조용하고 쾌적한 환경제공

전기·통신설비 부분

고효율 조명(LED) 교체 시 고효율기자재 인증제품을 적용하고 각 실별 적정 조도 및 조명밀도 계획이 세심하게 이루어지도록 함.

적절한 조도를 유지하면서도 에너지를 절감할 수 있는 조명제어방안(모션센서, 카운터센서, 조도센서, 조광기 등) 제시

대기전력저감 우수제품으로 등록된 자동절전제어장치(대기전력차단콘센트 또는 대기전력차단스위치/일괄소등스위치)를 전체 콘센트 개수의 30% 이상 설치 권장

고효율 전동기 및 변압기 등 예산 내에서 효율화 할 수 있는 설비로 교체하여 시설의 에너지 효율을 높일 수 있는 방안 검토

건물에너지관리시스템(BEMS) 또는 원격검침전자식계량기 설치 방안 검토

기존 사무실 행정망 선로 및 일반 선로 설치 시 노출되지 않도록 검토

외벽 신설 관통부위, 외벽 미사용 관통부위, 외벽에 면한 콘센트 등에 누기방지를 위한 기본 상세도 작성 또는 시방서에 기재

신재생에너지설비 부분

태양광패널을 설치하는 경우 주변과 조화를 이룰 수 있는 디자인으로 계획

태양광패널 옥상 설치 시 기존 건축물의 구조안전 확인이 필요하며, 여건상 옥상 설치가 불가할 경우 옥외 부분에 설치하는 방안 검토
※ 공작물 축조신고 등 관련 행정절차 서류작성 및 공작물에 대한 구조 검토 시행

태양광패널 설치 시, 일조시뮬레이션을 통해 최적의 위치 선정 등 발전효율을 고려하여 설치

합리적인 유지관리 방안 제시 및 생산된 전력 사용계획 수립 필요

소방설비 부분

자동화재탐지설비, 유도등, 소화설비 설비 등에 의해 화재를 초기 소화하여 확대가 최소화 되도록 하며, 피난을 용이하게 할 수 있도록 설계함.

공간 재구성시 소화전을 적합한 위치로 변경

소방 등 관련법령 및 규정에 적합한 설계를 하여야 함. (수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기, 소화설비 등)

각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모

소화설비의(소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 기타설비)적정 설치계획 검토

경보설비 세부사항(자동화재 탐지설비, 자동화재 속보설비, 비상경보설비, 기타설비) 신설 검토

피난설비 세부사항(피난기구, 유도표지 및 비상조명등, 인명구조 기구, 기타 설비)검토

경계구역 및 구역 일람표 작성

기타 연계성 있는 설계(건축, 전기, 통신, 기계설비중 소방시설과 관련된 설비)

비상전원설비 확보

기타 유지보수 관리상 필요한 설비를 감안하며, 관련법령에 의거 발주처와 협의

기타 필요한 사항은 발주처 및 분야별 참여 용역기술자 협의 반영

제4장 성과품의 작성 및 납품

일반사항

수급인은 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따름.

예비검사

수급인은 설계용역 준공예정일 10일 전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 함.

설계도서 작성기준

기본설계 및 실시설계 도서의 작성은 건축사용역의 범위와 대가 기준에 의거, 설계도서를 작성하여 성과품을 제출함.

내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 함.

또한, 수급인은 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시함.

관련 법규 및 제반규정 준수

건축법 및 건축사법, 동법 시행령 및 시행규칙

건축물의 구조․설비 기준 등에 관한 규칙

콘크리트구조설계기준(내진설계포함)

공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률

환경정책기본법

건설기술진흥법, 동법 시행령 및 시행규칙

산업안전보건법, 동법 시행령 및 시행규칙

소방법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련 규준 및 기준

산업표준화법 관련 규정 및 기준

장애인․노인․임산부 등의 편익 증진 보장에 관한 법률

전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

전기설비기술기준 및 판단기준

전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

전기용품 및 생활물품 안전관리법

대한전기협회 제정 내선규정, 한국전력공사 설계기준

전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

한국산업규격(KS)

기타 과학기술정보통신부 고시 및 정보. 통신 법규

폐기물관리법 관련 규정 및 기준

전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법

전파법

에너지이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

건축물의에너지절약설계기준

수도법 및 하수도법, 동법 시행령 및 시행규칙

주차장법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련 규정 및 기준

건축공사 표준시방서

건축설비공사 표준시방서

토목 관련 공사 표준시방서 및 설계시공 지침

조경공사 표준시방서

건축표준 상세도

고압가스 안전관리법 및 도시가스사업법 관련 법규, 기준

문화재보호법, 문화재보호법 시행령, 문화재보호법 시행규칙

기타, 본 공사와 관련된 법규, 고시, 예규, 훈령, 조례 등 제반규정

성과품의 작성

설계보고서

보고서는 제출문과 참여기술자 명단(별첨 양식)을 수록

발주기관의 요청사항, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입

기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 발주기관과 사전협의 후 시행

‘공공건축물 그린리모델링사업 가이드라인’을 참고하여 「붙임2. 에너지 성능평가 보고서 (1차 에너지 절감률)」을 작성하여 제시

설계 설명서

공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명

건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 공정계획 및 세부 공사비 등

기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 , 주요자재 비교검토(안), 특정제품 사용시 설명 등

통신분야 : 통신선로, 방송·감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

각종계산서

해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량 계산서 등을   포함

물량산출서

수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 함.

공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출

설계도면

설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성

설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성

모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인 하여야 함.

설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기

모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출(각 파일은 캐드파일과 일반 범용 PDF로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출)

공사시방서

공사시방서는 표준시방서와 전문시방서(건축, 기계, 전기, 통신, 소방 편)를 기준으로 작성하여야 한다.

공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 함.

적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련 법규 및 지침, 제 기준의 명칭

계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

발주기관과 시공자 사이의 책임 범위 및 한계

각종 검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용 자재, 사용 장비, 소요 인원 등에 대한 상세한 규정

공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

기타 주요공사 사항

공사시방서 작성 시 유의사항

공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 함.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성

표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 함.

공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정

공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성

공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 작성

발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성

사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야함.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성

공사내역서

공사내역서의 작성은 정부제정 관련 공사 표준품셈을 참조 발주기관과 협의하여 적용하여야 함.

공사비 내역서는 ‘건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가’를 우선 적용하고‘ “행안부 예규 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 규칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 의하여 산출

재료비

조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 함.

조달청 조달정보에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출

상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용
단, 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 함.

직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용

내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 함.

표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함.

주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 함.

정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 함.

운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 함.

수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성함.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

예산회계법 및 동법 시행령

재무회계예규

기타 관련 법규 및 기준

복합공종(1개 발주 건으로 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등으로 구성)의 내역서 작성 시 각 부문 간 동일한 설계프로그램으로 내역서를 작성하여야 함.

관급공사 건설현장 근로환경 개선을 위한 편의시설 설치 의무화에 따른 공사 시행 시 근로자 편의시설의 계획하여 설계에 반영

예정공정표 작성

예정공정표는 A3규격으로 설계설명서에 포함하여 제출

인․허가 도서

인․허가 도서 작성
관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성

설계도서 검토

검토 방법

설계시행 책임기술자가 검토

각종계산서 확인 검토

확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

제출도면: 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 제출

제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

기타

수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준함.

도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 함.

모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 함. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 발주기관과 협의하여 사용할 수 있음.

발주기관 내부 규정, 각종 지침(방침)에 따른 검토 자료가 필요할 경우 적정 시기에 작성하여 제출함.

성과품의 납품

성과품 납품시기

성과품의 납품은 기본설계 및 실시설계 도면납품으로 구분

수급인은 최종성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 함.

성과품의 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
도면 (A3) 도면 (A3반책)	백상지 A3 백상지 A4	각 5부 각 2부	※공종분야별 구분 등에 대하여는 발주기관과 협의하여 제출한다. (기계, 소방(기계), 전기, 소방(전기), 정보통신공사는 각 성과품별로 별도 작성 제출한다.)
설계설명서	A4	5부
공사시방서 구조안전확인서	A4 A4	각 5부 2부
예산내역서	A4	각 5부
일위대가표	A4	각 5부
단가산출조서	A4	각 5부
수량산출조서	A4	각 5부
각종 설계계산서	A4	각 5부
조감도	600mm×800mm	협의
공사 예정공정표	A3	1부
USB(설계도서 일제)	-	2개
※ 내역서 작성요령은 발주기관과 협의하여 작성한다. ※ 감독관과 협의하여 크기, 수량 등 조정될 수 있다.

[ 붙임1 ] 그린리모델링 건물에너지 성능 개선 및 실내공기질 개선 계획서

1. 대상 건축물 개요

건축주명				사업자명
주소 및 건축물명
착공연도		년	층 수		지하 층, 지상 층
준공연도		년	층 고		층고: m, 천장고: m
용 도			연면적(㎡)
사업예정기간	20 . . ~ 20 . . ( 개월)
에너지 성능개선 비율 / 등급			성능개선 공사비			원

2. 에너지 성능 및 공기질 개선 공사 내용요약

분야		개선 전(현재)	개선 후	비고(특이사항)
에너지 성능개선	구조	․ ․	․ ․	․ ․
	단열	․ ․	․ ․	․ ․
	창호	․ ․	․ ․	․ ․
	기계 설비	․ ․	․ ․	․ ․
	전기 설비	․ ․	․ ․	․ ․
	신재생 에너지	․ ․	․ ․	․ ․
실내 공기질 개선	환기 설비	․ ․	․ ․	․ ․
기타		․ ․	․ ․	․ ․

※ 에너지 성능개선 공사의 해당공종별로 개선 전·후 사항 입력

※ 기재내용에 따라 별지로 추가 작성 가능.

3. 에너지 성능 및 실내 공기질 개선 작성 데이터

분야	개선 전(현재)	개선 후	비고(특이사항)
외벽	단면구성	단면구성	기존벽체구성+추가단열+마감, *기존 창틀 해체시 기존 벽체 단면 파악
최상층 지붕	단면구성	단면구성	기존벽체구성+추가단열+마감
창 및 문	창틀 + 유리	창틀 + 유리	창틀의 재질 및 유리 규격(로이 및 공기층 포함) *창틀의 형식 :예) 단창, 이중창 등
보일러 (난방/급탕)	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율 (기설치장비명판참조)	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율	개선전·후 보일러 대수 구분, 급탕용량 별도 표기 * 평면도상 보일러실 위치 표기
EHP, GHP	COP(난방, 냉방) (기설치장비명판참조)	용량, COP(난방, 냉방)	실내기, 실외기 개선 전·후 대수 구분 실외기당실내기매칭대수표기 * 평면도상 개선 전·후 실내기, 실외기 위치 표시
냉방기	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율 (기설치장비명판참조)	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율	개선전·후 냉방기 대수 구분,
폐열회수형 환기장치	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율 (기설치장비명판참조)	종류, 수량, 용량, 형식 및 효율	개선전·후 환기장치 대수 구분,
조명	종류, 수량 및 규격	종류, 수량 및 규격	실별 조명 현황 표시, (조명밀도계산서첨부)
일사 조절장치			개선 전·후 평면도 상 해당 창호에 표기 (형식,규격)
신·재생 에너지(태양광)	규격(셀), 종류, 용량, 설치각도, 방향	규격(셀), 종류, 용량, 설치각도, 방향
BEMS	채택 여부	채택 여부	BEMS 또는 원격검침전자식 계량기 설치 여부
Cool Roof (차열도료)			채택 여부 및 면적
석면제거			채택 여부 및 면적
대기전력 차단 콘센트			채택 여부 및 개수
온수기			개선 전·후 설치 대수(규격 및 용량)
스마트 에어샤워			개선 전·후 설치 대수(규격 및 용량)
기타 설비			기타 개선 장비의 규격, 용량 및 설치 위치 등 표기
친환경 자재			개선 후 채택 여부(종류)

[ 붙임2 ] 에너지 성능평가 보고서 (1차 에너지 절감률)

1. 현재 건축물의 에너지 성능 (개선 전)

월별 냉난방 에너지 요구량 (kWh/m2a)

연간 에너지 요구량 및 소요량 (kWh/m2)

구 분	신재생	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계
에너지요구량	0.0	58.8	12.2	4.4	16.0	0.0	91.4
에너지소요량	0.0	88.7	5.9	12.4	16.0	1.3	124.4
1차에너지소요량	0.0	64.6	16.3	9.0	44.0	3.6	137.6
CO2 발생량	0.0	14.6	2.8	2.0	7.5	0.6	27.5

2. 그린리모델링 후 건축물의 에너지 성능 (개선 후)

월별 냉난방 에너지 요구량 (kWh/m2a)

연간 에너지 요구량 및 소요량 (kWh/m2)

구 분	신재생	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계
에너지요구량	0.0	33.8	10.8	4.4	10.7	0.0	59.7
에너지소요량	0.0	63.8	4.5	12.4	10.7	5.0	96.3
1차에너지소요량	0.0	46.5	12.3	9.0	29.4	13.7	110.8
CO2 발생량	0.0	10.5	2.1	2.0	5.0	2.3	21.9

1차 에너지 절감률 (%)

[ 붙임3 ] 그린리모델링 공사별 설계과업 세부내용

구분		도 면	내 역	시방서 등	비고
사업기본현황		․전체평면도 ․배치도 ․챠트 (GR사업) 등
필수 공사	창호	․평면도 ․입면도 ․상세도(시공범위 등)	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	단열	․평면도 ․입면도 ․상세도(시공범위 등)	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	폐열 회수형 환기장치	․평면도 ․입면도 ․상세도 (벽체 관통 부위, 천장 내 환기 덕트와 타배관 등의 중첩 부위, 외기인접부위 결로방지 단열, 시공범위 등) ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․설계계산서 (덕트관경, 장비용량 및 전기용량 등) ․발주서류 일체 (현장설명서 등) ․장비 소음관련 자료
	냉난방 장치	․평면도 ․입면도 ․상세도 (실외기 위치, 드레인 배관 위치, 천장 내 타배관 등의 중첩 부위, 점검구 위치, 시공범위 등) ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․설계계산서 (전기용량, 실내,외기 용량 등) ․발주서류 일체 (현장설명서 등) ․실외기 소음관련 자료
	고효율 조명	․조명설비 평면도 (배선도 포함) ․조명기구 상세도 ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	신재생 에너지	․평면도 및 계통도 ․태양광구조물 상세도 ․접속반,인버터,모듈 외형 상세도 ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등) ․(연관)구조계산등
	BEMS (또는 원격 검침기	․평면도 및 계통도 ․제어반 상세도 ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)

구분		도 면	내 역	시방서 등	비고
병행 가능 공사	Cool Roof (차열 도료)	․평면도 ․입면도 ․지붕평면 ․상세도(시공범위 등)	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	석면 제거	․평면도 ․세부상세도(천정틀)	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	대기 전력 차단 콘센트	․평면도 ․배선도 ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	온수기	․평면도 ․입면도 ․상세도(시공범위 등) ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․설계계산서 (장비 및 전기용량 등) ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	스마트 에어샤워	․평면도 ․입면도 ․상세도(시공범위 등) ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)
	일사 조절장치	․평면도 ․입면도 ․상세도(시공범위 등) ․(연관)타공종 도면	․설계내역서 ․지급자재리스트 ․수량산출서 ․일위대가 ․단가산출근거	․시방서 ․발주서류 일체 (현장설명서 등)

* 설계과업내용은 발주처 협의내용에 추가 및 변경 가능

[ 붙임 4 ] 착수계

착  수  계

감독관 경유 :

1. 용  역  명 : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일 (착수일로부터 ○○○일)

본 업체는 상기 용역에 대한 착수계를 제출합니다.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 5 ] 사용인감계

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 「강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역」 에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부  인감증명서 1부.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 6 ] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일

- 아          래 -

가. 성             명 :

나. 주             소 :

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며, 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 7 ] 참여기술자 현황

참여기술자 현황

연 번	분 야	직 위	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	성 명	비 고
1				예)881212-1******
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 8 ] 분야별 책임기술자 선임계

분야별 책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일

- 아          래 -

가. 기   술    분   야 :

나. 성              명 :

다. 주              소 :

라. 주 민 등 록 번 호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 ○○분야에 대한 책임기술자로 선임하여 제출합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 9 ] 공동수급표준협정서(분담이행방식)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2024년   월   일

공동수급 대표자 :           (인)

공동수급 응모자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 10 ] 보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명  : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

가. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

나. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

다. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인해 발주청에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등)에 의한 손해배상 책임을 지고 처벌되어도 일체 이의를 제기하지 않는다.

붙임  참여기술자 각서인 1부.

2024년   월   일

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

대   표   자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

참여기술자 각서인

참여기술자 각서인

성 명	주민등록번호	주 소	날 인
	예)881212-1******

[ 붙임 11 ] 하도급 승인요청서

하도급 승인요청서

1. 용  역  명 : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일

- 아          래 -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 적산 등)

나. 하도급금액 :

다. 하 도 급 자

1) 주    소 :

2) 상    호 :

3) 대 표 자 :

4) 보유면허 :

상기인에게 본 설계용역의 ○○분야를 하도급 하고자,「지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건」제5조(하도급 승인)에 따라 승인요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격증, 경력증명서 및 재직증명서 포함) 1부.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 12 ] (기본, 실시) 설계 검사원

(기본, 실시) 설계 검사원

1. 용  역  명 : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링 사업 건축설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2024년   월   일

5. 완료 예정일 : 2024년   월   일

본 용역의 (기본, 실시) 설계 완료에 따라 검사원을 제출하오니

검사하여 주시기 바랍니다.

붙  임  납품설계도서 1식.

2024년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

강원도립대학교 귀하

[ 붙임 13 ] 월간 공정보고

월간 공정보고

1. 용  역  명 : 강원도립대학교 중앙정보관 그린리모델링사업 건축설계용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2024. . . ～ 2024. . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

2024년   월   일

책임기술자 :           (인)

강원도립대학교 귀하