강원특별자치도 고시 제2025-184호

자연휴양림 조성계획변경 승인 고시

「산림문화·휴양에 관한 법률」제14조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조 제6항 규정에 의거 자연휴양림 조성계획변경 승인을 아래와 같이 고시합니다.

2025년  5월  15일

강원특별자치도지사

1. 명    칭 : 임해자연휴양림

2. 위    치 : 강릉시 강동면 안인진리 산46-1번지 외 25필지

3. 면    적 : 116ha(1,157,167㎡)

4. 조성기간 : 승인일로부터 ~ 2026. 12. 31.

5. 승인일자 : 2025. 5. 15.

6. 시설계획 및 연도별 투자계획 : '첨부' 참조

[ 첨부 ]

□ 시설계획

구 분	단위	규모 (연면적)	기본계획(기시설)			변경신청			증감			비고
			수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)	수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)	수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)
합 계				12,554	627		17,425	893.22		증4,871	증266.22
편익시설				10,760	603		14,360	869.22		증3,600	증266.22
산림휴양관	동	377㎡	1	2,830	213	1	2,830	213
제1전망대	동	33㎡	1	90	13	1	90	13
제2전망대 (주차장, 휴게음식점 포함)	동	496.95㎡				1	2,200	266.22	1	증2,200	증266.22	신설 (휴게음식점 /190.05㎡)
등의자	개	1.8x0.67	3			3
등의자	개	1.8x0.63	5			5
야외테이블	개	2.05x2.05	3			3
휴게데크	식	91.9㎡	1			1
수경시설	식	153㎡	1			1
벽천	식	6㎡	1			1
평의자	개	1.8x0.6	4			4
야영장	개소	1.44㎡	4	50		4	50
주차장	개소	400㎡	2	400		2	400
안내판	종		9			9
숲속의 집	동	112㎡	1	450	112	1	450	112
숲속의 집	동	287.58㎡	1	613	153	1	613	153
숲속의 집	동	262.47㎡	1	500	112	1	500	112
진입로정비	m	B=4.0	1,450	5,800		1,450	5,800
전망대진입로	식	B=4.0				1	1,400		1	증1,400		신설
화강석포장	㎡	T50	27	27		27	27
위생시설				904	24		904	24
음수정	개소	2.0X1.2	2			2
오수정화시설	식	30㎥/일	3	290		3	290
야외화장실	개소	간이	1	4		1	4
취사장	개소	16㎡	1	610	24	1	610	24

구 분	단위	규모	기본계획(기시설)			변경신청			증감			비고
			수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)	수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)	수량	형질 변경 (㎡)	건축 면적 (㎡)
교육시설				90			90
숲속교실	개소	38㎡	1	90		1	90
교육자료판	개	1.5X1.2	1			1
체육시설
온몸펴기	개소	1.2X2.7	2			2
오금펴기	개소	0.24X0.55	2			2
산책로	m	B=1.2	360			360
체력단련시설	개소	5종	1			1
부대시설				800			2,071			1,271		(임도내 공동매설)
전기공	식		1			1
통신공	식		1			1
상수도공	식	200㎥/일	1	450		1	1,219			769
수도관	m	B=1.34				(574)	(769)		(574)	(769)		전망대/ 임도매설 (전기 등 공동)
전기인입공	식	1.0Km	1	350		1	1,621			1,271
- 전기케이블	m	B=1.34				(948)	(1,271)		(948)	(1,271)		전망대/ 임도매설
통신인입	식	1.0Km	1			1
관로공	식		1			1
하수관	m	B=1.34				(948)	(1,271)		(948)	(1,271)		전망대/ 임도매설
잔디식재	㎡	0.3x0.3x0.3	168			168
수목식재	본	14종	1,010			1,010

※ 임해 자연휴양림내 임도 : 1.34km(2000년 조성 / 간선임도)

□ 연도별 투자계획

구 분		계	기 투자액			´24 소요액	´25 소요액	´26 소요액	비고
				‘15 이전 예산액	´15 소요액
계		7,907	3,657	3,237	420	750	3,000	500
국 비		1,140	1,140	1,140
지방비	도 비	2,870	270	270		300	2,000	300
	시 비	3,477	1,827	1,827		450	1,000	200
강릉관광 개발공사		420	420		420

※ 연도별 투자계획은 재정여건 등에 따라 변동될 수 있음.