강원도 공고 제2020-1754호

도시가스 공급시설 설치 공사계획 변경(3차) 공고

도시가스사업법 제18조의3 제1항의 규정에 의거 도시가스 공급시설 설치공사 계획을 다음과 같이 공고 합니다.

2020년  9월  11일

강   원   도   지   사

1. 공사기간: 2020. 3. 1. ~ 2021. 12. 31.

2. 공사 시행자 및 대상지역

◦ 강원도시가스(주): 춘천시, 태백시, 홍천군, 영월군, 정선군

◦ 참빛원주도시가스(주): 원주시·횡성군

◦ 참빛영동도시가스(주): 강릉시·동해시·삼척시

◦ 참빛도시가스(주): 속초시·고성군·양양군

◦ 명성파워그린(주): 평창군

3. 공사내용	(단위: m, 개소)

구 분	배 관(m)				정압기(개소)				비 고
	년도	계	금회공고	기공고	년도	계	금회공고	기공고
합 계	2020	57,623	-11,752	69,375	2020	8	-	8
	2021	56,800	7,337	49,463	2021	6	-	6
강원도시가스(주)	2020	20,248	-1,764	22,012	2020	4	-	4
	2021	8,847	-	8,847	2021	1	-	1
참빛원주도시가스(주)	2020	14,317	-5,000	19,317	2020	-	-	-
	2021	10,164	4,680	5,484	2021	-	-	-
참빛영동도시가스(주)	2020	12,556	-2,093	14,649	2020	1	-	1
	2021	11,467	2,657	8,810	2021	3	-	3
참빛도시가스(주)	2020	9,343	-	9,343	2020	1	-	1
	2021	12,541	-	12,541	2021	1	-	1
명성파워그린(주)	2020	1,159	-2,895	4,054	2020	2	-	2
	2021	13,781	-	13,781	2021	1	-	1

4. 공사계획 내용: 붙임참조

도시가스 공급시설 2개년(2020 ~ 2021년) 설치공사 변경계획(강원도시가스)

1. 사업자: 강원도시가스㈜

2. 공급권역: 춘천시, 홍천군, 영월군, 정선군, 태백시

3. 설치공사 계획

구 분	2020년			2021년
	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)
춘천시	11,764	3	2,584	1,664	-	4,527
홍천군	2,214	-	189	1,925	-	178
영월군	3,449	-	591	1,588	-	469
정선군	621	-	44	200	-	15
태백시	2,200	1	-	3,470	1	1,666
합 계	20,248	4	3,408	8,847	1	6,855

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(강원도시가스)

1. 공사계획 총괄

구 분		배관길이 (m)	정압기 (개소)	수요가수 (세대)	투자비 재원(천원)
						지자체보조금	분담금	사업자 투자액	기타
총 공급계획		20,248	4	3,408	8,003,301	2,804,487	748,771	4,450,043	-
	가산보수투자	14,781	1	865	5,640,819	2,804,487	275,578	2,560,754	-
	일반투자	5,467	3	2,543	2,362,482	-	473,193	1,889,289	-

2. 시군별 세부 공사계획 변동 내역

투자구분	공사계획									투자비 재원(천원)
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장 (m)	정압기 개소	수요가수	공사 시기	공급 시기	비고		보조금	분담금	사업자 투자	기타
가산보수투자	춘천시	동면 장학리 815-3번지	신북읍 율문리 935-206번지	3,700	-	-	9월	11월	보조금 사업	1,993,000	996,500	-	996,500	-
		춘천시 소양로1가 107번지	근화동 803번지	1,261	-	99	10월	12월	보조금 사업	345,961	150,946	74,062	120,953	-
		춘천시 일원	춘천시 일원	2,074	-	212	9월	11월	보조금 사업	475,005	227,273	141,882	105,851	-
		학곡리 306-1번지	학곡리 320-18번지	236	-	81	4월	5월	수요개발	35,546	-	16,632	18,913	-
		소 계	-	7,271	-	392	-	-	-	2,849,512	1,374,719	232,576	1,242,217	-
가산보수투자	홍천군	희망리 75-1번지	희망리 86-9번지	284	-	31	7월	8월	보조금 사업	101,173	50,586	2,870	47,717	-
		희망리 383-2번지	희망리 381-2번지	581	-	27	9월	10월	보조금 사업	160,072	80,036	2,421	77,615	-
		갈마곡리530번지	갈마곡리 414-1번지	427	-	30	6월	6월	보조금 사업	107,636	53,818	2,515	51,303	-
		희망리 336-8	희망리 31-6번지	190	-	10	6월	7월	보조금 사업	60,180	30,090	807	29,283	-
		석화초등학교 정문	갈마곡리 408-2	330	-	31	4월	4월	보조금 사업	99,650	49,825	2,959	46,866	-
		소 계	-	1,812	-	129	-	-	-	528,711	264,355	11,572	252,783	-
	영월군	영월읍 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 807-4번지	188	-	33	8월	9월	보조금 사업	60,567	20,277	2,959	37,330	-
		영월읍 영흥리 811-24번지	영월읍 영흥리 818-8번지	433	-	49	8월	9월	보조금 사업	144,067	65,204	4,484	74,379	-
		영월읍 덕포리 643-28번지	영월읍 덕포리 632-70번지	559	-	63	8월	9월	보조금 사업	152,951	69,276	5,649	78,025	-
		영월읍 영흥리 904-1번지	영월읍 영흥리 927-4번지	1,105	-	92	9월	10월	보조금 사업	351,925	210,147	8,519	133,260	-
		영월읍 영흥리 1061-28번지	영월읍 영흥리 1049-29번지	620	-	59	8월	9월	보조금 사업	143,212	94,845	5,380	42,986	-
		영월읍 하송리 112-1번지	영월읍 하송리 111-10번지	42	-	4	8월	9월	보조금 사업	12,953	7,203	448	5,302	-
		소 계	-	2,947	-	300	-	-	-	865,674	466,952	27,440	371,283	-
	정선군	고한리 104-3번지	고한리 85-18번지	66	-	5	6월	7월	보조금 사업	25,948	12,974	448	12,525	-
		사북리 산72-1번지	사북리 284-11번지	285	-	24	9월	10월	보조금 사업	119,474	59,737	2,152	57,585	-
		고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	200	-	15	3~ 12월	3~ 12월	공급민원	51,500	25,750	1,390	24,360	-
		소 계	-	551	-	44	-	-	-	196,922	98,461	3,990	94,470	-
	태백시	황지동 636-3번지	황지동 244-12번지	2,200	1	-	8월	9월	보조금 사업	1,200,000	600,000	-	600,000	-
		소 계	-	2,200	1	-	-	-	-	1,200,000	600,000	-	600,000	-
	합 계	-	-	14,781	1	865	-	-	-	5,640,819	2,804,487	275,578	2,560,754	-
일반투자	춘천시	삼천동 44-10번지	삼천동 44-10번지	25	1	965	4월	5월	수요개발	91,127	-	90,076	1,051	-
		퇴계동1201	퇴계동 369-9번지	94	1	630	8월	21년 1월	수요개발	107,988	-	35,308	72,680	-
		중도동357-24번지	중도동 450-8번지	1,630	-	2	8월	9월	수요개발	330,580	-	-	330,580	-
		학곡리428-1번지	학곡리 산 16번지	1,516	1	-	8월	미정	수요개발	379,570	-	-	379,570	-
		후평동 900번지	후평동 899번지	130	-	1	8월	9월		65,481	-	16,612	48,869	-
		춘천시일원	춘천시 일원	1,098	-	594	3월~ 12월	3월~ 12월	공급민원	306,072	-	202,869	103,203	-
		춘천시일원	춘천시 일원	-	-	-	3월~ 9월	3월~ 9월	시설보수	404,449	-	24,745	379,704	-
		소 계	-	4,493	3	2,192	-	-	-	1,685,266	-	369,610	1,315,656	-
	홍천군	홍천군 일원	홍천군 일원	400	-	60	3~ 12월	3~ 12월	공급민원	115,573	-	63,615	51,958	-
		홍천군일원	홍천군 일원	2	-	-	3월~ 10월	3월~ 10월	시설보수	27,885	-	-	27,885	-
		소 계	-	402	-	60	-	-	-	143,458	-	63,615	79,843	-
	영월군	영월읍 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 705-1번지	406	-	279	6월	7월	수요개발	494,011	-	25,018	468,992	-
		영월군일원	영월군 일원	96	-	12	3월~ 12월	3월~ 12월	공급민원	27,748	-	14,950	12,798	-
		소 계	-	502	-	291	-	-	-	521,759	-	39,969	481,790	-
	정선군	정선군 일원	정선군 일원	70	-	-	10월	10월	시설보수	12,000	-	-	12,000	-
		소계	-	70	-	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000	-
	합 계	-	-	5,467	3	2,543	-	-	-	2,362,482	-	473,193	1,889,289	-
총 계		-	-	20,248	4	3,408	-	-	-	8,003,301	2,804,487	748,771	4,450,043	-

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(강원도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
가산보수투자	춘천시	동면 장학리 815-3번지	신북읍 율문리 935-206번지	3,700	-	동면 장학리 815-3번지	신북읍 율문리 935-206번지	3,700	-	보조금 사업	변경없음
가산보수투자	춘천시	춘천시 소양로1가 107번지	근화동 803번지	1,261		춘천시 소양로1가 107번지	근화동 803번지	1,123	-	보조금 사업	변경
		춘천시 일원	춘천시 일원	2,074	-	춘천시 일원	춘천시 일원	2,074	-	보조금 사업	변경없음
		학곡리 306-1번지	학곡리 320-18번지	236	-	-	-	-	-	수요개발	추가
		소 계	-	7,271	-	소 계	-	6,897	-	-	-
	홍천군	희망리 75-1번지	희망리 86-9번지	284	-	희망리 75-1번지	희망리 86-9번지	381	-	보조금 사업	변경
		희망리 383-2번지	희망리 381-2번지	581	-	희망리 383-2번지	희망리 381-2번지	581	-	보조금 사업	변경없음
		갈마곡리 530번지	갈마곡리 414-1번지	427	-	갈마곡리 530번지	갈마곡리 414-1번지	366	-	보조금 사업	변경
		희망리 336-8	희망리 331-6번지	190	-	희망리 336-8	희망리 331-6번지	196	-	보조금 사업	변경
		석화초등학교 정문	갈마곡리 408-2번지	330	-	석화초등학교 정문	갈마곡리 408-2번지	330	-	보조금 사업	변경없음
		소 계	-	1,812	-	소 계	-	1,854	-	-	-
	영월군	영월읍 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 807-4번지	188	-	영월읍 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 807-4번지	186	-	보조금 사업	변경
		영월읍 영흥리 811-24번지	영월읍 영흥리 818-8번지	433	-	영월읍 영흥리 811-24번지	영월읍 영흥리 818-8번지	362	-	보조금 사업	변경
		영월읍 덕포리 643-28번지	영월읍 덕포리 632-70번지	559	-	영월읍 덕포리 643-28번지	영월읍 덕포리 632-70번지	385	-	보조금 사업	변경
		영월읍 영흥리 904-1번지	영월읍 영흥리 927-4번지	1,105	-	영월읍 영흥리 904-1번지	영월읍 영흥리 927-4번지	981	-	보조금 사업	변경
		영월읍 영흥리 1061-28번지	영월읍 영흥리 1049-29번지	620	-	영월읍 영흥리 1061-28번지	영월읍 영흥리 1049-29번지	553	-	보조금 사업	변경
		영월읍 하송리 112-1번지	영월읍 하송리 111-10번지	42	-	-	-	-	-	보조금 사업	추가
		소 계	-	2,947	-	소 계	-	2,467	-	-	-
	정선군	고한리 104-3번지	고한리 85-18번지	66	-	고한리 104-3번지	고한리 85-18번지	387	-	보조금 사업	변경
		사북리 산 72-1번지	사북리 284-11번지	285	-	-	-	-	-	보조금 사업	추가
가산보수투자	정선군	고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	200	-	고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	200	-	보조금 사업	변경없음
		소 계	-	551	-	소 계	-	587	-	-	-
	태백시	황지동 636-3번지	황지동 244-12번지	2,200	1	황지동 636-3번지	황지동 244-12번지	4,730	1	보조금 사업	변경
		소 계	-	2,200	1	소 계	-	4,730	1	-	-
	합 계	-	-	14,781	1	-	-	16,535	1	-	-
일반투자	춘천시	삼천동 44-10번지	삼천동 44-10번지	25	1	삼천동 44-10번지	삼천동 44-10번지	51	1	수요개발	변경
		퇴계동 1201번지	퇴계동 369-9번지	94	1	퇴계동 1201번지	퇴계동 369-9번지	96	1	수요개발	변경
		중도동 357-24번지	중도동 450-8번지	1,630	-	중도동 357-24번지	중도동 450-8번지	1,630	-	수요개발	변경없음
		학곡리 428-1번지	학곡리 산 16번지	1,516	1	학곡리 428-1번지	학곡리 산 16번지	1,516	1	수요개발	변경없음
		후평동 900번지	후평동 899번지	130	-	-	-	-	-	수요개발	추가
		춘천시 일원	춘천시 일원	1,098	-	춘천시 일원	춘천시 일원	1,098	-	공급민원	변경없음
		춘천시 일원	춘천시 일원	-	-	춘천시 일원	춘천시 일원	-	-	시설보수	변경없음
		소 계	-	4,493	3	소 계	-	4,391	3	-	-
	홍천군	홍천군 일원	홍천군 일원	400	-	홍천군 일원	홍천군 일원	400	-	공급민원	변경없음
		홍천군 일원	홍천군 일원	2	-	홍천군 일원	홍천군 일원	-	-	시설보수	변경
		소 계	-	402	-	소 계	-	400	-	-	-
	영월군	영월읍 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 705-1번지	406	-	영월군 영흥리 801-2번지	영월읍 영흥리 705-1번지	420	-	수요개발	변경
		영월군 일원	영월군 일원	96	-	영월군 일원	영월군 일원	96	-	공급민원	변경없음
		소 계	-	502	-	소 계	-	516	-	-	-
	정선군	고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	70	-	고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	-	-	시설보수	변경
		소 계	-	70	-	소 계	-	-	-	-	-
	합 계	-	-	5,467	3	-	-	5,307	3	-	-
총 계		-	-	20,248	4	-	-	21,842	4	-	-

2. 공사계획 취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				비고
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
일반투자	춘천시	학곡리 306-1번지	학곡리 320-18번지	170	-	일반투자→가산보수투자 변경
		소계	-	170	-	-
	합계	-	-	170	-	-

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(강원도시가스)

투자구분	공사계획
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고
전체투자	춘천시	온의동 583번지	온의동 575번지	10	-	1,175	8월	22년 3월	수요개발
		삼천동44-22번지	온의동 75-3번지	140	-	1,556	5월	7월	수요개발
		근화동752-9번지	근화동 772번지	390	-	629	9월	22년 3월	수요개발
		약사동778번지	약사동 130-68번지	10	-	567	4월	6월	수요개발
		석사동793-1번지	석사동 793-1번지	10	-	3	6월	11월	수요개발
		효자동779 번지	효자동 779번지	6	-	3	6월	11월	수요개발
		춘천시일원	춘천시 일원	1,098	-	594	3월~12월	3월~12월	공급민원
		춘천시일원	춘천시 일원	-	-	-	4월~9월	4월~9월	시설보수
		소 계	-	1,664	-	4,527	-	-	-
	홍천군	갈마곡리 주공2차	검율리 월드아파트	1,525	-	118	9월	11월	수요개발
		홍천군 일원	홍천군 일원	400	-	60	3월~12월	3월~12월	공급민원
		홍천군일원	홍천군 일원	-	-	-	3월~10월	3월~10월	시설보수
		소 계	-	1,925	-	178	-	-	-
	영월군	영월군 영흥리 1008번지	영월군 영흥리 970-3번지	1,450	-	171	5월	10월	수요개발
		영월군 하송리 100-15번지	영월군 하송리 411-1번지	88	-	292	2월	3월	수요개발
		영월군일원	영월군 일원	50	-	6	3월~12월	3월~12월	공급민원
		소 계	-	1,588	-	469	-	-	-
	정선군	고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	200	-	15	3~12월	3~12월	공급민원
		고한/사북리 일원	고한/사북리 일원	-	-	-	3월~10월	3월~10월	시설보수
		소 계	-	200	-	15	-	-	-
전체투자	태백시	황지동 산68번지	황지동 49-87번지	3,470	1	1,666	6월	11월	보조금 사업
		소 계	-	3,470	1	1,666	-	-	-
총 계		-	-	8,847	1	6,855

도시가스 공급시설 2개년(2020 ~ 2021년) 설치공사 계획(참빛원주도시가스)

1. 사업자: 참빛원주도시가스㈜

2. 공급권역: 원주시, 횡성군

3. 설치공사 계획

구 분	2020년			2021년
	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)
원주시	13,817	-	1,526	6,644	-	2,969
횡성군	500	-	374	3,520	-	1
합 계	14,317	-	1,900	10,164	-	2,970

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛원주도시가스)

1. 공사계획 총괄

구 분		배관길이 (m)	정압기 (개소)	수요가수 (세대)	투자비 재원(천원)
						지자체보조금	분담금	사업자 투자액	기타
총 공급계획		14,317	-	1,900	5,014,967	717,687	1,125,209	3,172,071	-
	가산보수투자	11,891	-	810	3,799,626	717,687	702,601	2,379,338	-
	일반투자	2,426	-	1,090	1,215,341	-	422,608	792,733	-

2. 시군별 세부 공사계획

투자구분	공사계획											투자비재원(천원)
	시/군	공사시점		공사종점		배관연장(m)	정압기 개소	수요 가수	공사시기	공급시기	비고		보조금	분담금	사업자투자	기타
가산보수투자	원주시	우산동 86-1번지 앞		우산동 93-9번지 앞	우산동 93-9번지 앞	1,079 우산동 93-9번지 앞		95	7월	8월	보조금 사업	393,196	170,093	81,089	142,014
		개운동 118-2번지 앞		개운동 309-17번지 앞		767		83	6월	7월	보조금 사업	243,977	102,351	50,735	90,891
		단구동 153-3번지 앞		단구동 1626번지 앞		3,221		373	9월	10월	보조금 사업	1,032,724	445,243	224,331	363,150
가산보수투자	원주시	무실동 641-3번지		무실동 1079-3번지		1,246		-	3월	2022년	택지	570,431	-	-	570,431
		무실동 850-25번지		무실동 849-3번지		1,804		미정	8월	2022년	택지	466,000	-	150,000	316,000
		무실동 1066-9번지		무실동 779-5번지		2,096		미정	10월	2022년	택지	627,000	-	-	627,000
		반곡동 1324-26번지		반곡동 1371-21번지 앞		543		250	9월	9월	수요개발	228,298	-	47,518	180,780
		지정면 신평리 1090번지		지정면 신평리 1108번지		460		8	10월	11월	수요개발	108,000	-	54,000	54,000
		흥업면 사제리 산165-8번지		흥업면 사제리 산171-1번지		675		1	10월	10월	수요개발	130,000	-	94,928	35,072
		소 계				11,891	-	810				3,799,626	717,687	702,601	2,379,338	-
	횡성군
		소 계				-	-	-				-	-	-	-
	합 계					11,891	-	810				3,799,626	717,687	702,601	2,379,338	-
일반투자	원주시	명륜동 850-2번지	명륜동 850-2번지	명륜동 850-2번지		- 명륜동 851-18번지	-	-	2월		보수공사	6,138	-	6,138	-
		단계동806-2번지	단계동806-2번지	단계동806-2번지		164 단계동 산73-48번지 앞	-	568	3월	9월	수요개발	61,624	-	50,933	10,691
		단구동1699-2번지 앞	단구동1699-2번지 앞	단구동1699-2번지 앞		140 단구동 851-4번지 앞	-	93	6월	6월	택지	60,763	-	10,491	50,272
		원주시 전역				-	-		9월		보수공사	230,000	-	-	230,000
		반곡동 산 1번지		반곡동 1446-6 번지	반곡동 1446-6 번지	104 반곡동 1446-6번지	-	1	6월	7월	공급민원	44,630	-	20,713	23,917
		반곡동1860-11번지	반곡동1860-11번지	반곡동1860-11번지		198 반곡동 1860-8번지	-	1	6월	2021년	수요개발	95,208	-	38,322	56,886
		반곡동1892번지	반곡동1892번지	반곡동1892번지		350 반곡동 2042-7번지	-	2	8월	2021년	수요개발	130,310	-	5,537	124,773
		명륜동265-17번지 앞	명륜동265-17번지 앞	명륜동265-17번지 앞		96 명륜동 138번지 앞	-	1	8월	2021년	수요개발	56,860	-	18,612	38,248
일반투자	원주시	중앙동16-1번지 앞	중앙동16-1번지 앞	중앙동16-1번지 앞		35 학성동 207-6번지 앞	-	12	8월	9월	공급민원	20,678	-	9,505	11,173
		반곡동1880-10번지 앞	반곡동1880-10번지 앞	반곡동1880-10번지 앞		270 반곡동 1889번지 앞	-	1	6월	2021년	수요개발	66,000	-	66,000	-
		단계동931-7번지 앞	단계동931-7번지 앞	단계동931-7번지 앞		26 무실동 산 46-4번지 앞	-	1	7월	2021년	수요개발	13,000	-	13,000	-
		무실동12-44번지	무실동12-44번지	무실동 63-1번지 무실동12-44번지		80	-	1	7월	2021년	수요개발	40,000	-	40,000	-
		지정면 가곡리1507-1번지 앞	지정면 가곡리1507-1번지 앞	지정면 가곡리1507-1번지 앞		100 지정면 가곡리 1506번지	-	1	10월	10월	공급민원	26,000		26,000	-
		원동310-6번지 앞	원동310-6번지 앞	원동310-6번지 앞		285 원동 304-10번지 앞	-	27	10월	10월	공급민원	114,000		63,330	50,670
		태장동1382-34번지 앞	태장동1382-34번지 앞	태장동1382-34번지 앞		51 태장동 1383-10번지 앞	-	3	10월	10월	공급민원	27,500		15,100	12,400
		봉산동902-205번지 앞	봉산동902-205번지 앞	봉산동902-205번지 앞		27 봉산동 902-241번지 앞	-	4	10월	10월	공급민원	10,800		5,390	5,410
		소 계				1,926	-	716				1,003,511	-	389,071	614,440	-
	횡성군	횡성읍 교항리 44-4번지	횡성읍 교항리 44-4번지	횡성읍 교항리 44-4번지		500 횡성읍 읍하리 476-34번지	-	374	8월	2021년	수요개발	211,830	-	33,537	178,293	-
		소 계				500	-	374				211,830	-	33,537	178,293	-
	합 계					2,426	-	1,090				1,215,341	-	422,608	792,733	-
총 계						14,317	-	1,900				5,014,967	717,687	1,125,209	3,172,071	-

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛원주도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분	사유
		공사시점	공사종점	배관연장 (m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장 (m)	정압기 개소
가산보수투자	원주시	우산동 86-1번지 앞	우산동 93-9번지 앞	1,079	-	우산동 86-1번지 앞	우산동 93-9번지 앞	1,370	-	보조금 사업	변경
		-	-	-	-	명륜동 12번지	명륜동 62-112번지 앞	1,160	-	보조금 사업	21년 이월
가산보수투자	원주시	개운동118-2번지 앞	개운동 309-17번지 앞	767	-	개운동 118-2번지 앞	개운동 309-17번지 앞	1,040	-	보조금 사업	변경
		단구동153-3번지 앞	단구동 1626번지 앞	3,221	-	단구동 153-3번지 앞	단구동 1626번지 앞	3,483	-	보조금 사업	변경
		무실동641-3번지	무실동 1079-3번지	1,246	-	무실동 641-3번지	무실동 1079-3번지	1,246	-	택지	변경없음
		무실동850-25번지	무실동 849-3번지	1,804	-	무실동 850-25번지	무실동 849-3번지	1,778	-	택지	변경
		무실동1066-9번지	무실동 779-5번지	2,096	-	무실동 1066-9번지	무실동 779-5번지	2,096	-	택지	변경없음
		반곡동1324-26번지	반곡동 1371-21번지 앞	543	-	반곡동 1324-26번지	반곡동 1371-21번지 앞	510	-	수요개발	변경
		지정면 신평리1090번지	지정면 신평리 1108번지	460	-	지정면 신평리 1090번지	지정면 신평리 1108번지	460	-	수요개발	변경없음
		흥업면 사제리산165-8번지	흥업면 사제리 산171-1번지	675	-	흥업면 사제리 산165-8번지	흥업면 사제리 산171-1번지	675	-	수요개발	변경없음
		소 계		11,891	-	소 계		13,818	-
	횡성군	-	-	-	-	-	-	-	-
		소 계		-	-	소 계		-	-
	합 계			11,891	-			13,818	-
일반투자	원주시	명륜동 850-2번지	명륜동 851-18번지	-	-	명륜동 850-2번지	명륜동 851-18번지	-	-	보수공사	변경없음
		단계동 806-2번지	단계동 산73-48번지 앞	164	-	단계동 806-2번지	단계동 산73-48번지 앞	164	-	수요개발	변경없음
		단구동 1699-2번지 앞	단구동 851-4번지 앞	140	-	단구동 1699-2번지 앞	단구동 851-4번지 앞	140	-	택지	변경없음
		원주시 전역	-	-	-	원주시 전역	-	-	-	보수공사	변경없음
		반곡동 산 1번지	반곡동 1446-6번지	104	-	반곡동 산 1번지	반곡동 1446-6번지	104	-	공급민원	변경없음
		반곡동 1860-11번지	반곡동 1860-8번지	198	-	반곡동 1860-11번지	반곡동 1860-8번지	220	-	수요개발	변경
		반곡동 1892번지	반곡동 2042-7번지	350	-	반곡동 1892번지	반곡동 2042-7번지	350	-	수요개발	변경없음
		명륜동 265-17번지 앞	명륜동 138번지 앞	96	-	명륜동 265-17번지 앞	명륜동 138번지 앞	90	-	수요개발	변경
일반투자	원주시	중앙동 16-1번지 앞	학성동 207-6번지 앞	35	-	중앙동 16-1번지 앞	학성동 207-6번지 앞	35	-	공급민원	변경없음
		반곡동 1880-10번지 앞	반곡동 1889번지 앞	270	-	반곡동 1880-10번지 앞	반곡동 1889번지 앞	270	-	수요개발	변경없음
		단계동 931-7번지 앞	무실동 산 46-4번지 앞	26	-	단계동 931-7번지 앞	무실동 산 46-4번지 앞	26	-	수요개발	변경없음
		무실동 12-44번지	무실동 63-1번지	80	-	무실동 12-44번지	무실동 63-1번지	80	-	수요개발	변경없음
		지정면 가곡리 1507-1번지 앞	지정면 가곡리 1506번지	100	-	-	-	-	-	공급민원	추가
		원동 310-6번지 앞	원동 304-10번지 앞	285	-	-	-	-	-	공급민원	추가
		태장동 1382-34번지 앞	태장동 1383-10번지 앞	51	-	-	-	-	-	공급민원	추가
		봉산동 902-205번지 앞	봉산동 902-241번지 앞	27	-	-	-	-	-	공급민원	추가
		소 계		1,926	-	소 계		1,479	-
	횡성군	횡성읍 교항리 44-4번지	횡성읍 읍하리 476-34번지	500		횡성읍 교항리 44-4번지	횡성읍 읍하리 476-34번지	500	-	수요개발	변경없음
		-	-	-		횡성읍 추동리 31번지	우천면 문암리 산37-1도	3,520		수요개발	21년 이월
		소 계		500	-	소 계		4,020	-
	합 계			2,426	-			5,499	-
총 계				14,317	-			19,317	-

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛원주도시가스)

투자구분	공사계획
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고
전체투자	원주시	명륜동 65-13번지 앞	명륜동 120-1번지 앞	3,351	-	174	2021년	2021년	보조금 사업
		문막읍 문막리 547-22번지 앞	문막읍 문막리 277-1번지 앞	1,513	-	70	2021년	2021년	보조금 사업
		무실동 12-58번지	명륜동 773-3번지	270		1,774	2021년	2022년	수요개발
전체투자	원주시	명륜동 산80-1번지	명륜동 635-2번지 앞	250		687	2021년	2022년	수요개발
		무실동 1811-1번지 앞	무실동 63-2번지	100	-	195	2021년	2022년	수요개발
		피복손상 보수공사 (원주시 전역)		-	-	-	2021년		보수공사
		명륜동 12번지	명륜동 62-112번지 앞	1,160	-	69	2021년	2021년	보조금 사업
		소 계		6,644	-	2,969
	횡성군	횡성읍 추동리 31번지	우천면 문암리 산37-1도	3,520	-	1	2021년	2022년	수요개발
		소 계		3,520	-	1
총 계				10,164	-	2,970

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛원주도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경/취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분	사유
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
전체투자	원주시	명륜동 65-13번지 앞	명륜동 120-1번지 앞	3,351	-	명륜동 65-13번지 앞	명륜동 120-1번지 앞	3,351	-	보조금 사업	변경 없음
		문막읍 문막리547-22번지 앞	문막읍 문막리 277-1번지 앞	1,513	-	문막읍 문막리 547-22번지 앞	문막읍 문막리 277-1번지 앞	1,513	-	보조금 사업	변경 없음
		무실동12-58번지	명륜동 773-3번지	270	-	무실동 12-58번지	명륜동 773-3번지	270	-	수요 개발	변경 없음
		명륜동산80-1번지	명륜동 635-2번지 앞	250	-	명륜동 산80-1번지	명륜동 635-2번지 앞	250	-	수요 개발	변경 없음
		무실동1811-1번지 앞	무실동 63-2번지	100	-	무실동 1811-1번지 앞	무실동 63-2번지	100	-	수요 개발	변경 없음
		피복손상보수공사(원주시 전역)	-	-	-	피복손상 보수공사 (원주시 전역)	-	-	-	보수 공사	변경 없음
		명륜동12번지	명륜동 62-112번지 앞	1,160		-	-	-	-	보조금 사업	이월
					-
		소 계		6,644	-	소 계		5,484	-
	횡성군	횡성읍 추동리 31번지	우천면 문암리 산37-1도	3,520		-	-	-	-	수요 개발	이월
		소 계		3,520		소 계		-	-
총 계				10,164	-			5,484	-

도시가스 공급시설 2개년(2020 ~ 2021년) 설치공사 계획(참빛영동도시가스)

1. 사업자: 참빛영동도시가스(주)

2. 공급권역: 강릉시, 동해시, 삼척시

3. 설치공사 계획

구 분	2020년			2021년
	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)
강릉시	7,649	-	2,164	4,622	1	830
동해시	2,606	1	845	3,275	1	991
삼척시	2,301	-	446	3,570	1	1,803
합 계	12,556	1	3,455	11,467	3	3,624

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛영동도시가스(주))

1. 공사계획 총괄

구 분		배관길이 (m)	정압기 (개소)	수요가수 (세대)	투자비 재원(천원)
						지자체보조금	분담금	사업자 투자액	기타
총 공급계획		12,556	1	3,455	4,889,295	1,158,514	554,764	3,176,017	-
	가산보수투자	8,140	-	1,688	2,951,846	1,150,014	286,685	1,515,147	-
	일반투자	4,416	1	1,767	1,937,449	8,500	268,079	1,660,870	-

2. 시군별 세부 공사계획

투자구분	공사계획									투자비재원(천원)
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고		보조금	분담금	사업자투자	기타
가산보수투자	강릉시	주문진읍 교항리 259 앞, 18-6 앞	주문진읍 교항리260-5 앞, 1181-4 앞	152	-	533	7~8월	11월~'21년3월	수요개발	78,784		48,244	30,540
		노암동 397 앞	노암동 338-9앞	376	-	136	8~9월	10~11월	보조금 사업	141,906	18,195	20,492	103,219
		포남동 1005-105 앞	포남동 1005-165앞	323	-	83	8월	9~10월	보조금 사업	133,035	28,295	19,014	85,726
		초당동 554 앞	포남동 1226앞	3,120	-	305	9~10월	11~12월	보조금 사업	1,061,466	415,992	87,946	557,528
		주문진읍 교항리 29-15 앞	주문진읍 교항리66-6 앞, 80-63 앞	2,046	-	186	10~11월	11~12월	보조금 사업	730,638	315,781	57,151	357,706
		소 계		6,017	-	1,243				2,145,829	778,263	232,847	1,134,719
	동해시									-
		소 계		-	-	-				-	-	-	-
가산보수투자	삼척시	원덕읍 호산리 240 앞	원덕읍 호산리 산19앞	64	-	1	4월	7월	수요개발	13,322		3,475	9,847
		당저동 144-2 앞, 원당동 170 앞	읍중동 4-7 앞,원당동 71 앞	759	-	194	6월	7~8월	보조금 사업	234,545	92,676	27,945	113,924
		당저동28-9 앞	당저동 14-26 앞	1,300	-	250	9~10월	11~12월	보조금 사업	558,150	279,075	22,418	256,657
		소 계		2,123	-	445				806,017	371,751	53,838	380,428
	합 계			8,140	-	1,688				2,951,846	1,150,014	286,685	1,515,147
일반투자	강릉시	포남동 1005-61 앞	포남동 1005-332앞, 1005-105 앞	413	-	180	3월	5~6월	공급민원	161,564		22,050	139,514
		포남동 1117 앞	교동 140-16앞	603	-	472	3~4월	7월	수요개발	243,537		26,453	217,084
		견소동 289 앞	견소동 264앞	398	-	169	5월	9월	공급민원	180,897		54,845	126,052
		포남동 1178-2 앞, 1172-14 앞	포남동 1179 앞,1180 앞	163	-	99	5월	6~8월	수요개발	83,630		8,878	74,752
		주문진읍 주문리 878-2 앞	주문진읍 주문리878-2 앞	32	-	-	7월	-	이설공사	29,029	8,500		20,529
		교동 348-6 앞	교동 408앞	23	-	1	8월	9월	수요개발	17,412		2,668	14,744
		소 계		1,632	-	921				716,069	8,500	114,894	592,675
	동해시	구미동 607-8 앞	구호동 230앞	1,335	-	2	5~6월	7월	수요개발	651,950		58,053	593,897
		용정동 산143 앞	효가동 44앞	941	1	528	8월	'21년3월	수요개발	392,109		47,436	344,673
		천곡동 933 앞	천곡동 939앞	210	-	313	9~10월	'21년2월	수요개발	83,799		17,542	66,257
		천곡동 806 앞	천곡동 844앞	70	-	1	10~11월	12월	공급민원	35,000		6,753	28,247
		천곡동 1035-8 앞	천곡동 1037-10앞	50		1	10~11월	12월	공급민원	20,000		5,002	14,998
		소 계		2,606	1	845				1,182,858	-	134,786	1,048,072
	삼척시	교동 261 앞	교동 산209앞	178	-	1	9~10월	'21년3월	공급민원	38,522		18,399	20,123
		소 계		178	-	1				38,522	-	18,399	20,123
	합 계			4,416	1	1,767				1,937,449	8,500	268,079	1,660,870
총 계				12,556	1	3,455				4,889,295	1,158,514	554,764	3,176,017

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛영동도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경/취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분	사유
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
가산보수투자	강릉시	주문진읍 교항리 259 앞, 18-6 앞	주문진읍 교항리 260-5 앞,1181-4 앞	152	-	주문진읍 교항리 259 앞, 18-6앞	주문진읍 교항리 260-5 앞,1181-4 앞	153	-	수요개발	변경
		노암동 397 앞	노암동 338-9 앞	376	-	노암동 397 앞	노암동 338-9 앞	376	-	보조금 사업	변경없음
		포남동 1005-105 앞	포남동 1005-165 앞	323	-	포남동 1005-105 앞	포남동 1005-165 앞	323	-	보조금 사업	변경없음
		초당동 554 앞	포남동 1226 앞	3,120	-	초당동 554 앞	포남동 1226 앞	2,932	-	보조금 사업	변경
		주문진읍 교항리 29-15 앞	주문진읍 교항리 66-6 앞, 80-63 앞	2,046	-	주문진읍 교항리 29-15 앞	주문진읍 교항리 66-6 앞, 80-47 앞	2,558	-	보조금 사업	변경
		소 계		6,017	-	소 계		6,342	-
	동해시
		소 계		-	-	소 계		-	-
	삼척시	원덕읍 호산리 240 앞	원덕읍 호산리 산19 앞	64	-	원덕읍 호산리 240 앞	원덕읍 호산리 산19 앞	64	-	수요개발	변경없음
		당저동 144-2 앞, 원당동 170 앞	읍중동 4-7 앞, 원당동 71앞	759	-	당저동 144-2 앞, 원당동 170 앞	읍중동 4-7 앞, 원당동 71앞	763	-	보조금 사업	변경
		당저동 28-9 앞	당저동 14-26 앞	1,300	-	당저동 28-9 앞	당저동 14-26 앞	1,300	-	보조금 사업	변경없음
		소 계		2,123	-	소 계		2,127	-
	합 계			8,140	-			8,469	-
일반투자	강릉시	포남동 1005-61 앞	포남동 1005-332 앞, 1005-105 앞	413	-	포남동 1005-61 앞	포남동 1005-332 앞, 1005-105 앞	413	-	공급민원	변경없음
		포남동 1117 앞	교동 140-16 앞	603	-	포남동 1117 앞	교동 140-16 앞	603	-	수요개발	변경없음
		견소동 289 앞	견소동 264 앞	398	-	견소동 289 앞	견소동 264 앞	398	-	공급민원	변경없음
		포남동 1178-2 앞, 1172-14 앞	포남동 1179 앞, 1180 앞	163	-	포남동 1178-2 앞, 1172-14앞	포남동 1179 앞, 1180 앞	163	-	수요개발	변경없음
		주문진읍 주문리 878-2 앞	주문진읍 주문리 878-2 앞	32	-	주문진읍 주문리 878-2 앞	주문진읍 주문리 878-2 앞	32	-	이설공사	변경없음
일반투자	강릉시	교동 348-6 앞	교동 408 앞	23	-	교동 348-6 앞	교동 408 앞	23	-	수요개발	변경없음
						대전동 922-1 앞	사천면 산대월리 540-2 앞	900			취소
						포남동 1121-5 앞	옥천동 368-3 앞, 포남동 1121-14 앞	1,155			취소
						교동 1799-11 앞	지변동 692 앞	26			취소
		소 계		1,632	-	소 계		3,713	-
	동해시	구미동 607-8 앞	구호동 230 앞	1,335	-	구미동 607-8 앞	구호동 230 앞	1,336	-	수요개발	변경
		용정동 산143 앞	효가동 44 앞	941	1	용정동 산143 앞	효가동 44 앞	941	1	수요개발	변경없음
		천곡동 933 앞	천곡동 939 앞	210	-	천곡동 942 앞	천곡동 939 앞	190	-	수요개발	변경
		천곡동 806 앞	천곡동 844 앞	70	-					공급민원	추가
		천곡동 1035-8 앞	천곡동 1037-10 앞	50	-					공급민원	추가
		소 계		2,606	1	소 계		2,467	1
	삼척시	교동 261 앞	교동 산209 앞	178	-					공급민원	추가
		소 계		178	-	소 계		-	-
	합 계			4,416	1			6,180	1
총 계				12,556	1			14,649	1

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛영동도시가스(주))

투자구분	공사계획
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장 (m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고
전체투자	강릉시	대전동 922-1 앞	사천면 산대월리540-2 앞	900	-	1	'21년3~4월	'21년6월	수요개발
		명주동 65-15 앞	성남동 254앞	690	-	93	'21년4~5월	'21년7월	공급민원
		남산초교길 22	남산초교길12번길11	286	-	131	'21년4~5월	'21년6월	수요개발
		주문진읍 주문리 329-28 앞	주문진읍 주문리1056-1 앞	155	-	214	'21년5~6월	'21년9월	수요개발
		연곡면 영진리 산20-6 앞	주문진읍 교항리1217(국군강릉병원) 앞	900	-	1	'21년5~6월	'21년7월	공급민원
전체투자	강릉시	내곡동 325-18 앞	내곡동 296-1앞	600	1	240	'21년8~9월	'22년3월	수요개발
		포남동 1284 앞	송정동 940-23앞	1,091	-	150	'21년8~9월	'21년10~11월	보조금 사업
		소 계		4,622	1	830
	동해시	천곡동 1083-1 앞	천곡동 788 앞	1,400	-	353	'21년3~4월	'21년5~6월	수요개발
		부곡동 80 앞	부곡동 112 앞,부곡동 12-1 앞, 발한동 599-47 앞	1,875	1	638	'21년5~6월	'21년7~9월	보조금 사업
		소 계		3,275	1	991
	삼척시	마달동 10-2 앞	갈천동 102-5앞	410	-	885	'21년4~5월	'21년12월	수요개발
		남양동 346 앞	정상동 275-1 앞	1,130	-	218	'21년7~8월	'21년9~10월	보조금 사업
		교동 762 앞	정상동 475앞	2,000	1	699	'21년7~8월	'21년9~10월	보조금 사업
		갈천동 산79 앞	갈천동 산82앞	30	-	1	'21년7~8월	'21년9~10월	공급민원
		소 계		3,570	1	1,803
총 계				11,467	3	3,624

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛영동도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경/취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분	사유
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
전체투자	강릉시	대전동 922-1 앞	사천면 산대월리 540-2 앞	900	-					수요개발	추가
		명주동 65-15 앞	성남동 254 앞	690	-					공급민원	추가
		남산초교길 22	남산초교길12번길 11	286	-	남산초교길 22	남산초교길12번길 11	286	-	수요개발	변경없음
		주문진읍 주문리 329-28 앞	주문진읍 주문리 1056-1 앞	155	-	주문진읍 주문리 329-28 앞	주문진읍 주문리 1056-1 앞	155	-	수요개발	변경없음
		연곡면 영진리 산20-6 앞	주문진읍 교항리 1217(국군강릉병원) 앞	900	-	연곡면 영진리 산20-6 앞	주문진읍 교항리 1217(국군강릉병원) 앞	900	-	공급민원	변경없음
		내곡동 325-18 앞	내곡동 296-1 앞	600	1	내곡동 325-18 앞	내곡동 296-1 앞	600	1	수요개발	변경없음
		포남동 1284 앞	송정동 940-23 앞	1,091	-	포남동 1284 앞	송정동 940-23 앞	1,091	-	보조금 사업	변경없음
		소 계		4,622	1	소 계		3,032	1
전체투자	동해시	천곡동 1083-1 앞	천곡동 788 앞	1,400	-	천곡동 1083-1 앞	천곡동 788 앞	333	-	수요개발	변경
		부곡동 80 앞	부곡동 112 앞, 부곡동 12-1 앞, 발한동 599-47 앞	1,875	1	부곡동 80 앞	부곡동 112 앞, 부곡동 12-1 앞,발한동 599-47 앞	1,875	1	보조금 사업	변경없음
		소 계		3,275	1	소 계		2,208	1
	삼척시	마달동 10-2 앞	갈천동 102-5 앞	410	-	마달동 10-2 앞	갈천동 102-5 앞	410	-	수요개발	변경없음
		남양동 346 앞	정상동 275-1 앞	1,130	-	남양동 346 앞	정상동 275-1 앞	1,130	-	보조금 사업	변경없음
		교동 762 앞	정상동 475 앞	2,000	1	교동 762 앞	정상동 475 앞	2,000	1	보조금 사업	변경없음
		갈천동 산79 앞	갈천동 산82 앞	30	-	갈천동 산79 앞	갈천동 산82 앞	30	-	공급민원	변경없음
		소 계		3,570	1	소 계		3,570	1
총 계				11,467	3			8,810	3

도시가스 공급시설 2개년(2020 ~ 2021년) 설치공사 계획(명성파워그린)

1. 사업자: 명성파워그린㈜

2. 공급권역: 평창군

3. 설치공사 계획

구 분	2020년			2021년
	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)	배관연장(m)	정압기(개소)	수요가수(세대)
평창군	1,159	2	753	13,781	1	2,554
합 계	1,159	2	753	13,781	1	2,554

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(명성파워그린(주))

1. 공사계획 총괄

구 분		배관길이 (m)	정압기 (개소)	수요가수 (세대)	투자비 재원(천원)
						지자체보조금	분담금	사업자 투자액	기타
총 공급계획		1,159	2	753	1,295,070	578,800	82,399	633,871	-
	가산보수투자	968	1	752	1,157,600	578,800	82,399	496,401	-
	일반투자	191	1	1	137,470	-	-	137,470	-

2. 시군별 세부 공사계획

투자구분	공사계획									투자비재원(천원)
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고		보조금	분담금	사업자 투자	기타
가산보수투자	평창군	대관령면 대관령로 149 앞	대관령면대관령로 187 앞	422	-	286	5월	6월	보조금 사업	123,240	61,620	28,211	33,409	-
		대관령면솔봉로 463-6 앞	솔봉로 477앞, 솔봉로 499-28 앞	332	1	148	4월	5월	보조금 사업	154,140	77,070	22,821	54,249
		횡계리 675-8	횡계리259-6	119		128	6월	7월	보조금 사업	320,970	160,485	12,626	147,859
		송천2길9 앞	송천2길 11	95		190	8월	9월	보조금 사업	559,250	279,625	18,741	260,884
		소계		968	1	752				1,157,600	578,800	82,399	496,401	-
	합 계			968	1	752				1,157,600	578,800	82,399	496,401	-
일반투자	평창군	용산리226-70	수하리223-9	191	1	1	11월	12월	수요 개발	137,470			137,470
		소 계		191	1	1				137,470	-	-	137,470	-
	합 계			191	1	1				137,470	-	-	137,470	-
총 계				1,159	2	753				1,295,070	578,800	82,399	633,871	-

■ 2020년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(명성파워그린)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경/취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
가산보수투자	평창군	대관령면 대관령로 149 앞	대관령면 대관령로 187 앞	422	-	대관령면 대관령로 149 앞	대관령면 대관령로 187 앞	316	-		변경
		대관령면 솔봉로 463-6 앞	솔봉로 477 앞, 솔봉로 499-28앞	332	1	대관령면 솔봉로 463-6 앞	솔봉로 477 앞, 솔봉로 499-28앞	332	1
		횡계리 675-8	횡계리 259-6	119	-						추가
		송천2길 9 앞	송천2길 11 앞	95	-						추가
						대관령로 115	횡계리 331-19	1,039	-	보조금 사업	취소
						눈마을길 39	횡계리 348-5	1,891	-	보조금 사업	취소
가산보수투자	평창군					횡계리 310-21	횡계리 304-6	285	-	보조금 사업	취소
											취소
		소 계		968	1	소 계		3,863	1
	합 계			968	1			3,863	1
일반투자	평창군	용산리 226-70	수하리 223-9	191	1	용산리 226-70	수하리 223-9	191	1	공급민원
		소 계		191	1	소 계		191	1
	합 계			191	1			191	1
총 계				1,159	2			4,054	2

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(명성파워그린(주))

투자구분	공사계획
	시/군	공사시점	공사종점	배관연장 (m)	정압기 개소	수요가수	공사시기	공급시기	비고
전체투자	평창군	현대힐스 앞	쉐모아 아파트 일원	595		250	4월	5월
		진고개로 3 앞	진부리 일원	13,186	1	2,304	5월~12월	12월
		소계		13,781	1	2,554
총 계				13,781	1	2,554

■ 2021년 도시가스 공급시설 설치 공사계획(참빛도시가스)_변경 내역

1. 공사계획 추가/변경/취소

투자구분	시/군	공사계획(최종)				공사계획(이전)				비고	구분
		공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소	공사시점	공사종점	배관연장(m)	정압기 개소
가산보수투자	평창군	현대힐스 앞	쉐모아아파트 일원	595	-	현대힐스 앞	쉐모아아파트 일원	595	-	보조금 사업
		진고개로 3 앞	진부리 일원	13,186	1	진고개로 3 앞	진부리 일원	13,186	1	보조금 사업
		소 계		13,781	1	소 계		13,781	1
	합 계			13,781	1			13,781	1
총 계				13,781	1			13,781	1