강원도 고시 제2022-359호

지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 시행계획 변경 승인 고시

지역특화 임대형 스마트팜 조성사업에 대하여 ｢농어촌정비법｣ 제9조(농업생산기반 정비사업 시행계획 수립 등)의 규정에 따라 시행계획 변경 승인 하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2022년  10월  7일

강   원   도   지   사

1. 사 업 명: 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업

2. 사업구역: 강원도 평창군 대관령면 횡계리 192-4번지

3. 사업의 목적: 임대형 스마트팜 조성을 통해 청년들의 재배역량 향상 및 수익창출·자본축적의 기회를 제공

4. 사업내용: 부지조성(6.2ha), 온실신축(3.5ha)

5. 사 업 비: 20,000백만원

6. 사업기간: 2021년 5월 ∼ 2022년 12월

7. 사업시행자: 한국농어촌공사 강원지역본부(공동시행: 원주지사장)

8. 사업효과: 청년들에게 첨단농업의 재배·경영역량 향상 및 취·창업

붙임 1. 인가내용 1부.

붙임 2. 사업비 수지예산서 1부.

<붙임1> 인가내용

◦ 사 업 량

공 종	기 존	변 경	증(△)감	비 고
부지조성	면적 6.2ha	면적 6.2ha	-
구조물공	5조 1,612m	5조 1,612m	-
포장공	20,088㎡(도로, 포장)	20,088㎡(도로, 포장)	-
배수공	2,392m	2,392m	-
부대공	1식	1식	-
건축공	온실면적 2.5ha	온실면적 3.5ha	1.0ha
기계설비	수평스크린 25,107㎡	수평스크린 34,497㎡	9,390㎡
	업다운 22,464㎡	업다운 30,888㎡	8,424㎡
	양액공급기 6대	양액공급기 8대	2대
	포그시스템 1,915EA	포그시스템 2,274EA	359EA
	유동휀 60대	유동휀 84대	24대
	CO2공급시설 1식	CO2공급시설 2식	1식
	스마트자동제어 6대	스마트자동제어 8대	2대
난방설비	전기보일러 6대	전기보일러 8대	2대
	축열탱크 1대	축열탱크 2대	1대
	튜브레일 43,243m	튜브레일 60,522m	17,279m
전기설비	전력입입 2,400kVA	전력입입 3,300kVA	900kVA
	옥내외전력공급 1식	옥내외전력공급 2식	1식
	조명 및 전열설비 1식	조명 및 전열설비 2식	1식
통신설비	통신입입 1식	통신입입 2식	1식
	구내통신망 1식	구내통신망 2식	1식

◦ 사 업 비

(단위: 천원)

구 분	신 청	승 인	증(△)감	비 고
합 계	15,000,000	20,000,000	5,000,000
￭ 공사비	13,406,286	18,000,145	4,593,859
◦순공사비	11,773,441	16,096,463	4,323,022
- 기반조성	2,621,872	2,621,872	-
- 온실신축	9,151,569	13,474,591	4,323,022
◦지급자재대	1,494,533	1,743,697	249,164
- 기반조성	993,215	993,215	-
- 온실신축	501,318	750,482	249,164
◦ 부대비	138,312	159,985	21,673
- 기타공사	84,237	84,237	-
- 한전납입금	52,800	73,546	20,746
- 사용전검사	1,275	2,202	927
￭ 용지보상비	0	0	0
◦ 직접보상비	-	-	-
◦ 간접보상비	-	-	-
￭ 시설부대경비	1,593,714	1,999,855	406,141
◦ 설계비	591,071	650,553	59,482
◦ 공사감리비	829,526	1,112,426	282,900
◦ 사업관리비	158,209	205,588	47,379
◦ 잡지출	14,908	31,288	16,380

<붙임2> 사업비 수지예산서

◦ 수  입

(단위: 천원)

과 목	신청액	승인액	증(△)감	연 도 별 사 업 비				비고
				‘20년	‘21년	‘22년	소계
합 계	4,500,000	7,000,000	5,000,000	6,000,000	9,000,000	5,000,000	20,000,000
국 고	10,500,000	13,000,000	2,500,000	4,200,000	6,300,000	2,500,000	13,000,000
지 방 비	4,500,000	7,000,000	2,500,000	1,800,000	2,700,000	2,500,000	7,000,000

◦지  출

(단위: 천원)

구 분	시행계획		증(△)감	연 도 별 사 업 비				비고
	기승인	금회승인		‘20년	‘21년	‘22년	소계
합 계	15,000,000	20,000,000	5,000,000	378,620	1,797,721	17,823,659	20,000,000
◼ 공 사 비	13,406,286	18,000,145	4,593,859	27,098	1,547,288	16,425,759	207,790
◦ 기반조성	3,014,311	3,762,834	748,523	703,044	477,687	2,582,103	3,762,834
- 순공사비	2,621,872	2,621,872	0	-	1,361,848	1,260,024	2,621,872
- 자재대	993,215	993,215	0	-	164,288	828,927	993,215
- 기타공사	84,237	84,237	0	27,098	21,152	35,987	84,237
◦ 온실신축	9,706,962	14,300,821	4,593,859	0	0	14,300,821	31,288
- 순공사비	9,151,569	13,474,591	4,323,022	-	-	13,474,591	13,474,591
- 자재대	501,318	750,482	249,164	-	-	750,482	750,482
- 한전납입금	52,800	73,546	20,746	-	-	73,546	73,546
- 사용전검사	1,275	2,202	927	-	-	2,202	2,202
◼시설부대경비	1,593,714	1,999,855	406,141	351,522	250,433	1,397,900	1,999,855
◦ 설계비	591,071	650,553	59,482	351,522	131,653	167,378	650,553
◦ 공사감리비	829,526	1,112,426	282,900	-	95,601	1,016,825	1,112,426
◦ 사업관리비	158,209	205,588	47,379	-	17,483	188,105	205,588
◦ 잡지출	14,908	31,288	16,380	-	5,696	25,592	31,288