평창군 고시 제2022-195호

평창 군계획시설(진부 중로2-3호) 사업 실시계획(변경) 인가 고시

평창군 고시 제2020-140호(2020. 6. 19.)로 실시계획인가한 군계획시설(진부 중로2-3호) 사업에 대하여 경미한 변경사항(기간연장)이 있어 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제88조 및 동법 시행령 제97조에 따라 실시계획(변경)인가를 하고 동법 제91조 및 동법 시행령 제100조에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2022년  12월  16일

평    창    군    수

가. 사업시행지의 위치: 평창군 진부면 상진부리 318-9번지 일원

나. 사업의 종류 및 명칭

◦ 종  류: 도시계획도로

◦ 명  칭: 진부 도시계획도로 중로2-3호 개설공사

다. 사업의 면적 또는 규모

노선명	전체		기시공		금회시공		향후시공
	연장(m)	폭(m)	연장(m)	폭(m)	연장(m)	폭(m)	연장(m)	폭(m)
진부 중로 2-3호	332	15	-	-	332	15	-	-

라. 사업시행자의 성명 및 주소

◦ 시 행 자: 평창군수(도시과)

◦ 주    소: 강원도 평창군 평창읍 군청길 77

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

◦ 사업착수일: 실시계획인가일

◦ 준공예정일: 2022년 12월 31일 → 2024년 12월 31일

바. 수용 또는 사용할 토지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 이외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소: 붙임 참조

편 입 용 지 조 서

- 평창군 진부면 상진부리

연번	토지소재지		지목	지적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소 유 자		관 계 인		비고
	소재지	지번				성명	주소	성명	주소
1	상진부리	318-9	도	2,644	323	국토 교통부	국
2	〃	318-10	도	994	124	국토 교통부	국
3	〃	318-1	전	874	161	김*덕	하진부리 29-5
4	〃	325-2	전	1,727	237	강*자	경기도 안양시 만안구 소곡로20번길 7 106동 303호	안양** 협동조합	경기도 안양시 동안구 부림로169번길 30	근저당
5	〃	324-2	전	1,858	705	홍*숙	안양시 동안구 동편로 135, 408-2002
6	〃	324-1	답	754	305	김*도	진부면 진벌1길 75-3	평창 *** 금고	대관령면 대관령로 115	근저당
7	〃	1033-11	구	1,986	83	농림수산식품부	국
8	〃	1033-8	구	485	23	기획 재정부	국
9	〃	326-2	대	259	38	최*백	진부면 진벌1길 87-7
10	〃	1033-30	구	141	112	기획 재정부	국
11	〃	326-3	대	140	113	평창군	공
12	〃	327-5	전	945	267	최*규	진부면 진부중앙로 175, 2층	진부** 협동조합	진부면 청송로 97	근저당
13	〃	327-8	도	114	34	평창군	공
14	〃	327-7	도	148	21	평창군	공
15	〃	1033-12	구	693	70	농림수산식품부	국
16	상진부리	282-13	도	70	3	기획 재정부	국
17	〃	282-2	도	152	53	국토 교통부	국
18	〃	282-3	전	7,121	155	기획 재정부	국
19	〃	247-25	전	1,448	274	고*재	진부면 까치골길 87-21
20	〃	247-28	전	1,042	292	황*중 외 1인	경기도 부천시 계남로 19 2308동 1304호	진부** 협동조합	진부면 청송로 97	근저당
21	〃	247-35	전	1,448	191	이*규	서울 양천구 목동 901 목동신시가지아파트 108-305
22	〃	247-29	전	806	317	박*라	진부면 땅골길 2-3 301호(송정빌라)
23	〃	247-22	잡	4,026	438	국방부	국
24	〃	280-6	잡	3,679	16	국방부	국
25	〃	245-24	전	7,244	966	기획 재정부	국
26	〃	1306-82	전	172	118	평창군	공
27	〃	245-8	전	211	23	기획 재정부	국
28	〃	245-39	전	669	14	기획 재정부	국
29	〃	1306-2	전	508	70	평창군	공
30	〃	1306-85	전	425	12	국토 교통부	국
계					5,558