양구군 고시 제2022-110호

양구 군계획시설(체육시설) 사업 실시계획 변경 인가 고시

양구군 고시 제2021-28호(2021. 6. 4.)로 실시계획인가, 양구군 고시 제2021-33호(2021. 6. 25.)로 실시계획(변경)인가된 양구 군관리계획(시설: 해안면 체육시설)에 대하여 사업기간 연장이 필요하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제88조 및 같은 법 시행령 제97조 규정에 따라 군계획시설사업의 실시계획 변경을 인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2022년  12월  16일

양    구    군    수

1. 사업시행지의 위치: 양구군 해안면 후리 640번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

가. 종류: 양구 군계획시설(체육시설)사업

나. 명칭: 해안면 체육공원 조성사업

3. 사업의 면적 또는 규모

시 설 명	전체면적	실 시 계 획		비고
		세부시설명	실시계획 면적
체육시설	11,932㎡	해안면 체육공원	11,932㎡

4. 시행자의 성명 및 주소

가. 성 명: 양구군수

나. 주 소: 양구군 양구읍 관공서로 38

5. 사업기간: 기정 - 실시계획인가 고시일 ∼ 2022년 12월 31일
변경 - 실시계획인가 고시일 ∼ 2023년 03월 31일

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 이외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소: 별첨

7. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제99조의 규정에 따른 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항: 해당없음

수용 또는 사용할 토지 또는 지장물 등 내역

1) 토지

일련 번호	소재지	지번	지목	대장 면적(㎡)	편입 면적(㎡)	소유자		권리명세	비고
						성명	주소
합계		10필지		116,248	11,932
1	해안면 후리	629	답	2,877	216	양구군
2	해안면 후리	631	전	807	124	국(기획재정부)
3	해안면 후리	632	전	496	496	국(기획재정부)
4	해안면 후리	633	전	893	788	국(기획재정부)
5	해안면 후리	634	전	1,653	1,556	국(기획재정부)
6	해안면 후리	640	과	4,631	4,552	양구군
7	해안면 후리	641	전	1,395	184	양구군
8	해안면 후리	644	전	2,088	202	양구군
9	해안면 후리	산15	임	72,514	3,794	국(산림청)
10	해안면 후리	산16	임	28,894	20	국(산림청)

2) 건축물: 해당없음