강원도 고시 제2022-442호

강원도 지적재조사지구 지정(변경) 고시

｢지적재조사에 관한 특별법｣ 제7조 및 같은 법 시행령 제6조의 규정에 의거 2021년 제2차, 제3차 강원도 지적재조사위원회에서 심의·의결된 고성군 금수1지구 등 13개 지구의 경미한 변경이 있어 ｢지적재조사에 관한 특별법｣ 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 변경 고시합니다.

2022년  12월  12일

강   원   도   지   사

1. 사 업 명: 2021년 강원도 지적재조사사업

2. 변경내역

사업 시행자 (지구명)	위 치	변경 전			변경 후			변경사유
		필지수	면적 (㎡)	사업기간	필지수	면적 (㎡)	사업기간
고성군 (금수1지구)	고성군 간성읍 금수리 71 일원	157	82,298	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	157	82,298	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (산학1지구)	고성군 현내면 산학리 107 일원	197	200,545	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	197	200,545	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (산학2지구)	고성군 현내면 산학리 219-1 일원	79	59,387	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	79	59,387	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (산학3지구)	고성군 현내면 산학리 43-6 일원	79	111,706	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	79	111,706	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (아야진1지구)	고성군 토성면 아야진리 25-2 일원	390	109,510	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	390	109,510	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (송강1지구)	고성군 거진읍 송강리 457-1 일원	86	82,973	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	86	82,973	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (송강2지구)	고성군 거진읍 송강리 2-5 일원	137	85,543	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	137	85,543	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (송정1지구)	고성군 거진읍 송정리 14-6 일원	223	112,298	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	223	112,298	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (화포1지구)	고성군 거진읍 화포리 190-1 일원	208	140,591	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	208	140,591	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (광산1지구)	고성군 간성읍 광산리 164-51 일원	121	82,863	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	121	82,863	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (광산2지구)	고성군 간성읍 광산리 216-3 일원	244	144,062	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	244	144,062	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (동호1지구)	고성군 간성읍 동호리 422 일원	186	105,471	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	186	105,471	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장
고성군 (동호2지구)	고성군 간성읍 동호리 219 일원	112	43,331	2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	112	43,331	2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업기간 연장

3. 기    타

가. 이 고시는 고시한 날부터 시행합니다.

나. 기타 관계서류는 해당 사업지구의 지적소관청에서 비치하고 있으니, 토지소유자 및 이해관계인은 열람하시기 바랍니다.