영월군 고시 제2022-228호

영월 군계획시설사업(전기공급설비) 실시계획(변경) 인가고시

1. 강원도 고시 제2018-468호(2018. 12. 7.)로 최초 결정된 영월 군관리계획(시설: 전기공급설비)에 대하여 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제88조 규정에 의거 실시계획(변경) 인가하고, 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조에 따라 변경 인가를 아래와 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 영월군 도시과에 비치하고 이해관계인에게 보입니다.

2022년  12월  16일

영    월    군    수

1. 사업시행지의 위치(변경 없음)

◦ 강원도 영월군 상동읍 구래리 산1-37번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭(변경 없음)

◦ 종 류: 영월 군관리계획(시설: 전기공급설비) 사업

◦ 명 칭: 영월에코윈드 풍력발전단지 조성사업

3. 사업시행의 면적 또는 규모(변경 없음)

◦ 면    적: 45,049㎡

◦ 도입시설: 발전시설(풍력발전기) 10기

4. 시행자의 성명 및 주소(변경 없음)

◦ 성 명: 영월에코윈드(주) 대표 조우진

◦ 주 소: 강원도 영월군 영월읍 하송로 43, 2층

5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

◦ 착수예정일: 2020. 07.

◦ 준공예정일 - 기정: 2022. 12. 31.
- 변경: 2023. 12. 31.

(변경사유: 공사일정 지연에 따른 사업기간 연장)

6. 수용 또는 사용할 토지, 건물의 소재지, 지번, 지목 및 소유권 이외의 권리명세서와 관계인의 주소 성명(변경 없음)

가. 수용 또는 사용할 토지조서:  변경 없음

연번	소재지	지 번	지목	면 적(㎡)		소 유 자		비 고
				공부상	편 입	성 명	주 소
계	총 4개 필지			18,851,120	45,049	-	-	-
1	영월군 상동읍 구래리	산1-35	임	11,368,267	23,997	국(산림청)	-	-
2		산1-37	임	7,287,873	15,837	국(산림청)	-	-
3		산1-45	도	176,496	3,204	영월군	-	-
4		산1-89	임	18,484	2,011	국(산림청)	-	-

나. 기타(분묘) 조서: 변경 없음(생략)

7. 법 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항: 해당 없음