삼척시 공고 제2024-1537호

삼척 도시계획시설(도로: 중로1-10호선) 사업의
실시계획 (변경) 인가(안)에 따른 열람 공고

삼척시 고시 제2023-82호(2023. 6. 16.)로 최초 실시계획 인가 고시되고, 삼척시 고시 제2024-151호(2024. 7. 19.)로 실시계획 (변경) 인가 고시된 삼척 도시계획시설(도로: 중로1-10호선) 사업[봉황촌 철도 가도교 개축공사]을 추진함에 따라 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제90조 및 같은 법 시행령 제99조의 규정에 의거 열람 공고하오니, 의견이 있을 시 열람 기간 내 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2024년  9월  13일

삼  척  시  장

1. 사업시행지의 위치(변경없음): 강원특별자치도 삼척시 정상동 374-4번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭(변경)

가. 종류 : 도시계획시설(도로: 중로1-10호선) 사업

[기정] 도시계획시설(도로: 중로1-10, 소로3-277호선) 사업

→ [변경] 도시계획시설(도로: 중로1-10호선) 사업

나. 명칭 : 봉황촌 철도 가도교 개축공사

3. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

가. 성명 : 삼척시장(건설과장)

나. 주소 : 강원특별자치도 삼척시 중앙로 296 (교동)

4. 사업의 면적 및 규모(변경)

가. 사업의 면적(변경): 4,455㎡

【 변경 사항 】[기정] 5,068㎡ → [변경] 4,455㎡  (감 613㎡)

【 변경 사유 】공사 계획 변경(소로3-277호선 금회 사업분 제외)

나. 사업의 규모(변경)

구분	노 선 명	연장(m)	폭원(m)	기 점	종 점	최초결정일	최근결정일	금회시행	비 고
기정	중로1-10	1,196	20~26	정상동 432-3	정상동 산66-3	2000.5.12. (강원도 고시 제80호)	2021.2.19. (삼척시 고시 제27호)	L=220m B=20.0~ 26.0m	교량 L=24.1m B=6.6m
	소로3-277	316	6~9	정상동 374-17	정상동 432-65	1974.6.20. (강원도 고시 제2681호)	2021.8.6. (삼척시 고시 제134호)
변경	중로1-10	1,196	20~26	정상동 432-3	정상동 산66-3	2000.5.12. (강원도 고시 제80호)	2021.2.19. (삼척시 고시 제27호)	L=220m B=20.0~ 26.0m	교량 L=24.1m B=6.6m

5. 사업의 착수 및 준공예정일(변경)

가. 사업착수일 : 2023. 6. 16.

나. 준공예정일 : 2025. 9. 31.【 변경 사항 】준공예정일 [기정] 2025. 6. 30. → [변경] 2025. 9. 31.

6. 열람의 일시 및 장소

가. 일시: 2024. 9. 13. ~ 2024. 9. 28. (15일 간)

나. 장소: 삼척시청 도시과(☎ 033-570-3874)

7. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

■ 수용되거나 사용할 토지의 세목 조서(변경)

소재지	지번	지목	지적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		비 고
					주 소	성명
소계	20필지		13,290	4,455
정상동	372-9	도	20	20	기획재정부	국
정상동	372-10	도	51	51	기획재정부	국
정상동	372-11	도	32	32	기획재정부	국
정상동	372-12	도	1	1	강원특별자치도	공
정상동	372-2	도	437	437	기획재정부	국
정상동	375-2	도	24	24	강원도	공
정상동	374-2	도	888	842	삼척시	공
정상동	376-4	도	3	3	기획재정부	국
정상동	374-4	철	169	169	국토교통부	국
정상동	368-3	철	9,883	1,607	국토교통부	국
정상동	388-4	도	1,332	876	건설교통부	국
정상동	372-17	전	64	64	기획재정부	국
정상동	373-22	도	27	27	기획재정부	국
정상동	373-2	대	71	71	기획재정부	국
정상동	374-22	대	50	50	기획재정부	국
정상동	374-6	대	96	39	삼척시 정상로 81	김*아
					기획재정부	국
정상동	374-16	도	16	16	삼척시	공
정상동	374-17	도	85	85	삼척시	공
정상동	374-19	도	28	28	삼척시	공
정상동	374-13	도	13	13	삼척시	공

※  기타(물건 등): 위 토지상에 소재한 지장물 등 일체를 포함

【 참고 사항 – 토지조서(기정), 삼척시 고시 제2024-151호 】

소재지	지번	지목	지적(㎡)	편입면적 (㎡)	소 유 자		비 고
					주 소	성명
소계	25필지		16,501	5,068
정상동	432-3	도	1,659	594	건설교통부	국
정상동	432-76	대	293	27	삼척시	공
정상동	432-77	도	239	108	삼척시	공
정상동	372-9	도	20	2	기획재정부	국
정상동	372-10	도	51	8	기획재정부	국
정상동	372-11	도	32	3	기획재정부	국
정상동	372-2	도	437	422	기획재정부	국
정상동	375-2	도	24	4	강원도	공
정상동	374-2	도	888	842	삼척시	공
정상동	376-4	도	3	3	기획재정부	국
정상동	374-4	철	169	169	국토교통부	국
정상동	368-3	철	9,883	1,607	국토교통부	국
정상동	388-4	도	1,332	876	건설교통부	국
정상동	372-3	전	66	60	기획재정부	국
정상동	373-16	대	86	26	기획재정부	국
정상동	373-2	대	71	71	기획재정부	국
정상동	374-3	대	46	44	기획재정부	국
정상동	374-6	대	96	39	강원 삼척시 정상로 81	김*아	지적측량 결과 면적 3㎡ 증가
					기획재정부	국
정상동	374-16	도	16	16	삼척시	공
정상동	374-8	대	129	18	강원 삼척시 정상동 3**	한*일
정상동	374-17	도	85	85	삼척시	공
정상동	374-19	도	28	28	삼척시	공
정상동	374-13	도	13	13	삼척시	공
정상동	374-18	도	55	2	삼척시	공
정상동	368-32	도	780	1	삼척시	공

※  기타(물건 등): 위 토지상에 소재한 지장물 등 일체를 포함

8. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 해당없음

【 ※ 참 고 사 항 – 의제처리사항 협의 목록 】

관련 실·과·소	협의(허가) 내용	문서 번호	비 고
삼척시청 농정과	농지전용협의 비대상 농지보전부담금 부과 비대상	농정과-9074(2023. 5. 2.)호

※ 본 공고와 관련된 서류는 삼척시청 도시과(☎ 033-570-3874)에 비치하며, 일반이 열람할 수 있습니다.