강원특별자치도 고시 제2024-471호

강원 태백 노지스마트농업 시범사업 시행계획 승인

「농어촌정비법」제9조제7항에 규정에 따라 강원 태백 노지 스마트농업시범사업 시행계획을 승인하고, 다음과 같이 고시합니다.

2024년  11월  11일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목    적

○  고랭지 농업에 스마트 농업의 선제적 도입과 적용을 통해 노동력 부족, 이상기후 등 변화하는 환경에 대응 가능한 선진 농업체계 확립

2. 사업내용

사업명	위 치			수혜면적 (ha)	사업비 (천원)	사업시행자	사업효과
	시군	읍면동	리
강원 태백 노지스마트농업 시범사업	태백시	창죽동	9-22 번지 일원	193	21,500,000	태백시 (농업기술센터) (위탁사업자 : 한국농어촌공사 강릉지사)	□ 농업용수 추가확보 □ 관수관비시스템 보급으로 배추 생육 촉진 □ 병충해 실시간 예찰 및 방제로 배추 품질 향상

3. 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

4. 편입토지 : 붙임 토지세목조서 참조

5. 세부 사업내용은 태백시 농업기술센터에 비치된 사업승인서를 열람하여 확인할 수 있으며, 기타사항은 태백시 농업기술센터 농업과로 문의 바랍니다.

(주소 : 강원특별자치도 태백시 구와우길 34-6, TEL. 033-550-2991)

붙임 1. 인가내용 1부.

2. 사업비 수지예산서 1부.  끝.

<붙임1> 인가내용

구 분		주요공종	공사계획		비 고
			사업비	물 량
영농확산 기반구축		합 계	21,500
	기초 기반 조성	소 계	12,993
		실시설계	172	- 기본계획 및 실시설계 (23.08. ~ 24.10.)
		용수기반	8,000	토목 및 기계공사 : 집수매거 및 취수장 1개소, 가압장 5개소, 저수조 3개소, 송수관로 6,7km, 급수관로 1.0km 설치 등 (일3,000톤 공급) 건축공사 : 취수장 1개소, 가압장 5개소 신축 전기공사 : 물탱크 수위에 따른 취수펌프 및 가압펌프 자동제어 및 모니터링 시스템 구축 관급자재구매 : 물탱크 및 부스터 펌프, 배관 등	'24.11. ~ '25.12.
		통신망	1,252	정보통신공사 : 생산단지 내 광케이블 포설공사 (한전주이용 및 통신주 19개소 설치 등) CCTV 설치공사 : 구역별 배추 생육 모니터링용 CCTV 87대 설치 (회전형 22대, 고정형 65대) 관급자재구매 : CCTV 87대 및 CCTV 설치용 금속기둥, 안내판, 디스플레이장치 등	'24.11. ~ '25.9.
		지원센터	989	건축공사 : 기존 농업기술센터 내 공간 리모델링 전기공사 : 지원센터 구축 위한 전기공사 실시 관급자재구매 : 서버, 네트워크장비 등 전산장비	'24.11. ~ '25.05.
		실증단지	1,128	비점오염원 제어 실증(급경사지 토양유실 예방 등) 바이오차 실증(최적 관비시기, 관비량 규명 등) 디지털 피노타이핑 기술 실증(생육예측기술 등) 토양선충 방제방안(씨스트선충 최적화 시나리오) 경사지균일관수, 경사지자율주행, 경사지 방제드론 운용방안 등	'24.11. ~ '25.09.
		기 타	1,452	기초기반 감리1식, 정보시스템 감리1식, 정보통신 감리1식
	시설/ 장비 스마 트화	소계	8,507
		실시설계	172	기본계획 및 실시설계 (23.08. ~ 24.10.)
		정보관리시스템	1,308	디지털정보관리시스템 1식, 농업인정보서비스 1식 개발 기상대 연동 및 병충해, 생육모니터링 등 소프트웨어 개발 기상대 5대, 페로몬트랩 20대, 생육드론 1대 구매설치/운용 병충해 및 생육모니터링 수집 데이터 가공 및 분석 등	'24.11. ~ '25.12.
		기상재해예찰	238
		병충해모니터링	489
		생육모니터링	437
		드론방제	214	방제드론 2대 구매/운용 방제대상지 방제경로 입력을 통한 방제드론 운용	'24.11. ~ '25.09.
		스마트농기계	170	전동지게차 2대, 웨어러블슈트 10개, 자율주행키트 1개 구매운용
		관수관비	4,658	원수관로 공사 및 물탱크 설치 / 밸브실 및 관수기, 관비기 설치 관수관비 모니터링 및 제어 시스템 토양, 용수 모니터링 시스템 등	'24.11. ~ '25.10.
		토양/용수관리	821

<붙임2>

□ 사업비 수지예산서

○ 수  입

(단위: 백만원)

과 목	시행계획	승인	증 감	비 고
합 계	21,500	21,500	-
국 비	15,050	15,050	-
지방비	6,450	6,450	-

○ 지  출

(단위: 백만원)

과 목	시행계획	승인	증 감	비 고
합 계	21,500	21,500	-
□ 공사비	19,704	19,704	-
○ 기초기반조성	11,369	11,369	-
‧ 용수기반	8,000	8,000	-
‧ 통신망	1,252	1,252	-
‧ 지원센터	989	989	-
‧ 실증단지	1,128	1,128	-
○ 시설장비스마트화	8,335	8,335	-
‧ 관수관비	4,658	4,658	-
‧ 기상재해예찰	238	238	-
‧ 병충해 모니터링	489	489	-
‧ 드론방제	214	214	-
‧ 스마트농기계	170	170	-
‧ 생육모니터링	437	437	-
‧ 토양/용수관리	821	821	-
‧ 정보관리시스템	1,308	1,308	-
□ 설계‧감리비	1,796	1,796	-
○ 실시설계비	344	344	-
○ 공사감리비	1,230	1,230	-
‧ 기초기반조성감리	673	673	-
‧ 정보통신감리	142	142	-
‧ 정보시스템감리	415	415	-
○ 사업관리비	222	222	-