원주시 고시 제2024-385호

원주 도시계획시설(대로2-11호)사업 실시계획(변경)인가 고시

원주 도시계획시설(도로)사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따라 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경3차)인가하고, 같은 법 제91조 및 시행령 제100조에 따라 실시계획(변경3차)인가를 고시합니다.

2024년  11월  15일

원  주  시  장

1. 사업시행지의 위치: 원주시 판부면 서곡리 586-70번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

○ 종류: 원주 도시계획시설(대로2-11호)사업

○ 명칭: 둔전길(남원주역세권~대로1-5호선)확포장공사

3. 사업시행자의 성명 및 주소

○ 성명: 원주시장(지역개발과)

○ 주소: 원주시 시청로 1(무실동)

4. 사업의 면적 또는 규모

구분	결정폭원(m)	연장(m)	금회시행	향후시행(m)	비고
대로2-11호	30 ~ 50	1,366	B=25m, L=666.62m A=20,540㎡	-	-

5. 사업의 착수 및 준공예정일(변경있음)

○ 당초: 2022. 4. 29. ~ 2024. 12. 31.

○ 변경: 2022. 4. 29. ~ 2025. 6. 30.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소 (붙임)

7. 법 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항: 해당없음

■ 토지조서

순번	위치	지번	지목	면 적 (㎡)		소 유 자		이해관계인
				공부	편입	주 소	성명	관계인	성명	소유권이외의권리
1	무실동	826	창	143	143	원주시	공
2	"	822-25	도	506	506	원주시	공
3	"	827-3	창	241	241	원주시	공
4	"	827-4	창	33	33	원주시	공
5	"	830-44	대	16	16	원주시	공
6	"	830-43	대	88	88	원주시	공
7	"	828-9	창	24	24	원주시	공
8	"	830-45	창	12	12	원주시	공
9	"	822-27	잡	9	9	원주시	공
10	"	825-13	도	248	248	건설부	국
11	"	828-12	대	60	60	원주시	공
12	"	826-3	도	881	881	원주시	공
13	"	828-10	도	188	188	원주시	공
14	"	828-19	임	1,169	1,169	원주시	공
15	"	825-15	도	70	70	건설부	국
16	"	828-18	도	411	411	원주시	공
17	"	828-15	도	2,479	2,479	원주시	공
18	"	828-14	도	669	669	건설부	국
19	"	828-16	도	123	123	원주시	공
20	"	828-17	임	10	10	원주시	공
21	서곡리	586-70	도	951	951	원주시	공
22	"	586-68	도	2,383	2,383	원주시	공
23	"	1772-11	도	1,228	1,228	건설교통부	국
24	"	591-15	잡	29	29	원주시	공
25	"	591-14	대	2	2	원주시	공
26	"	591-13	도	390	390	원주시	공
27	"	586-69	임	830	830	원주시	공
28	"	586-62	대	250	250	원주시	공
29	"	586-6	도	173	173	원주시	공
30	"	591-10	도	19	19	원주시	공
31	"	591-9	도	38	38		고상도	※미등기
32	"	586-63	대	144	144	원주시	공
33	"	586-7	도	25	25	원주시	공
34	"	590-2	도	221	40	향구리	손계오	※미등기
35	"	586-61	도	119	119	원주시	공
36	"	590-1	전	453	30	원주읍본정2정목61	영전익구 외7인	※미등기
37	서곡리	589-6	도	10	10	향구리	손계오	※미등기
38	"	588-6	도	59	59	원주시	공
39	"	588-4	전	26	26	건설교통부	국
40	"	589-5	도	3	1	향구리	손계오	※미등기
41	"	589-4	도	1,289	1,199	원주읍본정2정목61	영전익구 외 7인	※미등기
42	"	588-8	도	23	23	건설부	국
43	"	588-7	도	18	18	건설부	국
44	"	588-5	도	63	63	건설부	국
45	"	595-61	도	1	1	원주시	공
46	"	589-3	도	304	176	향구리	손계오	※미등기
47	"	595-62	과	18	18	원주시	공
48	"	589-8	임	3	3	원주읍본정2정목61	영전익구 외 7인	※미등기
49	"	595-60	과	34	34	건설부	국
50	"	589-7	임	2	2	원주읍본정2정목61	영전익구 외 7인	※미등기
51	"	597-26	도	79	79	건설부	국
52	"	1772-21	도	803	803	건설교통부	국
53	"	597-24	도	275	275	건설부	국
54	"	601-11	도	32	32	건설부	국
55	"	601-3	도	30	30	건설부	국
56	"	597-25	도	237	237	원주읍육정234	장기헌	※미등기
57	"	601-7	대	34	34	원주시	공
58	"	601-10	대	25	25	원주시	공
59	"	595-63	대	9	9	원주시	공
60	"	601-8	도	567	567	건설부	국
61	"	597-21	전	85	85	건설교통부	국
62	"	601-9	전	132	132	원주시	공
63	"	597-1	도	354	354	건설부	국
64	"	601-12	전	43	43	원주시	공
65	"	597-3	도	146	146	건설부	국
66	"	597-22	대	96	96	원주시	공
67	"	601-6	도	68	68	건설교통부	국
68	"	597-23	전	99	99	원주시	공
69	"	603-13	대	41	41	원주시	공
70	"	601-1	도	30	30	건설부	국
71	"	603-7	도	44	44	건설부	국
72	"	599-14	대	9	9	원주시	공
73	서곡리	599-1	도	1	1	건설부	국
74	"	603-14	대	17	17	원주시	공
75	"	599-13	도	7	7	원주시	공
76	"	1772-14	도	11	11	건설교통부	국
77	"	1772-7	도	1,149	582	건설교통부	국
78	"	1772-9	도	144	2	건설교통부	국
79	"	621-12	도	218	218	건설부	국
80	"	621-11	주	81	81	원주시	공
81	"	599-8	도	141	141	건설부	국
82	"	599-2	도	169	169	원주시	공
83	"	598-3	전	11	11	원주시	공
84	"	599-12	대	96	96	원주시	공
85	"	598-4	전	18	18	원주시	공
86	"	621-3	도	20	20	국토교통부	국
87	"	599-15	임	94	94	원주시	공
88	"	599-5	대	17	17	원주시	공
89	"	622-15	전	207	5	원주시	공
90	"	622-7	도	461	19	건설부	국
91	"	622-17	도	293	12	건설부	국
92	"	622-8	도	149	26	원주시	공
93	"	622-1	도	311	65	원주시	공
94	"	621-6	주	15	15	국토교통부	국
95	"	622-4	도	241	2	건설부	국
96	"	621-9	전	3	3	국토교통부	국
97	"	621-13	전	6	6	국토교통부	국
합계		91필지		23,606	20,540

■ 지장물조서

조서 일련 번호 (건물조서)	번호	소재지	지번		지장물 종류	구조(규격)	수량 (면적)	단위	이해관계인
			당초	분할					주 소	성 명
1	109	판부면 서곡리	621-1	621-11	세차장	기계실, 하우징, 토목공사 폐수설비포함	1	식	원주시 시청로 1	원주시
	110	”	”	”	가로등		2	식	“	“
	111	”	”	”	바닥포장	아스콘	54.1	㎡	“	“