영월군 고시 제2024-261호

영월 군계획시설(도로)사업 실시계획 (변경) 인가 고시

영월군 고시 제2024-118(2024.6.25.)호로 최초 결정, 영월군 고시 제2024-156 (2024.8.8.)호로 실시계획 인가된 영월 군계획시설 도로(소로3-8)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조의 규정에 따라 실시계획 (변경) 인가 하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조 규정에 따라 인가 사항을 아래와 같이 고시합니다.

2024년   12월   27일

영  월  군  수

가) 사업시행지의 위치 (변경없음)

￮ 강원특별자치도 영월군 영월읍 삼옥리 1390-3번지 일원

나) 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

￮ 종류 : 군계획시설(도로)사업

￮ 명칭 : 소로3-8호선 도로 개설사업(폭원 6m, 연장 519m)

다) 사업시행의 면적 및 규모(변경없음)

토지이용현황 (㎡)	지목별	계	전	임야		도로	묘지
	면적	5,743	3,506	1,709		359	169
토지이용계획 (㎡)	용도별	계			도로(1개 노선)
	면적	5,743			5,743

라) 사업시행자의 성명 또는 주소(변경없음)

￮ 성명 : 영월군수

￮ 주소 : 영월군 영월읍 하송로 64

마) 사업의착수예정일 및 준공예정일(변경)

￮ 착수예정일: 실시계획 인가일

￮ 준공예정일: (당초) 2024. 12. 31.

(변경) 2026. 12. 31.

바) 수용 또는 사용할 토지․건물의 소재지․지목 및 소유권이외의 권리명세(변경)

￮소로3-8호선

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자
				대장	편입	당 초		변 경
						성명	주소	성명	주소
합계	23필지	-	-	22,882	5,743
1	삼옥리	354-3	도	2,147	85	국 (국토교통부)	-	국 (국토교통부)	-
2	삼옥리	648-1	도	15,351	274	영월군	-	영월군	-
3	삼옥리	1014-6	전	181	181	영월군	-	영월군	-
4	삼옥리	1374-1	전	335	335	영월군	-	영월군	-
5	삼옥리	1389-2	전	22	22	영월군	-	영월군	-
6	삼옥리	1389-3	전	93	93	영월군	-	영월군	-
7	삼옥리	1390-3	임	787	787	영월군	-	영월군	-
8	삼옥리	1391-2	전	260	260	김0상	서울특별시 도봉구 노해로70길	영월군	-
						오0진	서울특별시 양천구 중앙로29길
9	삼옥리	1393-2	전	103	103	영월군	-	영월군	-
10	삼옥리	1393-3	전	2	2	영월군	-	영월군	-
11	삼옥리	1393-4	전	324	324	영월군	-	영월군	-
12	삼옥리	1394-1	전	283	283	영월군	-	영월군	-
13	삼옥리	1395-2	전	349	349	영월군	-	영월군	-
14	삼옥리	1398-4	전	224	224	영월군	-	영월군	-
15	삼옥리	1398-6	전	393	393	영월군	-	영월군	-
16	삼옥리	1399-3	임	157	157	영월군	-	영월군	-
17	삼옥리	1399-4	임	89	89	영월군	-	영월군	-
18	삼옥리	1408-2	전	194	194	영월군	-	영월군	-
19	삼옥리	1409-2	묘	169	169	영월군	-	영월군	-
20	삼옥리	1410-3	전	108	108	영월군	-	영월군	-
21	삼옥리	1410-4	전	480	480	영월군	-	영월군	-
22	삼옥리	1416-2	임	676	676	영월군	-	영월군	-
23	삼옥리	1417-2	전	155	155	영월군	-	영월군	-

사) 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항(변경없음)

￮ 준공 후 관리청인 영월군에 무상 귀속.  끝.