강원특별자치도 고시 제2025-109호

어론천(신풍지구) 하천공사 시행계획(변경) 고시

하천법 제27조 및 같은 법 시행령 제26조 등의 규정에 의하여 강원도고시 제2023-316호(2023.9.8.)로 시행계획 수립된 어론천 하천재해예방 공사에 대해 아래와 같이 변경 고시합니다.

2025년  3월  24일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 하천공사의 명칭: 어론천(신풍지구) 지방하천 정비사업

2. 하천공사의 목적 및 개요(변경없음)

- 목적: 본 과업은 지방하천인 “어론천”을 홍수에 안전하면서 문화ㆍ생태가 살아있는 수변공간으로 재창출하기 위한 『하천기본계획』에 의거 하천의 치수ㆍ이수ㆍ환경기능을 감안한 기술적인 사항 등을 종합적으로 검토하여 공사를 시행 하는데 목적이 있음.

- 개요: 축제 및 보축 : 978m, 교량 5개소, 가교 2개소 등

3. 하천공사시행지역의 위치(변경없음)

- 강원특별자치도 인제군 남면 어론리, 신풍리에 위치한 지방하천인 어론천

4. 하천공사시행자의 명칭 및 주소(변경없음)

- 명칭: 인제군수(건설과)

- 주소: 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 187번길 8

5. 하천공사의 착수 및 준공예정연월일(변경)

- 기정: 2023년 9월 15일 ~ 2025년 12월 31일

- 변경: 2023년 9월 15일 ~ 2026년 12월 31일

6. 수용 또는 사용하려는 토지 등의 소재지·지번·지목·면적, 토지 등의 관한 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 소유자 외의 권리자의 성명 및 주소

- 편입면적: 39,120.7㎡(기정)

- 편입면적: 35,248.7㎡(변경)  ※ 토지조서 참조 (붙임)

7. 실시설계도서: 인제군청 건설과 비치 및 열람가능

8. 사업비 및 자금조달계획서: 총 사업비 8,428백만원(변경없음)

구분	총사업비 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)						비고
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합계	8,428	0	756	1,000	2,940	2,438	1,294
도비	5,067	-	756	600	2,000	2,303	-
군비	3,361	-	-	400	940	135	1,294

9. 공사예정공정표(변경없음)

구분 공종	요율(%)	추진 계획								계
		3개월	6개월	9개월	12개월	15개월	18개월	21개월	24개월
축제공	10.00%	2.5	2.5	2.5	2.5					10.0
호안공	22.00%		5.0	5.0	5.0	5.0	2.0			22.0
교량공	29.00%		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0		29.0
접속도로공	7%							4.0	3.0	7.0
부대공	32%	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	32.0
계	100%	6.5	16.5	16.5	16.5	14.0	11.0	12.0	7.0	100.0
누 계		6.5	23.0	39.5	56.0	70.0	81.0	93.0	100.0

10. 하천시설의 관리에 관한 사항(변경없음): 준공 이후 인제군에서 유지·관리

11. 폐천부지 등의 발생 예상 면적(변경없음): 해당없음

[붙임] 수용 또는 사용하고자 하는 물건 또는 권리에 관한 명세와 소유자외의 권리자 성명 및 주소

번호	소 재 지	지 번	지목	면 적			소 유 자		관 계 인			비고
				공 부 상 면적(㎡)	편 입 면적(㎡)		성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주소	권리의종류 및내용
					당초	변경
합 계		113필지				35,248.7
1	인제군 신풍리	609-3	대	202	-	4.19	국(국방부)					추가
2	인제군 신풍리	609-4	대	294	13	98.2	국(국방부)
3	인제군 신풍리	610-2	대	463	36	317	국(국방부)
4	인제군 신풍리	611-1	잡	280	-	-	국(국방부)					편입 제외
5	인제군 신풍리	610-1	대	850	-	3.7	국(국방부)					추가
6	인제군 신풍리	616-1	잡	1,053	-	32.4	국(국방부)					추가
7	인제군 신풍리	616-4	제	309	-	31.1	국(기획재정부)					추가
8	인제군 신풍리	618-11	제	17	-	1.8	국(기획재정부)					추가
9	인제군 신풍리	618-4	천	366	44	100	국(기획재정부)
10	인제군 신풍리	620-1	천	65,317	7,107	5,895.4	국(국토교통부)
11	인제군 신풍리	620-4	천	2,038	98.4	101.5	국(국토교통부)
12	인제군 신풍리	623-3	도	334	85	45.1	유◦근	남면 어론리 ◦◦◦
13	인제군 신풍리	623-4	제	309	-	2.7	국(건설교통부)					추가
14	인제군 신풍리	623-5	도	5,076	81.4	4.4	국(건설교통부)
15	인제군 신풍리	765-1	구	3,468	-	9.1	국(농수산부)					추가
16	인제군 신풍리	793-1	제	2,032	1,151	69.5	인제군
17	인제군 신풍리	855	답	506	-	32.6	권◦우 외1인	인제읍 인제로 ◦◦◦번길 ◦◦				추가
18	인제군 신풍리	855-1	도	185	17	40.6	국(국토교통부)
19	인제군 신풍리	855-2	제	615	-	553.2	국(건설교통부)					추가
20	인제군 신풍리	855-3	천	56	45	56	국(건설교통부)
21	인제군 신풍리	856-3	제	985	4	875.5	국(건설교통부)
22	인제군 신풍리	856-4	천	642	469	642	국(건설교통부)
23	인제군 신풍리	857-5	천	496	-	258.8	국(건설교통부)					추가
24	인제군 신풍리	857-6	천	41	19	2.1	국(건설교통부)
25	인제군 신풍리	857-2	답	2,134	-	4.9	국(국방부)					추가
26	인제군 어론리	551	천	367	329.1	1.9	국(건설교통부)
	인제군 어론리	551-1	도	40	11.3	-	국(국토교통부)					편입 제외
27	인제군 어론리	589	잡	230	230	133	국(국방부)
28	인제군 어론리	591	잡	107	107	107	국(국방부)
29	인제군 어론리	603	답	2,362	528.3	587	국(건설교통부)
30	인제군 어론리	676	답	627	316.6	178.4	최◦숙	홍천읍 신장대리 ◦-◦
31	인제군 어론리	866	답	600	527.9	176.9	인제군
32	인제군 어론리	산356	임	184,121	-	-	이◦호	서울 성북구 종암동◦◦-◦◦◦				편입 제외
33	인제군 어론리	538-1	도	100	40.6	100	국(건설교통부)
34	인제군 어론리	538-11	도	453	64	136.7	국(건설교통부)
35	인제군 어론리	538-17	도	575	14	13.5	국(건설교통부)
36	인제군 어론리	561-10	도	58	58	58	국(국방부)
37	인제군 어론리	561-16	전	48	46	48	국(국방부)
38	인제군 어론리	561-17	전	106	-	106	국(국방부)					추가
39	인제군 어론리	561-18	도	4,411	197.6	211.9	국(국방부)
40	인제군 어론리	561-20	도	186	18.4	11.3	국(국방부)
41	인제군 어론리	561-3	도	684	-	129.5	국(국방부)					추가
42	인제군 어론리	561-9	잡	40	40	40	국(국방부)
43	인제군 어론리	563-1	도	218	33	29.7	국(건설교통부)
44	인제군 어론리	563-2	제	457	138.5	166.1	국(건설교통부)
45	인제군 어론리	563-3	도	684	-	1.7	국(건설교통부)					추가
46	인제군 어론리	565-6	제	743	216	115.6	국(건설교통부)
47	인제군 어론리	573-1	전	155	62	47.8	국(국방부)
48	인제군 어론리	573-2	도	106	61	64.2	국(국방부)
49	인제군 어론리	573-3	전	66	66	66	국(국방부)
50	인제군 어론리	574-1	답	127	29	35.8	국(건설교통부)
51	인제군 어론리	574-2	도	188	56	62.9	국(국방부)
52	인제군 어론리	574-3	답	242	242	242	국(국방부)
53	인제군 어론리	574-4	답	192	80.9	92.6	국(국방부)
	인제군 어론리	575-2	도	77	1.3	-	국(국토교통부)					편입 제외
54	인제군 어론리	576-2	도	506	313.7	173.3	권◦일	인천 부병구 일산동 ◦◦◦
	인제군 어론리	576-3	대	3,110	4.4	-	사회복지법인작은공	남면 응봉길 ◦◦-◦◦				편입 제외
55	인제군 어론리	576-4	제	327	230.9	172.9	사회복지법인작은공	남면 응봉길 ◦◦-◦◦
	인제군 어론리	577-1	대	2,920	19.8	-	사회복지법인작은공	남면 응봉길 ◦◦-◦◦				편입 제외
56	인제군 어론리	577-5	답	2,206	-	3.4	권◦일	인천 부평구 일신동 ◦◦◦				추가
57	인제군 어론리	577-10	전	575	-	6	국(국방부)					추가
58	인제군 어론리	577-11	전	698	124	81.4	국(국방부)
59	인제군 어론리	577-12	답	499	173	272.4	국(국방부)
60	인제군 어론리	577-13	답	126	102	101.5	국(국방부)
61	인제군 어론리	577-16	도	22	-	7.4	국(국방부)					추가
62	인제군 어론리	588-1	전	1,234	38.4	5.9	박◦섭	서울 광진구 자양동 ◦◦◦-◦
63	인제군 어론리	589-1	도	150	57.9	23.9	국(국토교통부)
64	인제군 어론리	589-2	제	303	43	206	국(건설교통부)
65	인제군 어론리	589-3	천	591	-	24.5	국(건설교통부)					추가
66	인제군 어론리	589-4	잡	30	-	20.5	국(국방부)					추가
67	인제군 어론리	589-6	잡	106	-	12.6	국(국방부)					추가
68	인제군 어론리	589-7	잡	44	-	1.6	국(국방부)					추가
69	인제군 어론리	589-8	도	6	-	6	국(기획재정부)					추가
70	인제군 어론리	589-9	도	18	-	3.7	국(기획재정부)					추가
71	인제군 어론리	591-1	구	29	25.3	12.9	국(농림수산부)
72	인제군 어론리	591-5	제	295	107.2	252.7	국(건설교통부)
73	인제군 어론리	591-7	잡	1,133	-	271.8	국(국방부)					추가
74	인제군 어론리	591-13	구	61	-	11.1	국(농림수산부)					추가
75	인제군 어론리	594	전	1,933	-	300.1	강◦해	인제군 북면 원통로 ◦◦◦-◦				추가
76	인제군 어론리	602-12	답	980	157	117.5	국(국방부)
77	인제군 어론리	602-7	제	745	228.7	468.1	국(국방부)
78	인제군 어론리	602-8	천	414	10.2	65	국(국방부)
79	인제군 어론리	602-9	답	193	-	61.5	국(국방부)					추가
80	인제군 어론리	604-1	도	160	58.9	154	국(건설교통부)
81	인제군 어론리	604-6	도	164	-	32.7	국(건설교통부)					추가
82	인제군 어론리	605-1	도	33	21	33	국(건설교통부)
83	인제군 어론리	605-2	도	89	-	11.3	국(국토교통부)					추가
84	인제군 어론리	612-4	도	1,900	-	10.8	국(농수산부)					추가
85	인제군 어론리	622-1	도	119	18	106.3	국(건설교통부)
86	인제군 어론리	622-2	도	46	-	42.9	박◦인	남면 부평리◦◦◦				추가
87	인제군 어론리	622-5	도	967	-	48.5	유◦철	경북 영덕군 영덕읍 매정◦길◦◦				추가
88	인제군 어론리	622-8	도	78	-	76.5	국(국토교통부)					추가
	인제군 어론리	623	주	834	11.8	-	송◦창	속초시 중앙로◦◦◦				편입 제외
	인제군 어론리	623-1	도	29	22.6	-	국(건설교통부)					편입 제외
89	인제군 어론리	626-1	도	1,064	356.7	69.6	국(국토교통부)
90	인제군 어론리	626-10	도	57	14	53.2	국(국토교통부)
91	인제군 어론리	626-11	도	280	149.7	228.8	국(국토교통부)
	인제군 어론리	627-1	대	7	3.8	-	김◦영	춘천면 요성당리 ◦◦-◦				편입 제외
92	인제군 어론리	627-2	도	160	44.6	75.8	김◦영	춘천면 요성당리 ◦◦-◦
93	인제군 어론리	628-7	도	202	13.7	21.2	국(국토해양부)
94	인제군 어론리	662-5	구	140	-	2.5	국(농림수산부)					추가
95	인제군 어론리	676-3	도	1,538	705	514.4	국(농수산부)
96	인제군 어론리	676-4	제	626	287.1	337.4	국(건설교통부)
97	인제군 어론리	676-5	천	589	13.5	174.6	국(건설교통부)
	인제군 어론리	709-5	구	1.373	18	-	국(농수산부)					공사 제외
	인제군 어론리	733-5	제	1,015	27	-	국(건설교통부)					공사 제외
	인제군 어론리	734-2	주	1,222	5.3	-	배◦호	남면 신남로 ◦◦번길 ◦-◦				공사 제외
	인제군 어론리	738-8	도	666	110.8	-	국(국토교통부)					공사 제외
	인제군 어론리	867-16	천	1,431	154	-	국(건설교통부)					공사 제외
98	인제군 어론리	827-1	답	547	473	153	인제군
99	인제군 어론리	828	잡	244	40	0.9	인제군
	인제군 어론리	863-3	도	775	137	-	국(국토교통부)					공사 제외
	인제군 어론리	866-1	도	135	89.7	-	국(국토교통부)					공사 제외
	인제군 어론리	866-2	도	2,015	521.6	-	국(건설교통부)					공사 제외
100	인제군 어론리	867	전	2,861	-	53.2	조◦길	◦◦◦				추가
101	인제군 어론리	867-1	천	188,883	17,495	15,937.7	국(건설교통부)
102	인제군 어론리	867-10	제	5	-	5	조◦길	◦◦◦				추가
	인제군 어론리	867-17	제	820	198.2	-	국(건설교통부)					공사 제외
103	인제군 어론리	867-11	제	2,124	139.1	668.9	국(건설교통부)
104	인제군 어론리	867-25	도	1,147	530.5	461.1	국(건설교통부)
105	인제군 어론리	867-26	도	313	197	18.9	국(건설교통부)
106	인제군 어론리	867-27	도	305	158	40.2	국(건설교통부)
107	인제군 어론리	867-3	도	373	363	59.7	국(건설교통부)
108	인제군 어론리	867-5	제	547	54.1	18.8	국(건설교통부)
109	인제군 어론리	868-1	제	639	-	639	이◦호	서울 성북구 종암동◦◦-◦◦◦				추가
	인제군 어론리	871	대	2,268	359	-	고◦식	◦◦◦				편입 제외
	인제군 어론리	871-2	답	34	8	-	조◦길	◦◦◦				편입 제외
	인제군 어론리	879	전	263	58	-	유◦철	경북 영덕군 영덕읍 매정◦길◦◦				편입 제외
	인제군 어론리	879-2	전	312	69	-	고◦식	◦◦◦				편입 제외
110	인제군 어론리	산255-2	도	1,281	398	348.4	국(산림청)
111	인제군 어론리	561-8	도	69	-	13	국(국방부)					추가
112	인제군 어론리	604-2	도	436	-	6.9	국(건설교통부)					추가
113	인제군 어론리	622-3	도	66	-	1.5	국(건설교통부)					추가

가. 토지조서

나. 토지에 정착한 물건 또는 그 물건에 관한 소유권 외의 권리: 해당없음

12.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 관한 사항

가. 도시관리계획(시설: 하천) 결정에 관한 사항(변경없음)

나. 도시계획시설(하천)사업 시행자지정에 관한 사항(변경없음)

다. 도시계획시설(하천)사업 실시계획인가에 관한 사항(변경)

1) 사업개요

사업의 종류 및 명칭	사업 위치	사업면적 또는 규모	사업기간(변경)
어론천(신풍지구) 지방하천 정비사업	인제군 남면 어론리 ~ 신풍리 일원	- 규 모: 하천정비 L=3.74km - 면 적: A=39,120.7㎡(기정) 면 적: A=35,248.7㎡(변경)	기정: 시행계획 고시일 ~2025. 12. 31. 변경: 시행계획 고시일 ~2026. 12. 31.

2) 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

- 성  명: 인제군수(건설과)

- 주  소: 인제군 입제읍 인제로 187번길 8

3) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

- 게재생략(하천공사 시행계획 편입조서로 갈음함)

4) 법 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항

- 해당없음

13. 기타사항

- 설계도서 및 편입되는 토지조서 등은 관계인이 열람할 수 있도록 인제군 건설과(033-460-2095)에 비치하며, ｢토지이용규제기본법｣ 제8조 제2항에 따른 지형도면은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람가능 합니다.